	2015. 12. 30.(수) 석간용
	이 보도자료는 2015년 12월 30일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :		물순환안전국 하천관리과			하천관리과장	이진용	2133-3860
					치수계획팀장	손경철	2133-3862
사진없음 ▣		사진있음 □		매수 : 7매	담 당 자	박정훈	2133-3867
서울시, 3년간 12개 침수취약지역 수해 예방사업 완료 - ’15년 신촌로터리 일대 등 3년간 12개 지역 마쳐… 이 일대 4만여 세대 수해 걱정 해소 - ’16년 5개 지역 사업 마무리, ’19년 우기 전까지 34개 전 지역 사업 완료 목표 - 강남역, 사당역 등 5개 ‘특별관리지역’은 시행 가능한 긴급대책 사업과 병행 추진

□ 서울시가 침수취약지역 34개소에 대한 수해 예방 사업을 중점 추진, 지난 3년간(’13년~’15년) 신촌로터리 일대, 선릉역 일대 등 총 12개소에 대한 침수해소 사업을 완료해 이들 지역에서 수해를 입었던 약 4만여 세대가 수해 걱정을 덜게 됐다고 밝혔다.

○ 시는 지난 ’10년과 ’11년 여름 기록적인 폭우로 인한 대규모 침수 피해 이후 수해로부터 안전한 서울을 만들기 위해 34개 침수취약지역을 침수 규모 등에 따라 ▴특별관리지역(11개소), ▴중점관리지역(16개소), ▴기타관리지역(7개소)로 분류해 관리해왔다.

○ 각 지역마다 침수원인을 심층 분석해 하천 및 하수관거 정비, 빗물펌프장 신‧증설, 빗물저류배수시설 설치, 배수구역 경계조정, 유역분리터널 설치 등 지역별 맞춤형 종합개선대책을 마련하고 단계적으로 추진 중이다.

□ 올해의 경우 ▴신촌로터리 일대(하수관거 1.14km 정비) ▴상도동 성대시장 일대(대방천 암거 1.3km 설치) ▴풍납 1, 2동 주민센터 주변(풍납펌프장 유입관거 4.99km 정비) 등 3개 지역의 사업을 완료했다.

○ 신촌로터리 일대: 여름철 집중호우 때마다 도로가 침수되고 하수관 단면 부족으로 빗물 수압에 의해 맨홀뚜껑이 튀어 오르는 등 시민과 차량 통행을 위협하던 곳으로 이 일대 하수관거를 정비해 침수에 대비했다.

○ 상도동 성대시장 일대: 저지대인데다 대방천 복개 암거의 통수 단면이 부족해 침수가 잦았던 지역으로 하수 암거를 추가 매설해 빗물을 분담토록 했다.

○ 풍납1,2동 주민센터 주변: 상습 침수구역으로 풍납펌프장 유입 관거의 유로를 변경하고 이 일대 하수관을 일제 정비해 빗물이 저지대로 집중되는 것을 막아 장마철 피해에 대비했다.

□ 이에 앞서 ’14년에는 4개 지역(영등포구 영림초교 일대, 장안1동 주민센터 주변, 선릉역 일대, 을지로입구역 일대), ’13년에는 5개 지역(구의‧자양동 일대, 면목동 일대, 미아삼거리 일대, 장위동 일대, 가산디지털단지역 주변) 등 9개 지역의 침수해소 사업이 완료됐다.

	침수취약지역	주 요 사 업
’13년	구의·자양동 일대	자양펌프장 증설(3,045㎥/분), 구의문 주차장 저류조 설치(1.6만톤)
	면목동 일대	면목4 펌프장 증설(400㎥/분), 하수관거 3.1km 정비
	미아삼거리 일대	송천펌프장 설치(246㎥/분), 하수관거 730m 정비
	장위동 일대	장위펌프장 증설(442㎥/분), 하수관거 450m 설치
	가산디지털단지역 주변	하수관거 2.24km 정비
’14년	영등포구 영림초교 일대	대림3펌프장 증설(3,411㎥/분), 유입관거 2km 정비
	장안1동 주민센터 주변	장안 2(253㎥/분), 장안4(750㎥/분)펌프장 증설 답십리4펌프장 유역분리 관거 140m 정비
	선릉역 일대	하수관거 1.9km 설치, 삼릉공원 저류조 설치(6,748톤)
	을지로입구역 일대	하수관거 850m 설치

□ 시는 지난 3년간의 침수해소 사업에 이어 ’16년에 5개 지역의 사업을 마무리하고 나머지 17개 지역의 사업도 지속적으로 추진해 ’19년까지 완료할 계획이다.

□ ’16년의 경우 1,328억 원의 예산을 확보한 상태로 노원구 공릉초교 주변, 공항펌프장(마곡) 주변, 용답동․답십리 일대, 신천 지역, 잠원 지역 등 5개 지역의 사업을 마무리할 예정이다.

□ 나머지 17개 지역의 사업도 ’19년 우기 전까지 완료되면 34개 모든 침수취약지역이 30년 빈도(95mm/hr)의 홍수방어 능력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

<’16년 마무리 추진사업>

침수취약지역	주 요 사 업
노원구 공릉초교 주변	공릉2빗물펌프장 설치(520㎥/분), 유입관거 360m 정비
공항펌프장(마곡) 주변	마곡1펌프장 재설치(4,080㎥/분), 마곡2펌프장 설치(2,600㎥/분)
용답동·답십리 일대	하수관거 550m 정비
신천 지역	신천펌프장 유입관거 2.71km 정비
잠원 지역	자연방류관로 640m 설치

<’17년 이후 17개 추진사업>

침 수 취약지역	주 요 사 업	침 수 취약지역	주 요 사 업
광화문 일 대	저류시설 유입관로(220m), C자형 관로개선(850m)	강서구청사거리	하수관거 정비(2.51㎞)
한강로 일 대	펌프장 신설(1,010㎥/분), 유역분리관거 신설(1.03㎞)	시 흥 사거리	시흥천 확장(595m), 하수관거 정비(8.7㎞)
신월지역 (3개소)	빗물저류배수시설 설치 (터널 3.61km)	대치역 사거리	도곡빗물펌프장 설치(900㎥/분)
사당역	저류조(2개소 1.6만톤) 설치, 하수관거 정비(4.1㎞)	내방역 사거리	하수관거 정비(2.1㎞)
도림천 (2개소)	서울대 정문앞 저류조 (4만톤) 설치	암사역 일 대	하수관거 정비(1.97㎞)
강남역 일 대	배수구역 경계조정(116.5ha), 유역분리 터널 설치(1.3km)	망원유역	빗물저류조(10만톤) 설치, 하수관거 정비(420m)
길동 일대	하수관거 정비(4.46㎞)	오류동역 주변	오류천 확장(1.7㎞)

<연도별 투자계획>

(단위 : 억원)

사업명	계	’15년 이전	’16년	’17년	’18년	’19년
침수취약지역 해소(34개소)	11,032	5,561	1,328	2,952	1,063	128

□ 특히 시는 앞으로의 침수해소 사업 추진에 있어 장기간 사업 추진이 필요한 5개 특별관리지역(강남역 일대, 사당역 일대, 한강로 일대, 신월지역, 도림천 일대)에 대해서는 계획에 따른 사업 진행과 더불어 임시저류조 설치, 유수장애교량 재설치, 도로물막이판 설치, 빗물유입시설 확충 등 시행 가능한 모든 긴급대책을 병행 추진 중에 있다.

주요특별 관리지역	긴 급 대 책(완료)	주요 사업
강남역 일대	용허리저류조(1.5만톤) 설치, 3연배수로 격벽(39개소) 철거, 빗물유입시설(367개소) 설치	배수구역 경계조정(’15.12~’16.6) 유역분리터널 설치(’16.3~’19.6)
사당역 일대	임시저류조(2개소) 설치, 유압식 도로물막이판(4개소) 설치	저류조 및 관거개선 공사(’16.9~’18.12), 빗물저류배수시설 추진방안 마련
한강로 일대	만초천 유수장애교량 개선, 빗물유입시설(140개소) 확충	펌프장 설치 및 유역분리관거 공사중 (’13.12~’17.7)
신월지역	오금펌프장(3,650톤/분) 증설, 하수관거(850m) 개량	수직구 6개소 굴착완료, 빗물저류배수시설 설치 중(터널 3.61km)(’15.1~’17.12)
도림천 일대	도림천 유수장애교량(신림3교, 충무교) 개선, 빗물펌프장 (신림2,5, 조원동) 증·신설	서울대 내 저류조 2개소 설치 완료 서울대 정문앞 저류조(4만톤) 설치 중 (’15.8~’17.5)

□ 김학진 서울시 물순환안전국장은 “오는 ’19년 주요 침수취약지역 34곳에 대한 사업이 완료되면 침수피해를 입었던 10만 여 세대의 침수피해를 막을 수 있을 것”이라며 “앞으로도 침수취약지역 해소 사업을 연도별 계획에 따라 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

※붙 임: 1. 34개 주요 침수취약지역 해소사업 추진현황

2. 침수취약지역 해소사업 추진 현장 사진

<34개 주요 침수취약지역 해소 추진현황>

기완료(12개소)	‘16년(5개소)	‘17년(10개소)	‘18년(6개소)	‘19년(1개소)
∘구의, 자양동 일대 ∘면목동 일대 ∘미아삼거리역 일대 ∘장위동 일대 ∘가산디지털단지역 주변 ∘선릉역 주변 ∘을지로 입구역 일대 ∘영림초교 주변 ∘장안1동주민센터 주변 ∘성대시장 일대 ∘신촌현대백화점 일대 ∘풍납1,2동 주민센터	∘공릉초교 일대 ∘공항펌프장(마곡) 주변 ∘용답동답십리 일대 ∘신천지역 ∘잠원지역	∘한강로 일대 ∘대치역사거리 ∘광화문 일대 ∘신월지역(2개소) ∘강서구청사거리 ∘시흥사거리 일대 ∘내방역사거리 일대 ∘암사역 주변 ∘오류동역 주변	∘도림천(3개소) ∘사당역 일대 ∘길동 일대 ∘망원유역 일대	∘강남역 일대

<사업 추진 현장 사진>

도림천 일대(신림2빗물펌프장 설치-’15년)	시흥사거리 일대(시흥계곡 저류조-’15년)
상도동 성대시장 일대(대방천 암거 설치-’15년)	신월 빗물저류배수시설 공사중(’17년 완료예정)