휴일 및 야간작업 계획(`17.01.21.토 ~ `17.01.25.수)

사 업 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	휴일 및 야간작업내용	근무자
	주요작업내용	시공사		감리단
1월 21일(토) 휴일 주간	H1 정거장 : NTR 추진틀 해체 및 토공 바닥 정리, 2,3번관 그라우팅 주입 작업, 종점 8단 버팀 설치, 수평 수직 앵글 설치, 7단 띠장 및 버팀보 설치, 수직 수평 앵글 설치 집토 및 브레이커 작업 강재토류판 설치 고덕천교 : 1span 기초 철근 조립 및 2,3span 보호벽 철근 조립 및 거푸집 설치 본선 1구간 : 아스콘 깨기, 터파기 및 상차 가시설 피스브라켓 제작	현장소장 공무팀장 안전팀장 공사팀장 안전차장 공 사 협력업체	전병준 김동억 최두진 최윤식 천재원 조귀연 남윤창	박상대
1월 22일(일) 휴일 주간	H1 정거장 : NTR 추진틀 해체 및 토공 바닥 정리, 2,3번관 그라우팅 주입 작업, 종점 8단 버팀 설치, 수평 수직 앵글 설치, 7단 띠장 및 버팀보 설치, 수직 수평 앵글 설치 집토 및 브레이커 작업 강재토류판 설치 고덕천교 : 1span 기초 철근 조립 및 2,3span 보호벽 철근 조립 및 거푸집 설치 본선 1구간 : 아스콘 깨기, 터파기 및 상차, 가시설 피스브라켓 주형보 설치	공사팀장 안전차장 공사부장 공무대리 협력업체	최윤식 천재원 장현준 정금환 한명수	홍춘선
1월 23일(월) 평일 야간	H1 정거장 : NTR 시점 2,3번관 그라우팅 작업	한신 : 최윤식 등 15명 협력사 : 공사팀 박현진		박상대
1월 24일(화) 평일 야간		최윤식 등 15명 협력사 : 공사팀 한명수		홍춘선
1월 25일(수) 평일 야간		최윤식 등 15명 협력사 : 공사팀 남윤창		박찬열
1월 26일(목)	휴무 : 설 연휴	-
1월 27일(금)		-