휴일 및 야간연장작업 계획(`17.02.04.토 ~ `17.02.10.금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
		주요작업내용	인원	장비
2월 04일 (토)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선 시점 아스콘 깨기 및 피스브라켓설치,주형보 및 주형보 받침 설치 - 고덕천교 1SPAN 벽체 철근 및 거푸집 설치, 2,3SPAN 기초 철근 조립 - 정거장 종점 사토반출,9단 강재토류판 설치,9단 버팀,띠장,보걸이 설치 5단 어스앙카 띠장 설치 - NTR 시점 4,5번관 강관 압입 및 굴착	직영:7명 구조물공:7명 NTR:7명 가시설:7명 토류공:4명 계 32명	카고:3대 백호:5대 크람쉘:1대 쇼벨:1대 덤프:5대 바브켓:1대	품질 공사 공무	한예석 장현준 조귀연 정금환	박찬열
2월 05일 (일)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선 시점 아스콘 깨기 및 피스라켓,주형보 및 주형보 받침 설치 - 고덕천교 1SPAN 벽체 철근 및 거푸집 설치, 2,3SPAN 기초 철근 조립 - 정거장 종점 사토반출,9단 강재토류판 설치,9단 버팀,띠장,보걸이 설치 5단 어스앙카 띠장 설치 - NTR 시점 4,5번관 강관 압입 및 굴착	직영:7명 구조물공:7명 NTR:7명 가시설:7명 토류공:4명 계 32명	카고:3대 백호:5대 크람쉘:1대 쇼벨:1대 덤프:5대 바브켓:1대	공무 공사	김동억 유호진 김정삼 노기현	홍춘선
2월 06일 (월)	비개착구간 (야간)		관리자1명 NTR:4명	바브켓:1대 백호:2대	공사팀장	최윤식	박상대
2월 07일 (화)	비개착구간 (야간)		관리자1명 NTR:4명	바브켓:1대 백호:2대	안전차장	천재원	조기홍
2월 08일 (수)	비개착구간 (야간)	- NTR 시점 4,5번관 강관 압입 및 굴착	관리자1명 NTR:4명	바브켓:1대 백호:2대	공사대리	노기현	장희재
2월 09일 (목)	비개착구간 (야간)		관리자1명 NTR:4명	바브켓:1대 백호:2대	공사과장	김정삼	박찬열
2월 10일 (금)	비개착구간 (야간)		관리자1명 NTR:4명	바브켓:1대 백호:2대	공사기사	조귀연	홍춘선