휴일 및 야간연장작업 계획(`17.03.25.토 ~ `17.03.29.수)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 구간	휴일 및 야간작업내용				관리자(근무자)
		주요작업내용	감리원검측사항	인원	장비
3월 25일 (토)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선시점 사거리 지장물 매달기, 주차장앞 복공 설치 - 고덕천교 1스판 내부 거푸집 해체, 2,3스판 가벽 거푸집 철근 조립 - 정거장 시점 토공 굴착 및 사토 반출, 6단 보걸이설치,EGI토류판 설치, - 환기구#2 터널굴착 - NTR 6,7 강관 압입 및 굴착, 1.2.3번 강관 절단, 6.7번관 외부 그라우팅 주입	-	직영:11명 구조물공:10명 NTR:9명 가시설:17명 토류공:5명	카고:3대 백호:7대 크람쉘:1대 쇼벨:1대 덤프:7대 바브켓:1대 드릴:1대	공사 품질 공무	장현준 조귀연 이무현 김재정	장희재
3월 26일 (일)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선시점 사거리 지장물 매달기,주차장앞 복공 설치 - 고덕천교 1스판 내부 거푸집 해체, 2,3스판 가벽 거푸집 철근 조립 - 정거장 시점 토공 굴착 및 사토 반출,6단 보걸이 설치,EGI토류판 설치 - 환기구#2 터널굴착 - NTR 6,7 강관 압입 및 굴착, 1.2.3번 강관 절단, 6.7번관 외부 그라우팅 주입	-	직영:11명 구조물공:10명 NTR:9명 가시설:15명 토류공:5명	카고:3대 백호:7대 크람쉘:1대 쇼벨:1대 덤프:7대 바브켓:1대 드릴:1대	공사 품질 공무	박원철 노기현 이무현 정금환	홍춘선
3월 27일 (월)	비개착구간 (야간)	- NTR 6,7번 관 강관 압입 및 굴착 - 작업시간 : 18:00 ~ 05:00		추진공:3명 직원:1명	바브켓:1대 백호:1대	공사차장	강민선	조기홍
3월 28일 (화)	비개착구간 (야간)	- NTR 6,7번 관 강관 압입 및 굴착 - 작업시간 : 18:00 ~ 05:00		추진공:3명 직원:1명	바브켓:1대 백호:1대	공사팀장	최윤식	박찬열
3월 29일 (수)	비개착구간 (야간)	- NTR 6,7번 관 강관 압입 및 굴착 - 작업시간 : 18:00 ~ 05:00		추진공:3명 직원:1명	바브켓:1대 백호:1대	공사과장	김정삼	박상대
3월 30일 (목)	비개착구간 (야간)	-
3월 31일 (금)	비개착구간 (야간)	-