’18년 2분기 구로구 가족센터 건립사업 추진실적 양식

□ 가족센터 건립 계획

○ 기관명 : 서울특별시청(구로구)

○ 사업목적 : 주거환경이 열악하고 중국동포 밀집 거주지역인 가리봉동에 주민편익을 위한 가족통합지원센터를 건립하여 맞춤형 행정·복지 서비스 제공

○ 사업내용

- 위치 : 우마2길 29-5 외 7필지

- 규모 : 사업면적 1,907.8㎡, 건축연면적 4,340㎡(지상4층/지하2층)

- 사업기간 : 2015.03 ~ 2018.09

○ 주요기능 및 주요시설

- 다양한 가족과 외국인(중국동포)에 대한 통합적인 가족지원 서비스 제공 및 가족기능 강화

- 가족지원센터, 가족상담실, 교육 및 실습실, 공동육아나눔터 등

□ 국고보조금 실집행 현황(~‘18.8월말)

(단위 : 백만원)
예산 현황
					실집행액
계	국고	교부세	지방비	자부담/ 후원금	국고	교부세	지방비
12,196	5,048	-	7,148	-	5,048	-	2,203

* 국고보조금은 집행완료 시, 지방비 집행액만 업데이트

□ 사업추진현황(~‘18.8월말)

연	월	사업추진현황	국고보조금 집행실적
2014	12월	▪기본 방침수립(구청장 방침)
2015	10월	▪중앙 투자심사 완료
	12월	▪국고보조금 등 건립예산 확보
2016	5월	▪도시계획시설(사회복지시설) 결정
	6월	▪건축 실시설계 용역 착수
	8월	▪도시계획시설사업 실시계획인가 고시
	9월	▪토지보상 협의
	10월	▪수용재결을 위한 열람공고 시행
	11월	▪건축설계VE 심사
	12월	▪설계용역 준공 및 공사발주	설계용역비, 측량비 : 385백만원
2017	1월	▪서울시 토지수용위원회 심의
	2월	▪건축공사 계약
	3월	▪토지수용 및 공사착공	설계용역비 : 21백만원
	4월	▪건축공사 시행(구유지 부분공사)
	5월	▪미 이주세대 인도청구소송
	6월	▪미이주세대 인도청구의 소제기 및 형사고소	공사비 : 882백만원
	7월	▪사업부지내 건축물 철거 완료 ▪흙막이·터파기 공사 시행	관급자재 : 49백만원
	12월	▪터파기 공사 완료, 골조공사 진행	공사비 : 3,711백만원
2018	1월	▪골조공사 및 지하2층 레미콘 타설
	2월	▪지하2층 레미콘 타설
	3월	▪지하1층 레미콘 타설
	4월	▪지상부 골조공사 진행
	5월
	6월
	7월
	8월

□ 향후 추진일정

연	월	사업추진계획
2018	9월
	10월
	11월
	12월