노후 도로조명시설 개량 사업

예산서 P. 123

1		기본현황

❏ 사업개요

기준년도	2019년
회계구분	일반회계		□ 신규 √ 계속
			□ 경상 □ 투자
사업요약	15년 이상 노후 가로등시설 개량
사업기간	□ 연례반복	□ 사업기간 (2019년 01월 ~ 2019년 12월)
사업위치	(주소입력) 서울특별시도상 가로등
총사업비	총(111,600,000)천원 / [국비] ( ) [시비] (111,600,000천원) / [구비] ( ) [기타] ( )
사업비 (당해년도)	(23,109,000)천원 / [국비] ( ) [시비] (23,109,000천원) (실링 13,500,000천원) / [구비] ( ) [기타] ( )

❏ 사전절차 대상 및 이행여부

투자 심사	학술 용역	기술 용역	지방 보조금	정보화 예타	공유 재산	출자 출연	민간 위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

심의일자	심의결과	비 고
0000년 00월 00일	조건부승인 / 승인 / 반려

□ 민간보조      □ 자치단체보조

지원형태	근 거	분담금액(비율)			심의결과
		국비	시비	구비
사업비보조
운영비보조

❏ 사업 담당자

실.국	부서	과장	팀장	주무관

2		예산(안)설명

❏ 예산(안)총괄  (e-호조 연동)

(단위: 천원)

구분	2017년 예산액	2018 예산액	2019 예산(안)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	11,160,000	17,895,000	23,109,000	5,214,000	29.13
시설비	11,160,000	17,895,000	23,109,000	5,214,000	29.13

❏ 예산(안)요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 예산액	2019년 예산(안)	증감사유
시설비	17,895,000	23,109,000	전년도 미추진분 추진

❏ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위: 백만원)

구 분		계	기투자 (~2016)	2018	2019	2020 이후	비고
계		111,600	11,160	17,895	23,109	59,436
	시설비	111,600	11,160	17,895	23,109	59,436
	감리비

3		사업설명

❏ 사업목적

○ 15년이상 경과된 노후 가로등 선로(저압케이블)를 교체하고, 전기설비기술기준, KS도로조명기준 등 관련 법, 기준에 의거 개량

-  노후 선로(저압케이블)의 누전으로 인한 감전사고 등 전기안전사고를 선제적 예방조치하고, 서울시 도로조명 수준을 선진국 수준으로 추진, 안전하고 쾌적한 야간 도시환경을 시민에게 제공

❏ 사업근거

○ 한국산업규격(KS A3701 도로조명 기준)

○ 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부), 전기설비기술기준

○ 사업방침

-00.00.00  구청장방침  등

-

-`

❏ 추진경위

○ `

❏ 사업내용

○ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.

○

❏ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위치 : 서울특별시도상 가로등

○ 규모 : 노후 케이블 개량 : 83km

- 가로등 3,070등 개량, 보행등 1,976등 개량

- 가로등 분전함 199면 개량

- 가로등주 2,954본 개량

○ 준공 : 2019.12.30.

❏ 추진일정

(단위: 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	세부추진내용
계
현황조사 및 설계	2019. 1. ~ 3.
심의 및 심사	2019. 3. ~ 5.		좋은빛심의 및 계약심사
공사발주	2019. 4. ~ 6.		굴착복구비 선납
공사시행	2019. 5. ~ 12.		관급자재비 지급
준공	2019. 12.		준공

4		사업효과

❏ 최근 3년간 추진실적

□ 달성목표 :                      100%

구 분	15년	16년	17년
계획	❍❍회	❍❍회	❍❍회
달성	❍❍회	❍❍회	❍❍회

2016년
2017년
2018년

❏ 향후 기대효과

○

5		최근3년 결산현황

(단위: 천원)

연도	최종예산 (A)	전년이월 (B)	예산변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2015
2016
2017

6		참고자료

□ 기본계획서  □ 사전협의결과서   □ 추진결과보고서   □ 위치도    □ 성인지    □ 기타

▢ 위치도 및 현황사진

위  치  도

현 황 사 진