2017년 세출예산이월명세서

□ 국가하천 유지보수사업 이월명세 (서울특별시)

<일반회계>                                                                                                      (원)

구분	예산과목 (세부사업명)	계약건명	예산액	계약액	지출액	이월요구액	이월사유	비 고 (불용액)
	합 계
‘17년	합 계
	5331-308 (국가하천 유지보수)
	330-03	서울특별시 (국가하천유지보수 1식)	2,519,,000,000	2,516,217,780	2,276,092,780	240,125,000	절대공기부족(240,125천원)	(2,782,220)

국가하천유지보수(서울특별시)

(담당자 이평주 / 연락처 : 02-2133-3884)

□ 예산현황

<일반회계:서울특별시 총괄>                                                    (원)

예산과목	‘17예산	지출원인 행 위 액	지 출 액	이월요구액	비고
5331-308-330-03	2,519,000,000	2,516,217,780	2,276,092,780	240,125,000	▪계약일 : ‘17.12.26 ▪완공일 : ‘18.05.24

□ 사업내용

연번	부서명	하천명	사업내용	사업비	비고
합계			국가하천유지보수	2,519
1	한강 사업본부	한강	제방사면보수, 고수호안정비, 하상준설, 시설부대비	1,017	사고이월 (240,125천원)
2	성동구	중랑천	제방안전점검	22
3	동대문구	중랑천	제방옹벽 보수보강, 하상준설	258
4	성북구	중랑천	제방 및 둔치예초	145
5	도봉구	중랑천	제방 및 둔치예초, 제방 안전점검	157
6	양천구	안양천	노후계단정비, 제방정비, 제방예초, 노후배수로 정비	342
7	강서구	안양천	수목제거	25
8	구로구	안양천	교목관리, 계단정비, 녹지예초, 호안정비, 둔치 예초 및 정비	196
9	금천구	안양천	제방보수, 교목 및 관목관리, 둔치정비,호안정비, 제방예초	279
10	영등포구	안양천	저수호안 보수, 노후배수로 정비	78

□ 이월요구 사유

ㅇ 국가하천유지보수(한강사업본부)

- 사 업 명 : 양화, 강서한강공원 고수호안 정비사업

․ 위    치 : 양화, 강서한강공원 내(마곡 및 가양대교 인근)

․ 사업기간 : 2017. 12. ~ 2018. 5.

․ 사업내용 : 경계목 철거 및 설치(2,490m), 폐기물처리(416ton) 등

․ 사 업 비 : 240,125천원

- 이월요구사유

․ 당초에 예초목적으로 예산을 신청하였으나, 사업내용이 고수호안 경계목 정비로 변경됨에 따라 변경신청에 따른 관련기관 업무협의(서울지방국토관리청)에 장시간 소요되었음.

․ 금년 하반기 공사발주(11월27일)로 인한 동절기 도래 및 절대공기 부족으로 안전하고 원활한 사업추진을 위하여 부득이 사고이월을 요구함.