서울특별시 소관사업 추진 현황

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
환승 시설	○ 삼성역 일대 통합역사 및 지하공간 개발사업	196면	당초 : ’15.11 - ’23.12 변경 : 변경 없음	당초 : 528,861 변경 : 변경없음 ※철도건설사업비(7,779억원) 제외	기본설계 중

환승시설-1		삼성역 일대 통합역사 및 지하공간 개발 사업

(담당자 : 고진성, 동남권사업단, 02-2133-8257)

○ 사업개요

- 위    치 : 삼성역 사거리(2호선 삼성역)~코엑스 사거리(9호선 봉은사역)

- 규    모 : 지하 6층, 연면적 약 16만㎡(복합환승센터 630m, 철도본선 370m)

- 주요시설 : 철도통합역사, 버스환승정류장, 지상광장, 시민 편의공간 등

- 사업기간 : '15. ~ '23.

- 총사업비 : 1조 3,067억원(철도건설사업 : 7,779억원, 지하공간 개발 : 5,288억원)

○ 연차별 투자실적(별첨)

○ 추진경위

- ’14.  4월	:  코엑스~잠실운동장 일대 종합발전계획 발표

- ’15.11월	:  영동대로 지하 5개 철도사업 통합추진 결정(국토부-서울시)

- ‘16.5월      :  영동대로 통합개발 기본구상

- ’16.10월     :  통합개발 MOU 체결(국토부-서울시), 삼성동탄 착공

- ‘17.6월      :  영동대로 복합개발 기본계획 발표

- ‘17.10월     :  국제설계공모 완료(정림건축･DPA컨소시엄)

- ‘18.2월      :  기본설계 착수

○ 추진현황

- 기본설계 : 진행중(정상추진)

※ 광역복합환승센터 개발계획안 주민공람 중(‘18.4.2~4.20)

- 공사/보상 : 시기미도래

※ 전체 공정율 : 시기미도래(‘19.5월 착공 예정)

○향후계획

- 기본설계 : ’18.2월~‘19.2월

- 실시설계 및 시공 : ’19.5월~‘23.12월