문서번호	교량보수과-2693
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
협 조

(잠실철교(도로교) 보수공사)

잔여물량 추가시공 및 집행(낙찰)잔액 활용계획

2014. 7.

동부도로사업소

(교량보수과)

(잠실철교(도로교) 보수공사)

잔여물량 추가시공 및 집행(낙찰)잔액 활용계획

「잠실철교(도로교) 보수공사」는 도장공사로서 사업예산의 부족으로 예산범위내 발주시행하였으나, 예산부족으로 미 시공 잔여구간에 대하여 집행(낙찰)잔액을 활용 추가시공하여 효율적인 유지관리로 교량관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	공사개요

공 사 명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

공사개요

◯ 잠실철교 보수(도장) A= 7,282㎡

◯ 한강교량 긴급복구 비축자재 정비(도장) A=2,582㎡

공사기간 : 2014. 5. 12  ~ 11.28

총공사비 :  872,890천원

Ⅱ	보고내용

본 공사의 도장은 A=9,282㎡중 예산범위내 A=7,282㎡를 발주하였으나, 잔여물량 A=1,800㎡가 미도장 상태로 남아 미관 및 유지관리의 효율성 저하우려됨

잔여물량 A=1,800㎡ 시공에 따른 공간비계매기, 바지선 활용, 보호막 설치 등의 공종에 대한 물량증가로 추가 작업지시가 요구되는 실정임

잔여물량 시공에 따른 공사비 현황

공 종	단위	수 량			금 액(천원)			비고
		당초	변경	증∙감	당초	변경	증∙감
합 계					758,540	958,864	200,324
표면처리 및 도장	㎡	7,282	9,082	1,800	440,549	559,743	119,194
공간비계설치	㎡	4,850	6,050	1,200	218,155	263,400	45,245
바지(예인)선 작업	일	22	27	5	44,681	56,063	11,382
보호막 설치	㎡	10,789	13,459	2,670	55,155	71,298	16,143
비계 안전성 구조검토	식	-	1	1	0	8,360	8,360

예산집행 현황                                         (단위:천원)

사 업 명	예산액 (재배정액)	기 원인행위액	집행잔액 (낙찰잔액 포함)	잔여 물량 시공		비 고
				추 가 소요액	부족예산액
잠실철교 보수공사	880,000	758,540	121,460	200,324	78,864

Ⅲ	조치의견

잔여 시공구간에 대하여 집행(낙찰)잔액을 활용, 효율적 유지관리를 위해여 예산의 범위내에서 추가 작업시행(A≒1,120㎡)코자 하며

부족예산액(78,864천원)은 잠실철교 도장공사의 금년도 마무리를 위해 사업주관부서인 도로시설과에 추가 예산을 요청하고자 함.

붙임 : 잠실철교(도로교) 보수공사 추가시공 계획 평면도 1부.  끝.