【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

◦ 요청번호 : 2017 –  82호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리 기술자 부담여부	비고
작업일 : 2017. 11. 25. 시 간 : 07:00～17:00	휴 일	P1~P2 P3~P5	시공사	○	시공사
			발주청
			감리사
작업내용	▫ 아치교(본선부) 거치작업 (P2→가설벤트(1)→가설벤트(2)) ▫ 상부슬래브(접속교) 철근배근 작업

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2017. 11.  21.

현장대리인  이 철 우 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부 하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2017 – 82호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2017. 11. 25. 시 간 : 07:00～17:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요 함.	고 급	오 세 영
		중 급	이 동 희
		고 급	정 효 민

2017. 11.  21.

책임건설사업관리기술자  오 세 영 (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

◦ 요청번호 : 2017 –  83호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리 기술자 부담여부	비고
작업일 : 2017. 11. 26. 시 간 : 06:00～17:00	휴 일	P1~P2 P3~P5	시공사	○	시공사
			발주청
			감리사
작업내용	▫ 아치교(본선부) 거치작업 (가설벤트(2)→P3) ▫ 상부슬래브(접속교) 철근배근 작업

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2017. 11.  21.

현장대리인  이 철 우 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부 하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2017 – 83호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2017. 11. 26. 시 간 : 06:00～17:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요 함.	고 급	오 세 영
		중 급	이 동 희
		고 급	정 효 민

2017. 11.  21.

책임건설사업관리기술자  오 세 영 (인)

도시기반시설본부장 귀하

휴일 작업 계획

( 2017년 11월 25~26일 )

1.사업명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

2.작업 공종 및 구간

작업일	시공위치	작업내용	근무인원
			건설사업단	시공사
11.25 (토)	P1~P5	▫ 아치교(본선부) 거치작업 (P2→가설벤트(1)→가설벤트(2)) ▫ 상부슬래브(접속교) 철근배근 작업	3	4
11.26 (일)	P1~P5	▫ 아치교(본선부) 거치작업 (가설벤트(2)→P3) ▫ 상부슬래브(접속교) 철근배근 작업	3	4

3.휴일작업 근무자 명단

2017.11.25.(토)				2017.11.26.(일)
구분	직무	성명	비고	구분	직무	성명	비고
정 상 근 무				정 상 근 무

<휴일작업현황> ( 2017년 11월 25~26일 )

- 위 치 도

▫ 상부슬래브(접속교) 거푸집 설치 및 철근배근 작업

▫ 상부슬래브(접속교) 거푸집 설치 및 철근배근 작업

▫ 아치교(본선부) 거치 작업