(중랑, 구로)대기환경정보전광판 설치공사 계획

□ 공사 목적

시민들의 건강을 위한 환경개선으로 현재 내구 연한이 경과된 중랑, 구로             대기환경정보전광판 교체 설치 실시

□ 공사 개요

- 공사명 : (중랑, 구로)대기환경정보전광판 교체 설치

- 일시 : 2017. 11. 16(목) 10:00 ~ 23:00

- 장소 : 구로구 디지털로 32길 97-12(구로구 디지탈단지 입구)

중랑구 망우로 203(중랑역 동양엔파트 앞)

- 인원 : 7명(현장대리인, 설치작업 4명, 차량유도원 2명)

- 현장감독 및 안전점검 : 보건환경연구원 대기측정관리팀 직원 3명

- 투입장비

구분	카고크레인(5톤)	저상차량(5톤)	트럭(2.5 또는 1톤)	비고
대수	1	1	1

□ 작업 일정표 : 2017. 11. 16.(목) 10:00 ~ 23:00

구분	시간	주요 내용	비고
1	10:00~11:00	안전관리 교육 및 장비 확인 등 ※ 안전을 최우선으로 현장감독 수행	중랑구
2	11:00~15:00	중랑구 대기환경정보전광판 설치 (조립 및 설치, 전기, 통신, 테스트 등 포함)	중랑구
3	15:00~17:00	휴식 및 구로구 이동	휴식 및 이동
4	17:00~21:00	구로구 대기환경정보전광판 설치 (조립 및 설치, 전기, 통신, 테스트 등 포함)	구로구
5	22:00~23:00	휴식 및 유무 확인 등 마무리	구로구

□ 현장근무자(감독) : 권명희, 김승필, 박창호

□ 주요 연락처 : 기관별/담당자별

연번	소속	연락처
1	서울시보건환경연구원	*************
2	구로구청(도로굴착팀) 중랑구청(굴착보도개선)	02-860-3130 02-2094-2704
3	구로경찰서(교통안전계) 중랑경찰서(교통안전계)	02-840-8352 02-2171-0352
4	㈜코리아싸인	*************

□ 현장 위치

중랑구	구로구