□ 공통 요구자료 (도시기반시설본부 해당 공통요구자료)

7. 설계변경 공사현황

- 총차를 기준으로 최종 설계변경 사항 기재

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당전화번호)
공사명	회사명	계약일	완공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
It-complex 건립공사	대림산업(주) 외 2개사	´09.04.03	´12.02.17	149,457,000,000	7	´14.01.29	´15.10.06	188,490,885,000	주관부서 요구사항 반영 및 ESC 등	건축부 (3708-2605)
서남권야구장 건립공사	현대산업개발 외 2개사	´09.02.04	´10.09.28	47,313,354,000	5	´13.12.30	´15.02.28	168,671,978,000	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2608)
장충체육관 리모델링공사	성지건설(주) 외 1개사	´12.05.30	´13.12.02	10,476,464,000	2	´14.04.17	´14.08.31	11,017,069,000	보조경기장 공법 변경 반영 등	건축부 (3708-2618)
시립노원 시각장애인 복지관건립공사	천마산건설(주)	´12.12.28	´14.07.01	2,721,374,000	1	´14.03.18	´14.07.01	2,982,036,000	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2652)
2013년 운형궁 보수공사	㈜에이치디토건	´13.10.18	´14.01.21	69,979,300	1	´14.01.20	´14.01.21	43,865,680	준공정산 등	건축부 (3708-2630)
서울시 근로자복지관 리모델링공사	㈜가나씨앤씨	´13.08.26	´13.12.23	521,761,740	2	´14.01.23	´14.01.12	609,763,000	준공정산 등	건축부 (3708-2628)
시립영보자애원보수공사	㈜전웅건설	`13.07.04	`14.01.07.	927,146,190	1	`13.12.17	`14.01.07	1,160,350,230	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2628)
글로벌클러스터빌딩건립공사	STX건설(주) 외2개사	`10.06.18	`12.08.24	15,913,921,000	4	`12.12.28	`13.01.24	17,941,600,000	주관부서 계획변경 반영 등	건축부 (3708-2608)
숭례문 방재관리시설 건립공사	원택건설(주)	´12.08.21	´12.12.21	827,878,800	4	´13.04.29	´12.04.30	1,066,170,000	준공정산 등	건축부 (3708-2630)
강북시립미술관건립공사	㈜한화건설 외 3개사	´11.02.10	´13.02.16	22,181,600,000	3	´13.05.31	´13.05.31	25,796,000,000	준공정산 등	건축부 (3708-2656)
서울시민가족 자연체험시설 조성공사	진성종합건설(주)	´13.05.16	´13.07.14	140,875,000	1	´13.07.11	´13.07.14	166,507,000	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2657)
서울풍물시장 가설건축물 축조공사	거현산업(주)	´12.09.20	´12.12.28	300,011,000	2	´13.03.18	´13.03.20	329,740,000	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2657)
영어마을 기능보강공사	㈜천마산건설	´12.12.12	´13.04.15	460,768,000	1	´13.04.12	´13.04.15	460,116,000	운영자 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2657)
운현궁 보수정비공사	택진건설(주)	´12.11.14	´13.2.23	61,361,500	2	´13.03.27	´13.03.30	60,360,000	준공정산 등	건축부 (3708-2630)
장애인행복서비스센터 건립공사	토문건설(주)	´11.12.27	´13.04.19	2,639,560,000	2	´13.08.01	´13.08.07	3,046,120,000	주관부서 요구사항 반영 등	건축부 (3708-2652)
한양도성 탐방로 정비공사	현도종합건설(주)	´12.12.24	´13.06.24	433,863,000	2	´13.06.28	´13.07.10	450,824,000	군부대 추가공사 요청 반영 및 준공정산	건축부 (3708-2630)
DDP건설	삼성물산(주)	´09.03.30	´11.12.26	224,015,000,000	12	´13.11.30	´13.11.30	277,767,000,000	준공정산 등	건축부 (3708-2423)
DDP전기	삼성엔지니어링(주) 외 1개사	´09.03.25	´11.12.31	23,477,000,000	7	´13.11.30	´13.11.30	25,654,000,000	준공정산 등	건축부 (3708-2443)
DDP정보통신	테라텔레콤	´09.02.20	´11.12.31	4,926,000,000	8	´13.11.30	´13.11.30	7,071,000,000	준공정산 등	건축부 (3708-2444)
신청사	삼성물산(주)	´06.05.12	´09.10.26	156,500,000,000	6	´13.02.13	´13.02.15	275,850,000,000	준공정산 등	건축부 (3708-2453)

10. 동일공사 분할 발주현황

공사명	분할공사명	계약일	계약금액	계약형태	분할발주사유	발주부서 (담당 전화번호)

- 건축부 해당사항 없음 -