시추조사장비

지반조사 일정

지반조사 투입 : 03/07 ~ 03/08 AM : 09:00 ~ PM : 18:00

※ 주변 주택지역이므로 민원발생 발생 할 수 있으므로 기본 출퇴근시간에 작업해야 함

시추시 작업 반경

높이	가로 폭	세로 폭 (부대장비 포함)	장비 회전시 폭
8.0m 이상	2.7m 이상	8.0m 이상	4.0m 이상

※ 주변여건에 따라서 약간의 차이는 발생 할 수 있음.

시추장비제원

장비명	시추기 DS-3500
시추방식	회전 수세식(Rotary Wash Type)
장비규격	높이 : 2.6m(탑 미설치시), 8.0m(탑 설치시), 4.5~5.0m (차량 탑재시)
	넓이 : 1.9m(유압발 미설치시), 2.5m(유압발 설치시)
	길이 : 3.5m(이동시), 5.0m(시추작업시)
시추구경	NX 규격 : 76.0mm, BX 규격 : 60.0mm

공 종	세 부 공 종	장비투입일로부터 12일
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. 시추조사	1) 시추조사
	2) 현장시험
	3) 폐공 및 원상복구
2. 실내시험	1) 토질시험
4. 성과분석	1) 성과분석
	2) 보고서 작성

예정공정표

* 일정은 현장 여건에 따라 다르며, 기상의 변화에 따라 변동될 수 있다. (우천 및 기타)

지반조사 위치도