문서번호	주차계획과-11345
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주차계획팀장	주차계획과장	교통기획관		도시교통본부장
협 조
	주차관리팀장

지갑없는 주차장 사업 계획

(무정차 자동결제 주차서비스 제공)

2018. 9.

서울특별시

(도시교통본부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

	목 차
Ⅰ. 공영주차장 운영현항 1 Ⅱ. 주차시스템 운영 현황 2 1. 사업 추진 현황 2 2. 현재 주차시스템 문제점 및 대책 2 Ⅲ. 공영주차장 관리 개선 계획 3 1. 필요성 3 2. 추진경과 3 3. 추진계획 4 Ⅳ. 세부 추진 계획 5 1. 무정차 자동결제 주차시스템 구축 5 2. 통합관제 및 결제정산 표준화 6 ① Open API 규격 마련 6 ② 주차관제업체 3사와의 업무협약 7 ③ 주차요금 결제기 개발 7 3. 시스템 구축사업자 선정 7 Ⅴ. 기대 효과 8 Ⅵ. 추진일정 및 행정사항 8 1. 추진일정 8 2. 행정사항 9 3. 소요예산 확보 10 ◈ 붙임 자료 ◈ 1. 주차시스템 주요 운영 현황 2. 주차시스템 문제점 및 대책 3. TF팀 및 자문회의 운영현황 4. 지갑없는 주차장 시스템 관련 기술 검토 5. 공영주차장 입․출차 비교 6. Open API 기능 목록(안) 7. 표준 Open API 규격(안) : 별첨 8. 지갑없는 주차장 구축을 위한 업무협약서(안) 9. 제안요청서(안) : 별첨

지갑없는 주차장 사업 계획

	기 본 방 향
◈ 민간위탁 공영주차장(72개소 4,105면)의 위탁기간이 만료(’19.10.31)됨에 따라 그동안 시영주차장 주차장 및 통합센터 운영실태를 평가하고 ◈ 4차 산업혁명의 IoT(사물인터넷), 자율주행자동차 시대에 대비하여 공영주차장에 IT기반 기술을 활용한 주차관리기술을 도입함으로써 시민의 삶을 바꾸는 맞춤형 주차서비스 혁명에 기여하고자 함

Ⅰ		공영주차장 운영현황

□ 공영주차장 현황 : 총139개소 17,560면

□ 운영현황

○ 공단직영 : 47개소 12,972면

○ 제3자위탁 : 92개소 4,588면 (민간위탁 73개소 4,183면, 기타 19개소 405면)

※’18.8월 기준

관리 운영자		총 계		노 상		노 외
		개소	면 수	개소	면 수	개소	면 수
계		139	17,560	75	2,225	64	15,335
시설관리공단		47	12,972	12	106	35	12,866
제3자위탁	민간위탁	73	4,183	52	1,920	20	2,263
	자치구 및 상인회 위탁	19	405	11	199	8	206

□ 주차시스템 현황

○ 운영현황(139개소) : 스마트폰 64개소, 관제시스템 47개소, 기타 28개소

구 분	합계	노 상 (75)		노 외 (64)
		스마트폰	기타	관제시스템	스마트폰	기타
계	139	56	19	47	8	9

※ 기타 28개소(노상19, 노외9) : 기계식주차장, 관광버스주차장 등으로 운영

⇒ 지갑없는 주차장 사업은 주차장 139개소 중 공단과 민간위탁 운영되는 109개소를 대상으로 추진(노상 62개소, 노외 47개소)

Ⅱ		주차시스템 운영 현황

1. 사업 추진 현황 : 붙임1. 주차시스템 주요 운영 현황

구 분	대상	사업내용	시 사 점
현대화 사업 (2000년)	전체	‣노외 주차시스템 설치 ‣노상 파킹미터기 설치 ‣정률제 수수료 납부	‣민간의 주차장 운영으로 수입 증가 ‣무인주차기 도입으로 시민편의 제고 시도 ‣위탁기간 장기화(7~10년), 정률제 수수료 납부방식으로 위탁업체의 도덕적 해이
강북권 ITS사업 (2007년)	강북권	‣노외 카드결제시스템 설치 ‣노상 PDA결제시스템 도입 ‣주차정보 실시간 연계	‣카드결제 도입으로 주차장 업그레이드 ‣주차정보 연계로 주차요금 투명성 확보 추진 및 주차행정의 과학화 기반 마련 ‣시스템 표준화하였으나 업체별 성능 차이 ‣빅데이터 분석하는 통합센터 기능 미흡
Green ITS사업 (2010년)	전체	‣노외 주차권 무발권 시스템 도입 (주차권 없는 친환경 주차장)	‣마그네틱 주차권 없는 무발권 시스템 전환 - 차량번호인식(LPR)으로 발권 대기 없앰 ‣통합관제 및 주차정보 통합센터 기능 미흡

2. 주차시스템 문제점 및 대책 : 붙임2. 주차시스템 문제점 및 대책

❶ 주차장 이용자 측면(시민 입장)

○ 노상주차장 : 주차관리인의 주차요금 결제에 따른 불편

- IT기술 활용하여 자동감면 처리되는 자동결제시스템 도입 필요

○ 노외주차장 : 서울페이 등 다양한 결제수단으로 주차요금 결제 필요

- 주차장에서 자동이체 결제 안됨, 노상 스마트폰은 티머니 결제 안됨

❷ 주차장 관리․효율화 측면(서울시, 시설공단 입장)

○ 운영은 시설공단으로 일원화 되었으나, 주차장 관리시스템은 미통합

- 실시간 주차정보 수집·분석시스템 미흡, 분석자료는 주차정책 수립·활용

○ 3개 업체의 주차시스템이 설치되어 일부 주차장만 관제 가능

- 공단 통합센터에서 모든 주차장 관제 불가 및 즉각적인 민원대응에 한계

○ 주차요금 결제정산 위한 VAN(결제대행업체) 분리로 결제정보 통합 곤란

Ⅲ		주차시스템 개선 계획

1. 필 요 성

□ IT 기술을 활용하여 주차장 이용 시민의 편의성 제고

○ 차량번호 인식 및 차량인식센서를 통한 주차요금 자동결제 시스템 도입

○ 결제대기에 따른 출차지연 및 시민 주차장 이용 불편 해소

□ 새로운 주차관리시스템 개발로 주차장 관리 효율성 제고

○ IT 기술을 접목한 첨단관리기술을 응용한 새로운 관리모델 개발

○ Open API로 異기종 주차장비 관제 가능한 통합주차플랫폼 구축

○ 새로운 주차관리시스템 모델로 주차정보의 통합 및 빅데이터 활용

□ 시민중심의 맞춤형 주차정책 개발로 시민의 삶을 바꾸는데 기여

○ 빅데이터 분석을 통한 주차장 이용효율화 및 주차난 해소 기여

2. 추진경과 : 붙임3. TF팀 및 자문회의 운영현황

□ 지갑없는 주차장 구축 ‘TF팀’ 운영

○ 지갑없는 주차장 구축 관련 TF팀 운영 계획 수립(’18.6.27)

○ 운영현황 : 총6회 운영(’18.9월 현재)

- 시스템 구성, 기술적 쟁점사항, 제안요청서, 소요예산 등 검토

□ 지갑없는 주차장 구축 ‘자문회의’ 운영

○ 지갑없는 주차장 구축 관련 자문회의 운영 계획 수립(’18.7.30)

○ 운영현황 : 총7회 운영(’18.9월 현재)

- 異기종 통합․관제를 위한 표준 Open API 규격 작성

- 노상 차량인식센서 기술 검토 등 업체 및 자문가 자문

3. 추진계획 : 붙임4. 지갑없는 주차장 시스템 관련 기술 검토

□ 사업대상 : 공영주차장 109개소

○ 노외주차장 47개소, 노상주차장 62개소

※ 사업대상 주차장 및 시스템은 주차장 여건 및 사업검토에 따라 변경 가능

□ 사업내용

○ 시민이 주차장 이용이 편리한 주차요금 자동결제 주차시스템 구축

○ 공영주차장 관리 통합운영․관제할 수 있는 체계(OPEN API) 구축

○ 공영주차장의 통합관제 및 빅데이터 활용 가능한 통합주차플랫폼 구축

□ 추진방법 : 단계별 추진

○ 1단계(’18.9.~’19.6.) : 노외주차장 5개소, 노상주차장 2개소

- 통합주차플랫폼 구축 : 통합관제 및 주차정보 통합시스템 1식

- 노외주차장 5개소 : 주차관제시스템 5개

- 노상주차장 2개소(40면) : 차량인식 감지기 설치 40개, App 개발

○ 2단계(’19.7.~’19.12.) : 노외주차장 42개소, 노상주차장 60개소

- 통합주차플랫폼에 주차시스템 구축․연계

- 노외주차장 42개소 : 주차관제시스템 42개

- 노상주차장 60개소(2,000면) : 차량인식 감지기 설치 2,000개

※ 내구연한 도래하는 노외주차장 31개소는 관제시스템 개선 추진

□ 시스템 구축방법 : 공개경쟁에 의한 구축사업자 선정․구축

◈ Open API

▸ 특정 소프트웨어나 프로그램의 기능을 다른 프로그램에서도 활용할 수 있도록 표준화된 인턴페이스를 공개

▸ 서비스 개발에 필수적인 프로그램밍 기술이 없어도 원하는 서비스를 손쉽게 만들 수 있도록 지원하는 공개된 프로그램

Ⅳ		세부 추진 계획

	추 진 방 향
◈ 서울페이 등 다양한 결제 및 자동감면이 가능한 주차시스템 도입 ◈ 주차장 통합관제 및 주차정보 분석․활용 위한 통합주차플랫폼 구축 ◈ 시스템 구축 사업자 선정의 투명성 확보를 위해 공개경쟁입찰

1. 무정차 자동결제 주차시스템 구축 : 붙임5. 공영주차장 입․출차 비교

□ 구현기능

○ 사전등록결제시스템과 연계한 사전등록 및 주차요금 자동결제 연계

○ 행정안전부 행정정보공동시스템과 연계한 주차요금 자동할인

○ Open API기반 통합주차플랫폼에 의한 주차장의 통합․관제

□ 노외주차장(47개소)

○ 차량번호 인식으로 무정차 주차요금 자동결제

○ 주차관제시스템 47개 설치

▸ 입차시 차량등록번호 확인만으로 무정차 입․출차 및 주차요금 자동결제

지갑없는 주차장 (출차)

□ 노상주차장(62개소)

○ 차량인식 감지기 설치 및 스마트폰 앱 자동결제

○ 차량인식 감지기 62개소(2,040면) 설치

○ 사용자 및 관리자용 App 개발

▸ 차량인식센서 등 IoT 기술을 활용하여 실시간 차량인식, 노상주차장 번호 부여

▸ 스마트폰 앱 등 사용자의 입·출차 확인으로 출차시 주차요금 자동결제

지갑없는 주차장

□ 통합주차플랫폼(1식)

○ 주차관제기 異기종 연계 및 주차관제 가능한 운영관리

○ 주차정보 및 요금정산정보 DB의 표준화․통합화를 통하여 빅데이터 분석 및 확장성을 고려한 데이터 플랫폼

○ 행안부 행정정보공동시스템과 연계한 장애인․경차 등 자동감면

2. 통합관제 및 결제정산 표준화

❶ Open API 규격 마련 : 붙임6~7. Open API 기능 목록 및 규격(안)

□ 추진방법

○ 지갑없는 주차장 구축 ‘자문회의’에서 Open API(안) 규격 마련

- 주차관제를 위하여 현재 공영주차장 주차관제업체 3사로 구성

○ 서울시․시설공단이 요구하는 관제기능 목록에 따라 API(안) 마련

○ Open API(안)의 의견 공유를 통한 검토

- 전문기관 : 서울연구원, 대한교통학회, 한국교통연구원, 한국교통정책경제학회

- 관련업체 : 한국주차설비공업협동조합, 한국주차관리협회

□ 실행방법

○ 확정된 표준 Open API 규격에 따라 공영주차장 구축

○ 국토교통부, 타 자치단체에 표준 Open API 규격 공유

- 표준 Open API로 주차장 구축시 타 자치단체와 주차정보 공유 가능

- 공유된 주차정보를 통하여 빅데이터 활용하여 주차정책 수립 가능

❷ 주차관제업체 3사와의 업무협약 : 붙임8. 업무협약서(안)

□ 업무협약 대상 : 공영주차장 주차관제업체 3사

○ 다래파크텍, 아마노코리아, 파킹클라우드 ↔ 서울시(도시교통본부)

□ 필요성

○ 선정된 구축사업자가 표준 Open API 규격에 따라 공영주차장 구축시 기존 주차관제업체의 협조 필요

○ 기존 주차장 개선시 기존 주차관제업체의 주차시스템 개선 협조 필요

□ 주요내용

○ 표준 Open API 규격(안) 마련에 기술 자문 협조

○ 지갑없는 주차장 사업 추진시 서울시와 구축사업자의 요구에 협력

○ 향후 발생될 수 있는 비용에 대한 협의

❸ 주차요금 결제기 개발

□ 개발내용 : 스마트카드사를 통한 결제정산 통합을 위한 정산기 및 단말기 개발

○ 출구정산기 개발 : 주차요금 통합정산 위한 IC/RF 리더기 모듈

○ 노상무선단말기 개발 : 주차요금 통합정산 및 결제내역 실시간 통신

□ 추진사항

○ 스마트카드사 개발비용 예산 반영 검토 : 약60백만원(예상)

○ 사업 제안요청서에 VAN사업자 KSCC 명시

3. 시스템 구축사업자 선정

□ 사업자 선정방법 : 공개경쟁 입찰

□ 단계별 사업자 선정방법 : 붙임9. 제안요청서

○ 1단계 : 통합주차플랫폼, 주차관제기 5개소, 차량인식 감지기 2개소

○ 2단계 : 주차관제기 42개소, 차량인식 감지기 60개소

- 2단계 사업자 선정을 위한 권역별 세부 추진 계획 수립․시행

Ⅴ		기대 효과

□ 새로운 주차관리로 주차장 관리 운영 효율화 제고

○ Open API로 異기종 주차 관제 및 주차정보 통합

○ 결제 및 정산의 통합으로 주차요금 정산 업무의 투명성 제고

○ 주차시스템 기능표준화로 예산 절감 : 약 1,184백만원 절감

- 표준 Open API 규격에 따른 주차시스템 설치(개소당 25~45% 절감)

▸ 시스템 연계 주차장 (11개소) : 440백만원 절감 (개소당 40백만원 절감)

▸ 시스템 개선 주차장 (31개소) : 744백만원 절감 (개소당 24백만원 절감)

○ 주차관리 범위 확대 및 인력 재배치를 통한 인력 절감 효과

□ IT 기술을 활용하여 시민 중심의 주차서비스 질 제고

○ 결제 대기에 따른 출차지연 및 시민 주차장 이용 불편 해소

□ 맞춤형 주차정책 추진으로 수요관리 및 주차난 해소 기여

○ 주차정보 빅데이터 분석을 통한 수요관리 및 주차요금 정책 기반 마련

○ 주차정보 안내시스템 등과 연계하여 주차장 이용효율 증대

Ⅵ		추진일정 및 행정사항

1. 추진 일정

【 방침수립 】

○ 방침결정	: ’18.9.

【 1단계 사업 】

○ 1단계 입찰공고	: ’18.9.~10.

○ 1단계 구축사업자 선정	: ’18.10.~12.

○ 1단계 무정차 자동결제 주차시스템 구축	: ’19.1.~6.

【 2단계 사업 】

○ 2단계 입찰공고	: ’19.7.

○ 2단계 구축사업자 선정	: ’18.7.~9.

○ 2단계 무정차 자동결제 주차시스템 구축	: ’19.9.~12.

【 운영개시 】

○ 무정차 자동결제 주차시스템 운영 개시	: ’20.1.

2. 행정 사항

□ 조례 개정

○ 주차요금감면 관련 규정

- 행정안전부 행정정보공동시스템과 연계한 주차요금 자동할인시 본인확인 없는 주차요금 감면

- 서울페이 사용자에 대한 주차요금 10% 감면

○ 부정주차 차량 관련 규정

- 노상 주차 미신고 등 부정주차 및 미납출차 차량에 대한 조치

- 본인확인 없는 주차요금 감면에 따른 부정감면 차량에 대한 조치

□ 시설공단 조직 및 인력 검토

○ 전담 조직

- 주차장 관제 및 통합주차플랫폼 운영, 민원․결제 관련 ‘콜센터’ 운영

- 노상주차장 관리번호 부여․관리, 사전등록 및 결제 등 응대 담당

○ 인력 재배치

- 자동결제시스템 구축 완료에 따른 현장 주차관리 인력 활용 방안 검토

- 시스템 구축 완료 및 민간위탁 주차장 계약만료 시점(’19.10.) 등 고려하여 인력운영 및 민간위탁 운영 방안 등 사전 검토

□ 주차관리에 대한 전문가 자문 및 시민평가

○ 필요성

- 시민 중심의 주차장 운영과 체계적인 시스템 정착을 위한 기반 마련

- 규정에 의한 적법 운영 및 안전 중심의 주차장 운영 점검 필요

○ 자문 및 시민평가 내용

- 전문가, 시민단체 등으로 구성되는 평가위원회 설치․운영

- 주차장 운영실태, 이용시민의 민원발생 정도 등 객관적인 지표에 의한 평가

- 주차장이용 고객을 대상으로 설문조사 등을 통한 보완․검증

- 향후 시 차원의 장비․시스템 표준화를 통한 호환성 및 확장 가능성 검토

□ 민간위탁 주차장에 대한 시스템 운영에 따른 지도․교육

○ 민간위탁 기간 중 신규 시스템 운영 교육으로 운영차질 사전 방지

□ 홍보계획

○ 주차 관련 기관에 입찰 관련 안내문 발송

○ 공고문 서울시 홈페이지 게재

○ 공개경쟁입찰에 대한 보도자료 작성, 타 자치단체 등 홍보

3. 소요예산 확보   ※ App개발비, 공사비 등 포함

【 1단계 사업 】 1,737,000천원(’18.추경)

○ 노외주차장 5개소 × 100,000천원 = 500,000천원

○ 노상주차장 2개소 × 50,000천원 = 100,000천원

○ 통합주차플랫폼 1식 × 1,137,000천원 = 1,137,000천원

【 2단계 사업 】 1,150,000천원(’19.예산)

○ 노외주차장 11개소 × 50,000천원 = 550,000천원

○ 노상주차장 60개소 × 10,000천원 = 600,000천원

□ 붙임

○ 붙임1. 주차시스템 운영 평가

○ 붙임2. 주차시스템 문제점 및 대책

○ 붙임3. TF팀 및 자문회의 운영현황

○ 붙임4. 지갑없는 주차장 시스템 관련 기술 검토

○ 붙임5. 공영주차장 입․출차 비교

○ 붙임6. Open API 기능 목록(안)

○ 붙임7. 표준 Open API 규격(안)

○ 붙임8. 지갑없는 주차장 구축을 위한 업무협약서(안)

○ 붙임9. 지갑없는 주차장 구축 제안요청서(안)

주차시스템 주요 운영 현황

붙임1

□ 2000년 현대화사업(전체 시영주차장)

○ 사업내용 : 민자 유치에 의한 주차시스템 설치, 정률제 수수료 납부

○ 시사점

- 민자 유치사업으로 주차시스템 설치하여 세외수입의 획기적 증가

- 무인주차기(노상) 도입을 통한 경영개선 및 시민고객 편의증진 제고 시도

- 노상주차미터기 미정착으로 시민불편, 위탁기간 장기(7~10년), 정률제 수수료 납부방식 등 위탁업체의 도적적 해이로 수익성 및 주차서비스 질 저하

□ 2007년 강북권 ITS사업(강북권 주차장)

○ 사업대상 : 강북권 시영주차장   ※ 강남권은 2010년 Green ITS사업으로 추진

○ 사업내용 : 신용카드 가능한 결제시스템, 주차정보 실시간 연계

○ 시사점

- 주차요금 납부의 투명성 확보, 카드결제 도입 등 시민중심의 새로운 주차관리모델 구현

- 주차정보 실시간 관리를 위한 주차관리통합센터 구축으로 주차장별 이용현황 및 데이터 분석 가능하도록 주차행정의 과학화 기반 마련

- 주차시스템 표준화에 성공하였으나 업체별 성능 차이 존재

□ 2010년 Green ITS사업(전체 시영주차장)

○ 사업내용 : 주차권 없는 친환경 주차시스템 구축

○ 시사점

- 재활용 되지 않는 마그네틱 종이주차권 없애고 무발권 시스템으로 전환

- 차량번호인식(LPR) 기술을 활용하여 발권 대기시간 없앰

- 특정업체 주차시스템 위주 사용으로 관제 및 주차정보 수집·통합 곤란

주차시스템 문제점 및 대책

붙임2

□ 주차장 이용자 측면(시민 입장)

○ 노상주차장 : 주차관리인의 결제에 따른 불편

◈ 주차관리인의 차량 확인을 통한 주차요금 결제 ◈ 주차시간 및 요금의 적정성에 대한 민원 발생		◈ 차량인식 및 주차가능여부를 인식할 수 있는 시스템 도입 필요 ◈ IT 기술을 활용하여 시민이 편리하고 자동결제시스템 도입 필요

○ 노외주차장 : 자동감면결제시스템 도입 및 주차관제 필요

◈ 주차요금 할인에 대한 자동화시스템 부재로 요금결제 대기 민원 발생 ◈ 자동이체 등 다양한 결제수단을 통한 결제 불가능 - 현재 주차장비의 신기술 적용 한계, 다수 내구연한 도래		◈ 시민의 이용이 쉽고, 관리가 용이한 자동결제 주차관리시스템 도입 필요 ◈ 주차요금의 원활한 할인결제를 위한 통합주차플랫폼 도입 필요
◈ 異기종 주차장비 운영으로 서울시의 주차관제 어려움 - 주차장비 회사별 독립적인 관리․관제시스템으로 운영		◈ 공영주차장 통합관제 가능한 통합주차플랫폼 구축으로 주차장 운영 효율화 및 향후 확장성 제고 필요 ◈ 시민의 주차장 이용불편 즉시 대응을 위한 주차관제 필요

○ 서울페이 등 다양한 결제수단으로 주차요금 결제 필요

- 공영주차장에서 서울페이로 주차요금 결제 안됨

- 노상주차장 스마트폰 결제기는 티머니 결제 안됨

◈ 주차요금 카드(티머니 포함) 및 현금결제 비율 변화

- 카드결제비율 : 3.3%(2009년) → 97.6%(2018.4월)

◈ 연도별 주차장 수입금 현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		신용카드		현 금
	금액	%	금액	%	금액	%
2009년	7,255	100.0	239	3.3	7,016	96.7
2016년	25,699	100.0	22,327	86.8	3,372	13.2
2017년	25,564	100.0	24,493	95.8	1,071	4.2
2018.4월	11,045	100.0	10,778	97.6	267	2.4

※ 2009년은 강북권 주차장의 시간주차 수입금, 2016년 이후는 전체 시영주차장 수입금

□ 주차장 관리․효율화 측면(서울시, 시설공단 입장)

○ 주차장 운영은 시설공단으로 일원화 되었으나, 서버는 미통합

- 공단직영 : 공단 14층 주차통합센터 소재

- 민간위탁 모니터링(2종 : 노외주차장, 노상주차장) : TOPIS 소재

○ 3개 주차관제업체 시스템이 설치되어 일부 주차장만 관제 가능

- 공단직영 31개 중 25개 주차장에서 특정회사 시스템 사용(다래파크텍)

- 주차정보 통합 및 수집된 빅데이터 분석을 통한 주차정책 수립 어려움

◈ 주차관제업체별 주차관제시스템 구축 현황 : 47개소

구 분	총 계	공단직영			민간위탁			비 고
		소계	자동화	수동관제	소계	자동화	수동관제
총 계	47	31	29	2	16	4	12
다래파크텍	34	29	27	2	5	2	3
아마노코리아	2	2	2
파킹클라우드	11				11	2	9

○ 주차요금 결제정산 위한 VAN(결제대행업체) 분리로 결제정보 통합 곤란

- 2007년에 KSCC(스마트카드사)가 통합․정산 하였으나, 현재 3개사로 분리

◈ KSCC 서울시 주차카드결제시스템 사업자

- 근거 : 제2기 교통카드시스템 구축을 위한 사업시행합의서

- 내용 : 대중교통 환승할인 서비스 수행

- KSCC 공영주차장 VAN 사업 수행 현황 : 46개소

구분	유형	운영형태	카드결제사업자	개소	장비제조사	비 고
유료	노상 (63개소)	스마트폰	파킹클라우드	63	토마토전자	사업자계약 ’19.7월 만료
	노외 (62개소)	주차 시스템	KSCC	46	다래파크텍
			스마트로	2	아마노코리아
			파킹클라우드	6	토마토전자
			자치구 운영	8		거주자우선
무료	노상 (13개소)			13

TF팀 및 자문회의 운영현황

붙임3

□ 지갑없는 주차장 구축 ‘TF팀’ 운영

○ 지갑없는 주차장 구축 관련 TF팀 운영 계획 수립(’19.6.27)

- 구성 : 주차계획과, 시설공단 10명 내외(총괄 : 주차계획과장)

- 기능 ▸ 주차시스템 및 통합센터 운영현황 및 주요 쟁점 검토

▸ 지갑없는 주차장 및 통합주차플랫폼 구축 방안 도출 등

○ 운영현황 : 총6회 운영(’18.9월 현재)

- 제1회(6.28) : 지갑없는 주차장 구축 시스템 구성 검토

- 제2회(7.04) : 주차장 장애발생 대응 대책 검토, 소요예산 검토

- 제3회(7.11) : 지갑없는 주차장 구축 관련 주차장 특성, 인력 등 검토

- 제4회(7.18) : 사전등록결제시스템 연계 방안 검토, 제안요청서 검토

- 제5회(7.25) : 타 사례 검토, 소요예산 검토, 관련 기관별 R&R 검토

- 제6회(8.08) : 주요 쟁점사항 중간보고, 제안요청서 검토

□ 지갑없는 주차장 구축 ‘자문회의’ 운영

○ 지갑없는 주차장 구축 관련 자문회의 운영 계획 수립(’19.7.30)

- 구성 : 주차계획과, 주차관련 업체 및 전문가 등 사안별 구성(총괄 : 주차계획과장)

- 기능 ▸ 주차시스템 및 통합센터 운영현황 및 주요 쟁점 자문

▸ 지갑없는 주차장 및 통합주차플랫폼 구축 방안 자문 등

○ 운영현황 : 총7회 운영(’18.9월 현재)

- 제1회(7.31) : 異기종 통합․관제를 위한 표준 Open API 협의

- 제2회(8.02) : 표준 Open API 작성을 위한 기능목록 작성

- 제3회(8.21) : 주차관제업체 3사별 API 설명 및 토론

- 제4회(8.24) : 표준 Open API 작성 범위 및 작성 방안 협의

- 제5회(9.04) : 노상 차량인식센서 기술 검토

- 제6회(9.05) : 서울시 표준 Open API 규격 확정

- 제7회(9.06) : 시스템 구성 및 사업자 선정방안 검토

지갑없는 주차장 구축 관련 기술 검토

붙임4

□ 노상주차장 : 차량인식 검지 관련

○ 구축시스템 - IoT 무선차량검지기 - 실시간 자동감면 결제시스템 ‣ 사용자용 모바일 앱(App) ‣ 관리자용 모바일 앱(App)	< 시스템 개념도 >

○ 차량인식 검지기 적용 사례

- 서울시 청계천 주변 노상주차장(업체명:모루시스템)

- SK IR센서(infrared sensor) : 바닥노출형(제설중 손상 사례), 배터리 사용 5년 미만

※ 이스라엘 : 사용자 앱을 통한 주차요금 무인결제(차량인식센서 없음)

< 모루시스템 > 사용자앱을 통한 주차요금결제

‣배터리 수명 : 5년 – 자연방전 20%, 1일 사용량 계산시 6년

‣하자보수 : 2년 – 이후 배터리 교체 등 유지보수 계약 또는 건별 계약

‣배터리 교체 및 유지관리 어려움 : 내부 실리콘 몰딩

‣통신망 : 로라망(LoRa, Long Range) - 저전력 장거리 통신(LPWA) 기술, 사물인터넷(IoT) 전용망

○ 노상 차량인식 관련 기술

적용기술	차량정보 인식	장 점	단 점	비 고
LPR	번호판 영상 분석 주차면당 설치	가장 높은 신뢰성 (과금의 정확성)	고가의 장비	노상주차장 적용 350만원 이상
CCTV	번호판 영상 분석 다수 주차면 인식	블록관리 가능	차량정보인식 불가	120만원 이상 부설주차장 적용
지자기	앱 주차면당 설치	입출차 인식 가능	차량정보인식 불가 자기장 영향(전기차량)	서울시 적용
루프코일	앱 주차면당 설치	입출차 인식 가능	루프코일 : 大규격	주차장 상용
IR (적외선)	앱 주차면당 설치	외부환경 영향	차량정보인식 불가 탁도에 따른 인식 불량	부설주차장 적용
QR코드 바코드	앱 주차면당 설치	사용자의 QR 인식 외부환경 영향	차량정보인식 불가 탁도에 따른 인식 불량	부설주차장 적용
Beacon	불루투스+앱 와이파이 범위내 설치	블록관리 가능 불루투스 신호 오차 외부환경 영향	차량정보인식 불가	주차장 미적용
NFC	불루투스+앱 비콘보다 근거리	상동	아이폰 지원 불가	주차장 미적용

□ 異기종 장비 통합․관제를 위한 표준 Open API 규격 마련

○ 주차관제 추진사례

구 분	추 진 내 용
부천시	‣부천시 공영주차장 통합(유인시스템) ‣데이터 통합만 가능, 관제 불가능 ‣異기종 통합 및 관제를 위하여 통합주차관리시스템 S/W 개발 중
코레일네트웍	‣2015년 주차관제사업 1단계 : 10개소 시범사업, 미구축 사업지체배상 ‣2017년 주차관제사업 2단계 : 28개소 시범사업, 미구축 사업지체배상 ‣2018년 주차관제사업 3단계 : 입찰준비중 ‣실시설계가 업체별 좋은 기능만 취합․요구하여 통합 수행 불가

○ 추진방안

- 실행방안 : 표준 Open API 규격 제시(부천시와 코레일너트웍의 실패 극복)

▸ 통합시스템 S/W 개발은 특정업체 위주의 실시설계로 보편적인 설계 어려움

▸ 통합시스템 S/W에 적합한 주차시스템을 신규 설계해야 하는 어려움

▸ 기존 주차장비의 S/W 수정이 적고, 통합관제 가능한 Open API 규격 제시

- 추진방법

▸ 공영주차장 주차관제업체 3사로 구성된 ‘자문회의’에서 표준 Open API(안) 마련

▸ 서울시․시설공단이 요구하는 관제기능 목록에 따라 Open API(안) 마련

▸ 표준 Open API(안)에 대하여 의견 공유 및 검토 : 대한교통학회, 한국교통연구원, 서울연구원, 한국교통정책경제학회, 한국주차설비공업협동조합, 한국주차관리협회 등

- 실행방법 : Open API 규격에 따른 통합주차플랫폼 구축 후 공영주차장 전체 구축

□ 주차요금 즉시감면서비스 실시

○ 감면방식 : 주차장 이용시 할인을 즉시 받을 수 있도록 서비스 실시

○ 추진방안

- 행정안전부의 ‘공공시설 이용요금 즉시감면 서비스’에 연계하여 할인

- ‘공공시설 이용요금 즉시감면 서비스’는 법정할인 대상자가 주차장 이용 신청시 즉시 요금할인을 받을 수 있도록 자격 확인

- 즉시감면 서비스 제공을 위해 API 및 자격확인 웹페이지 제공

◈ 법정할인 대상여부 제공정보

○ 현재 17종 법정할인 자격정보 제공 중

- 자녀정보(다둥이), 기초생활 수급, 장애인, 국가유공자, 모범납세자, 자동차 제원 등

○ ’18.하반기 제공예정(14종)

- 저공해․전기차, 국가유공자차량, 장애인차량 여부 등

◈ 공공시설 이용요금 즉시감면 서비스 구성도

○ 검토사항

- 장애인차량 등 개인정보를 통한 감면 여부 확인시 통합주차플랫폼의 개인정보 관리 방안 검토

※ 인천국제공항공사의 주차장에서 서비스 예정(’18.10.)으로 세부내용 확인 계획

□ 대중교통 환승할인 적용

○ 운영방식 : 차량번호인식을 통한 주차요금 자동감면

- 기존 환승할인 적용 방식에 대한 적용여부 재검토

- 사전등록결제시스템에 등록된 결제수단을 통한 주차요금 할인

- 대중교통 이용내역의 통합주차플랫폼 전달은 ‘따릉이’ 적용 기준에 따름

○ 사례별 적용방안(안)

구 분		현 재	개선방안	비고
사례1	환승관련 근거자료 제출	전철역장 이용확인 혹은 버스현금영수증 등 자료 제출	-	폐지검토
사례2	현재 주차관리시스템 활용	교통 및 주차결제시 동일 카드 & RF결제시 환승할인 적용	교통 RF결제 확인 후* 주차결제시 비 동일카드, RF/IC/MS결제시에도 환승할인 적용	일부개선
사례3	무정차 자동결제 주차시스템 활용	-	LPR(차번인식기)을 통한 자동결제시스템 활용	신설

* 교통결제여부 확인을 위한 RF tag 과정 필요

○ 환승할인 흐름도

○ 자동결제시스템 적용방안(안)

구  분

내     용

할인대상

사전등록결제시스템에 회원정보 등록시민(차량정보/교통카드/주차요금결제카드)

*등록대상 카드(대상별 1장)

- 교통결제:티머니·후불교통카드 중 택1(환승할인 희망시 선택)

- 주차결제:신용/체크/모바일티머니/서울페이 중 택1(필수)

절차

1. 자동결제시스템에 회원정보 등록

2. 등록 한 교통카드로 대중교통결제

3. 주차장 출차 시 ‘차번인식’ 후 자동결제(실시간 승인)

(1) 승인한도/잔액 충족시 : 정상결제

(2) 승인한도/잔액 부족시 : 카드변경 및 KIOSK 결제

4. ‘시스템’에서 주차결제 있는 대상 추출 후 한국스마트카드로 전송

5. 대중교통 이용내역을 ‘시스템’으로 전달(일배치, D+4일)

6. ‘시스템’에서 대중교통 이용내역 및 주차결제내역 대사 후 환승할인 대상 충족시 한국스마트카드로 내역 전달

- 대중교통 이용내역 대사를 통해 할인 적용(청구할인)

할인방법

청구할인

(정상승인 취소 후) 금액 수정 후 청구(카드사 협의 대상)

비고

※결제방법 및 수수료율

(VAT포함)

구분	가맹점 수수료율	비고
카드결제	2.5%	카드사 정책에 따라 변경 가능
서울페이	-	서울시 정책에 따름
티머니(모바일)	2.5%	-

※티머니 유형별 특징

구분	주차결제카드 사용	환승할인 적용방법
Plate	불가	-
모바일	가능	마일리지 적립 (청구할인 불가)

○ 서울페이 주차요금 감면 적용

- 서울페이 정책(사전등록결제시스템)에 따라 공영주차장 적용

- 서울페이 사용자에 대한 주차요금 10% 감면 서울시 주차장 조례 개정

□ 출구정산기 및 노상무선단말기 표준화

○ KSCC를 통한 결제정산 통합을 위한 정산기 및 노상무선단말기 개발

❶ 출구정산기 개발(리더기, 모듈)

○ 스마트카드사 추진사항

- IC/RF 리더기 : KSCC 프로토콜 추가, 제조사 선정 및 개발 진행

- 모듈 : 기존 모듈 기능(시리얼통신, VAN통신 및 전문암호화)에 주차관제업체 환경에 맞추어 개발 진행

○ 주차관제업체 추진사항

- 시리얼 통신을 통한 KSCC향 IC/RF리더기 연동, VAN 연동 개발, KTC 인증 진행

- 주차관제업체 자체 리더기 사용시 KSCC향으로 개발토록 KSCC에서 지원

❷ 노상주차장 무선단말기 개발 : KSCC에서 H/W 개발 완료

○ 주차요금 결제내역이 실시간 통합주차
플랫폼으로 전달

○ 프로그램 개발시 반영 사항

- 무선단말기 결제내역 스마트폰 APP과 동기화

※ 거래내역 전송 흐름

: 무선단말기 → 통합주차플랫폼 → 스마트폰 app

❸ 개발사항 및 예상비용

(VAT별도)

구분	개발사항	내 용	금 액	비고
공통	KSCC-시스템 間 개발비 등	승인/매입 대중교통 이용내역 조회, 수신 및 전송 등	약 20백만원	-
노외	주차관제시스템 연동 개발비	KIOSK와 VAN 연동 (IC/RF리더기 및 서버)	약 20백만원	1회
	IC/RF단말기 인증비	KTC IC/RF단말기 인증비	약 16백만원	관제업체 /모델당
소계			약 56백만원	-
노외	IC단말기 모듈	IC/RF단말기 H/W	미정	-
노상	무선단말기	무선단말기 구매비 통신비	196,000원/대 11,000원/대/월	구매비는 추가 검토대상

※ 구체적인 개발 요건과 개발사에 따라 금액 변동 및 예상치 못한 비용 발생가능

※ 주차관제업체 시스템 개발 비용 별도

○ 추진사항

- 시스템 구축 및 운영 등에 따른 관련 비용 예산 반영 : 약60백만원

- 제안요청서에 VAN사업자 ‘KSCC’ 명시 및 기본 결제수단에 ‘티머니(모바일 포함)’

□ 관련 기관별 R&R(Role and Responsibilities)

사업주관	결제/정산	주차사업	통합주차플랫폼	주차관리시스템
서울시 / 시설공단	한국스마트카드	시설공단 / 민간사업자 등	(사업자 선정)	(사업자 선정)
<서울시> ․지갑없는 주차장 계획 수립 ․예산수립 ․요금정책 등 조례 개정 ․주차관리에 대한 시민평가	․결제 정산 서울시/ 한국스마트카드 간 ‘제2기 사업시행합의서(2013.2.1.) 근거 ․선/후불 교통카드 환승할인 제공 한국스마트카드는 선/후불 교통카드 환승할인 제공을 위해 대중교통 결제내역이라는 ‘개인정보 취급 가능’ 법적 권한을 획득함(서울시, 선/후불카드사, 운수사, 카드소지자 4개 당사자 대상으로 계약체결 및 약관동의 등 방식으로 권한 획득 완료) ․티머니결제 서비스 제공	․서울시 정책 이행 ․주차장 운영 ․수익금 관리 ․주차관제사 관리	․App/Web 등 주차플랫폼 구축/운영 ․관련 시스템 연계 - 결제/정산시스템 - 주차관리시스템	․지값없는 주차장 구축/유지보수 ․유인/무인/ 스마트폰 등 현장결제시스템 현장결제시스템 구축사 및 H/W와 무관하게 해당 결제시스템에서 발생되는 모든 지불수단의 결제/정산사업은 한국스마트카드에서 수행
<시설공단> ․발주 및 사업자 선정 ․제안요청서 작성 ․예산타당성 검토 ․지값없는 주차장 운영/유지보수 - 시설공단 통합센터 - 차량출입통제 - 차단기, 차번인식 등 주차장 관제

공영주차장 입․출차 비교

붙임5

◈ ‘사전등록결제시스템’에 연계하여 주차요금 자동 결제

□ 노상주차장

현재

지갑없는주차

□ 노외주차장

○ 입차시스템

현재

○ 출차시스템

현재

지갑없는주차

Open API 기능 목록

붙임6

* 기기 : 입출차 장비, 로컬 : 주차장제어모듈, 센터 : 통합센터 제어모듈, DB : 로컬DB

* 입구표시(I), 출구표시(O), 차번인식기(LPR), 전광판(LED), 정산기(FAM:Fare Adjustment Machine),  숫자(0#,2자리)

연번	기 능 명	기 능 설 명
1	입구차단기 상태정보	입구차단기 상태(열림,닫힘,정상,비정상) 정보 전달
2	출구차단기 상태정보	출구차단기 상태(열림,닫힘,정상,비정상) 정보 전달
3	입구LPR 상태정보	입구LPR 상태(정상,비정상) 정보 전달
4	출구LPR 상태정보	출구LPR 상태(정상,비정상) 정보 전달
5	정산기 상태정보	정산기 상태(정상,비정상) 정보 전달
6	정산기 영수증프린터 상태정보	정산기 영수증프린터 상태(정상,비정상) 정보 전달
7	정산기 영수증롤 상태정보	정산기 영수증롤 상태(영수증 부족, 영수증 없음) 정보 전달
8	정산기 동글이 상태정보	정산기 동글이(교통카드단말기) 상태(정상,비정상) 정보 전달
9	정산기 IC카드단말기 상태정보	정산기 IC카드단말기 상태(정상,비정상) 정보 전달
10	입구차단기 작동	센터 관제PC에서 입구차단기 작동(열림,닫힘,고정,해제) 명령 전달
11	출구차단기 작동	센터 관제PC에서 출구차단기 작동(열림,닫힘,고정,해제) 명령 전달
12	입차정보 전달	입차정보를 주차장 서버에서 센터 서버로 전달
13	자동감면확인 (감면이력)	감면이력 DB를 통한 감면대상 자동 확인
14	자동감면 결과 전달(감면이력)	감면이력 DB를 통한 자동감면 결과 센터 전달
15	자동 감면 확인 (행안부)	즉시감면서비스api를 통한 감면 대상 자동 확인
16	자동감면 결과 전달(행안부)	즉시감면서비스확인결과회신(센터입차정보감면처리후로컬DB로감면전달) (센터에서즉시감면서비스api를통한조회결과회신)
17	감면이력 전달	전체주차장의 감면정보(일일)를 전주차장으로 일괄 공유 (중복자료 제거 후 업데이트)
18	요일제 참여 확인 요청	입차정보에 대한 승용차요일제 참여 여부 자동 확인 요청
19	요일제 참여 결과 전달	입차정보에 대한 승용차요일제 참여 여부 회신
20	입구LPR 재기동	입구 LPR 제어PC 윈도우 원격 재시작
21	정산기 주차요금 전달(호출)	호출로감면요청시감면적용,요금재전송 "주차시간, 주차요금, 감면, 결제요금" 표출
22	정산기 영수증 출력	센터에서 출구정산기로 영수증 재출력
23	환승정보 전달	대중교통이용 교통카드로 30분이내 결제 요청시 센터PC에 환승내역 표출
24	수동 할인 적용	센터관제PC에서수동할인적용
25	정산기 주차요금 전달(미인식)	차량번호미인식/오인식시(센터PC)요금조회후 출구정산기에"주차시간,주차요금,감면,결제요금"재표출
26	출구LPR 재기동	출구 LPR 제어PC 윈도우 원격 재시작
27	결제정보 전달	주차요금 결제정보(결제요금,결제수단,카드사,결제금액 등) 전달
28	출구정산기 재기동	사전정산기 제어PC 윈도우 원격 재시작
29	사전정산기 재기동	사전정산기 제어PC 윈도우 원격 재시작
30	입구안내전광판갱신	입구주차안내전광판에주차장관제PC에서주차가능댓수조정결과표출 (만차아니면"주차가능댓수주차가능",만차시는"만차주차불가")
31	사전등록 확인 요청	출차정보(차량번호)참조 사전등록 확인 요청
32	사전등록 결과 전달	사전등록 여부 결과 회신
33	사전 주차요금 전달(호출)	센터에서 감면요청시 감면처리 후 사전정산기에 "주차시간, 주차요금, 감면, 결제요금" 표출(전송)
34	사전 영수증 출력	센터에서 사전정산기로 영수증 재출력
35	주차정보 수정	주차 정보 수정 (차량번호 수정, 감면정보 등록, 감면취소 등)
36	출차정보 전달	출차정보를 주차장 서버에서 센터 서버로 전달
37	결제취소 정보 전달	주차요금 결제정보 취소 요청
38	수동입차정보 전달	주차장 관제PC에서 수동 입차 정보 등록 및 전달
39	수동입차정보 전달	센터 관제PC에서 수동 입차 정보 등록 및 전달
40	수동출차정보 전달	주차장 관제PC에서 수동 출차 정보 등록 및 전달
41	수동출차정보 전달	센터 관제PC에서 수동 출차 정보 등록 및 전달
42	요금제 추가 등록	요금제 추가 등록 정보 주차장 전달
43	요금제 추가 수정	요금제 수정 정보 주차장 전달
44	주차장 설정 정보 등록	주차장 기본 설정정보 등록 및 전달
45	주차장 설정 수정	주차장 기본 설정정보 수정 전달
46	월정기권 일괄 등록	공단 홈페이지 DB에서 월 정기권 판매 결과 정보 전달
47	월정기권 주차장 이관	공단 홈페이지에서 가져온 월정기권 정보 주차장으로 전달
48	장비목록전달	주차장 최소 장비단위 목록정보 전달
49	장비목록전달	주차장 최소 장비단위 목록정보 전달
50	정기권 구분 정보전달	정기권 구분(전일, 야간)별 운영시간 정보 전달
51	할인정보 전달	할인(감면) 정보(종류, 할인율 등) 전달

* 모든 노외주차장은 특정 주차장비제조사의 자동화주차관제시스템이 설치되어야 하고,

* 센터와 단절시에도 현장 주차장에서 독자적으로 감면을 포함한 결제처리와 장비제어가 가능해야 하고,

* 위에 정의된 Open API를 통해 현장 주차장의 주차정보 및 결제, 기타 주차관제처리 결과(상태정보 등)가 센터로 전달되고, 센터에서 특정주차장의 주차관제가 원활히 이루어질 수 있도록 API가 정의되어야 한다.

(가칭)지갑없는 주차장 구축을 위한 업무협약서(안)

붙임8

서울특별시와 서울시 주차장 주차관제업체 주식회사 다래파크텍, 아마노코리아 주식회사, 파킹클라우드 주식회사(가나다 순)는 (가칭)지갑없는 주차장 구축 관련(통합주차플랫폼 및 API 자문) 관련하여 아래와 같이 협약을 체결한다.

제1조【목적】이 협약은 시민의 주차장 이용 및 결제가 편리한 주차서비스로의 혁신을 위하여 추진 중인 지갑없는 주차장 구축을 위한 통합주차플랫폼 구축 및 Open API 규격 관련한 기술자문 지원을 목적으로 한다.

제2조【신의성실의 의무】주차관제업체 3사는 신의와 성실의 원칙에 따라 이 협약을 성실히 이행하여야 한다.

제3조【협력범위】주차관제업체 3사는 지갑없는 주차장 구축 사업에 대하여 관심과 책임으로 폭넓은 협력을 유지하는데 동의하며, 본 협약에 의한 통합주차플랫폼 구축 및 Open API 규격 관련한 기술자문 지원을 상호협의에 따라 진행한다.

제4조【협약내용】자문 업무 범위 및 내용은 아래와 같이 정한다.

1. 주차관제업체 3사는 (가칭)지갑없는 주차장 구축 사업의 요구사항을 충분히 검토한 후 최적의 요구기능을 정의하며, 향후 서울시 및 외부기관과의 연계성을 고려하여 의견을 제시하여야 한다.

2. 주차관제업체 3사는 향후 추진되는 (가칭)지갑없는 주차장 구축 사업 추진시 서울시와 구축사업자의 요구에 적극 협력한다.

제5조【보도 및 대외 공표】주차관제업체 3사는 본 협약과 관련된 일체의 대외보도 및 공표와 관련하여 적극 협조한다.

제6조【비밀유지】주차관제업체 3사는 기술 자문 등 상호 교류를 통해 인지한 제반사항을 상대방의 동의 없이 제3자에게 누설하거나 무단사용하지 않는다. 단, 서울시는 자문회의 결과에 대하여 공개, 입찰공고 등에 자유롭게 사용할 수 있다.

제7조【협약서의 유효기간】본 협약은 그 체결과 동시에 효력이 발생하고, 중도에 해지되지 않는 한 (가칭)지갑없는 주차장 구축 완료시까지 유효하다.

제8조【협약서의 변경】본 협약서 내용을 추가 또는 변경할 사안이 발생할 시 양 기관 상호 협의를 통해 협약서를 변경할 수 있다.

제9조【기타】

1. 본 협약서에 따른 협력과정상 각 기관에서 담당한 역할의 수행과 관련 하여 발생하는 비용에 대해서는 각 기관이 부담하는 것을 원칙으로 한다. 단, 서울시와 별도 협의에 의해 정할 수 있다.

2. 본 협약서의 유효성, 구성, 해석 및 적용은 대한민국 법률에 의한다.

3. 본 협약을 증명하기 위하여 협약서 각 2부를 작성하고 상호 서명 날인한 후 양 기관이 각 1부씩 보관한다.

2018년 9월 00일

도시교통본부장 고 홍 석			주식회사 다래파크텍 대표이사 김 호 정
	서명	(인)		서명	(인)

도시교통본부장 고 홍 석			주식회사 아마노코리아 대표이사 전 명 진
	서명	(인)		서명	(인)

도시교통본부장 고 홍 석			파킹클라우드 주식회사 대표이사 신 상 용
	서명	(인)		서명	(인)