스마트기술 활용, 안전하고 편리한 고품격 도시인프라 조성!!!

서울시-경기도

도시철도 건설관련 간담회

2020. 2.

서울특별시

도시기반시설본부

1		하남선(5호선연장) 1~2단계 종합시험운행 추진 협조 사항

□ 종합시험운행 일정

○ 1단계 구간 시설물검증시험 : 2020. 2.17 완료 예정

○ 1단계 구간 영업시운전 : 서울교통공사 계획수립  예정

□ 현안 및 문제점

○ 1단계 구간 시설물 사전 점검시 지적내용을 시설물검증시험 완료전까지 조치 완료해야 영업시운전이 가능함.

○ 2단계 구간에 대한 종합시험운행 세부 계획(2020.12월초 개통 예정 감안)을 수립 예정(서울시,경기도,서울교통공사,시스템분야감리단)

- 공종별시험(열차투입 등), 사전점검, 시설물검증시험, 영업시운전

□ 협조사항

○ 사전점검시 지적사항(토목1건, 기계 8건)을 시설물검증시험 완료전까지 조치

○ 1단계 구간 영업시운전 실시전 및 2단계 구간 시운전 열차 투입전에

1단계 구간 및 2단계 구간 물청소 실시(영업구간내 비산먼지 유입 방지)

○ 자동요금징수설비(AFC) 구축을 위해 최소 3개월전 개통일자 확정 필요

AFC(Automatic Fare Collection) : 도시철도 운영과 관련 이용승객이 직접 승차권 구매, 개/집표 할 수 있도록 역무 처리를 완전 자동화하여 이용승객에게 편의를 제공하는 설비

교통카드개선회의

○ 『통합환승할인요금제』시행으로 노선신설․변경, 요금조정 등 사유발생시 수도권 교통

운영기관의 교통카드 S/W를 개발하여 합동시험후 개통일에 동시 적용

- 주    관 : 서울시 도시교통실 교통정책과

- 참여기관 : 버스(서울, 인천, 경기), 서울교통공사, 인천교통공사, 코레일 등 14개기관

- 적용절차 : 안건상정(확정) > 운영S/W 개발 > 통합시험 > 프로그램 배포 > 개통

수도권교통개선회의 안건상정 (신규개통, 요금인상 등)	⇒	사업자간 일정 등 협의 (확정시 S/W 개발)	⇒	D-day에 모든 교통사업자 단말기에 S/W 동시 배포

2		별내선(8호선연장) 건설 관련 협조 사항

『별내선(8호선 연장) 건설사업』과 관련하여 건설과정에서 상호 협조를 통하여 시스템 일원화 등 최고품질의 도시철도 건설 필요

□ 협조사항

○ 별내선 시스템분야 업무 구분(건설사업 업무협약서)에 따른 설계도서 검토 및 공사추진 등에 있어서 상호 긴밀한 협조 유지

- 설계용역, 관급자재 구매 및 시운전 : 서울시 주관

- 시공구분 : 서울시 0Km~6Km750, 경기도 6Km750~종점

․ 송변전, 전차선, 역무자동화 및 통신시설 시공 구분

□ 세부 협조사항

○ 전력원격제어설비 관련

- 별내선 전기실 수배전반 보호계전기 통신 방식 이더넷으로 통일 및 광허브 전원공급 이중화(AC/DC) 요청

○ 기계설비 자동제어 구성방식을 운영기관(서울교통공사) 구성방식으로 반영 필요

※ 서울교통공사 개량 자동제어 구성방식

- Modbus 프로토콜 통신에 기반한 관제실 설비 일괄 스케줄 제어

- IoT 센서를 부착한 빅데이터 기반의 SAMBA 시스템 구축

SAMBA(Smart Automatic Mechanical Big data Analysis system) : 승강설비 등 기계설비에 부착된 각종 센서값(진동, 과전류, 온도 등)을 분석하여 이상 발생이 예상 될 경우 사전 점검을 통하여 고장 발생을 예방하는 시스템

구 분		세 부 내 용
하남선	서울시	○ 서울교통공사 개량시스템 전면반영 → 호환성 문제없음(시운전 중)
	경기도	○ 기 시공된 BACnet에 프로토콜 변환기 추가설치[※자동운전(스케줄 제어) 불가] ○ 일부 SAMBA 시스템 반영(승강설비 IoT 센서)
별내선	서울시	○ 서울교통공사 개량시스템 전면반영 예정 ※ 발주 전 기계공사 내역 조정 후 조달청 계약의뢰 예정
	경기도	○ 기존 8호선 프로토콜로 통일적용(BACnet → Modbus) ○ SAMBA 구축과 관련된 IoT장비 추가 반영검토 및 총사업비 조정추진 예정

3		하남선(5호선 연장)건설 종합시험운행(1단계) 추진 현황

도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 구간의 안전하고 효율적인 운영을 위해   철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성이나 철도시설물과의 연계성   (Interface), 철도시설물의 정상 작동여부 등을 확인ㆍ점검하는 시험임.

□ 종합시험운행 개요

○ 관련근거

- 철도안전법 제38조 및 같은 법 시행규칙 제75조

- 철도종합시험운행 시행지침(국토부고시 제2018-634호, ’18. 10. 24.)

○ 시험기간 : 2019. 07. 24. ~ 2020. 04. 말

○ 종합시험운행 진행일정

공종별 시 험 (제6조)	⇨	사전협의 (제7조)	⇨	사전점검 (제8조)	⇨	시 설 물 검증시험 (제13조) 30일이상	⇨	영업시운전 (제23조) 30일이상
’19. 5. 20. ~10. 30.		’19. 9. 27.		’19. 11. 1. ~11. 7.		’20. 1. 13. ~’20. 2. 17.		’20. 3. 20. ~5. 6.

○ 시험구간

- 시스템분야 총 연장 4.766km

- 정거장(H1~H3) ※ H1역 무정차 통과

□ 추진경위

○ ’19. 07. 24.: 시운전 열차 하남선 본선 투입

○ ’19. 08. 12. ~ 10. 31.: 공종별시험

○ ’19. 11. 01. ~ 11. 07.: 사전점검

○ ’20. 01. 13.: 시설물검증시험 착수

□ 향후계획

○ ’20. 02. 17.: 종합시험운행(시설물검증시험) 완료

○ ’20. 03. 20.: 종합시험운행(영업시운전) 착수

○ ’20. 05. 06.: 종합시험운행(영업시운전) 완료

□ 세부 추진일정(계획)

구 분		시 행 기 간
공종별 시험		- 2019. 08. 12. ~ 2019. 10. 31.(81일) 공정률이 빠른 H2, H3정거장부터 시행
종합시험운행 전 사전협의		- 2019. 08. 01. ~ 2019. 08. 16.
사전점검 (철도시설 기술기준 검토 포함)		- 2019. 11. 01. ~ 2019. 11. 07.(7일, 평일) - 2019. 11. 08. ~ 2019. 12. 31.(53일, 행정처리)
종합시험 운 행	시 설 물 검증시험	- 2019. 12. 31. ~ 2020. 01. 13.(14일) (시설물검증시험 계획 수립 및 승인) - 2020. 01. 13. ~ 2020. 02. 17.(25일, 시험일) - 2020. 02. 18. ~ 2020. 03. 13.(25일, 행정처리) ※ 철도시설관리자(서울시 도시기반시설본부) 시행
	영 업 시 운 전	- 2020. 03. 13. ~ 2020. 03. 19.(7일) (영업시운전 계획 수립 및 승인) - 2020. 03. 20. ~ 2020. 05. 06.(48일) - 2020. 05. 07. ~ 2020. 05. 29.(23일, 행정처리) ※ 철도운영자(서울교통공사) 시행
종합보고		- 2020. 05. 30. ~ 2020. 06. 12.(17일)
철도안전관리체계 변경승인		- 2020. 06. 13. ~ 2020. 06. 26.(17일)
개통예정일		2020. 06월말