정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2011-15	담당부서 작성자	문화체육관광본부/체육진흥과 이재익 / 2133-2647
정 책 명	서남권 돔야구장 건립
사업개요	○ 추진배경 - 동대문운동장 공원화 사업 추진에 따른 대체야구장 건립 - 문화체육시설이 부족한 서남권지역의 문화체육인프라 확충 - 돔 야구장내 수익시설 설치로 재정 건전성 확보 - 돔 야구장 주변 교통대책 추진에 따른 교통소통 및 접근편의 제공 ○ 추진기간 : 2006.12. ~ 2015.06. ○ 주요내용 - 위 치 : 구로구 고척동 63-6외 9필지 - 규 모 : 부지면적 58,096㎡, 연면적 83,441㎡ (지하2층 / 지상4층) - 주요시설 : 돔야구장(18,000석), 수영장, 헬스장, 수익시설 등 ○ 소요예산 - 총 예산액 : 244,380백만원 - ’15년도 예산액 : 52,575백만원
추진경과 및 사업추진실적	○ 추진경과 - 1977.11.11 : 도시계획시설(체육시설) 결정 - 2007.09.10 : 서남권 문화체육컴플렉스 계획수립(시장방침 제409호) - 2007.09.14 : 투자심사(조건부) - 2008.09.10 : 체육시설(야구장) 사업계획 변경(시장방침 제493호) - 2009.02.04 : 공사착수(도시기반시설본부) - 2009.07.27 : 투자심사(조건부) - 2009.08.13 : 서남권 돔야구장 건립계획수립(시장방침 제376호) - 2010.09.16 : 공유재산심의 (적정) - 2010.07.16 : 서남권 돔야구장 사업계획변경(시장방침 제274호) - 2010.09.14 : 투자심사(조건부) - 2010.10.08 : 주변 교통처리대책 추진계획(시장방침 제453호) - 2011.03.18 : 건축협의(변경) - 2011.04.01 : 교통대책(지하2층 주차장 추가) 투자심사 통과 - 2011.06.28 : 시의회 공유재산관리계획 가결 - 2011.03~08 : 교통대책(보행데크,구일역사성능개선) 타당성 용역실시 - 2011.07.20 : 교통대책(보행데크) 투자심사 통과 - 2011.10.06 : 교통대책(구일역사 성능개선) 투자심사 통과 - 2013.08.25 : 서남권 돔야구장 사업계획변경(시장방침 제233호) - 2014.06.20 : 프로구단 유치 관련 추가 시설개선(행정1부시장방침)