마곡지구 집단에너지공급

등록번호	2011-57	담당부서 작성자	기후환경본부/녹색에너지과 강치석 / 2133-3561
정 책 명	마곡지구 집단에너지 공급
사업개요	○ 추진배경 - 서울시 강서구 마곡택지개발지구 3,364천㎡에 건설 계획 중인 공동주택 12,105호 및 업무용빌딩, 오피스텔, 상가 등에 친환경 에너지인 집단에너지를 공급하여 쾌적한 도시환경 조성, 온실가스 감축, 대기환경 개선 위한 집단에너지시설 건설사업 ․2007.10.11 마곡지구 친환경에너지 전용구역 지정방안 검토(시장 지시사항 제 187호) ․2007.12.26 마곡지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 결정 ․2009.10.27 마곡지구 집단에너지공급대상지역 지정공고 (지식경제부 제2009-408호) ○ 추진기간 : 2011.11.01 ~ 2020.12.31 ○ 총사업비 : 446,000백만원 ○ 주요내용 - 발전시설 285MW, 보일러 2기(136Gcal/h)건설 등 - 열수송배관 설치 : 21km×2열
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 10.8.16 : 마곡지구 집단에너지공급계획 수립(시장방침제304호) - 환경정책과 사무관 최경환, 환경정책과장 이인근, 녹색환경정책 담당관 김영성, 맑은환경본부장 권혁소, 행정1부시장 권영규, 시장 오세훈 ○ 11.03.25 : 마곡지구 집단에너지공급사업 허가(지식경제부) - 지식경제부 에너지관리과 주무관 강윤구, 에너지관리과장 김용채 ○ 12.07.02 : 마곡지구 열수송관설치공사 분리발주 보고 시행 - 녹색에너지과 주무관 강치석, 사무관 최경환, 녹색에너지과장 이인근, 기후변화정책관 황치영, 기후환경본부장 임옥기 ○ 12.12.24 : 마곡지구 집단에너지시설 변경추진(행정1부시장방침제673호) - 발전용량 증설 등(강서구의 지역냉난방 확대공급요청) - 녹색에너지과 주무관 강치석, 사무관 이순재, 녹색에너지과장 이인근, 기후변화정책관 황치영, 기후환경본부장 임옥기, 행정1부지상 김상범 ○ 13.04.17 : 마곡지구 열수송관설치공사 착공 ○ 13.07.29 : 마곡지구 집단에너지공급시설 변경타당성조사 용역 준공(서울연구원 공공투자관리센터) - 서울연구원 연구원 박영민, 소장 신창호, 대표 이창현 ○ 14.10.28 : 마곡지구 집단에너지공급사업 변경허가(산업통상자원부) - 산업통상자원부 에너지관리과 주무관 서보용, 에너지관리 과장 정창현 - 서울시 녹색에너지과 주무관 강치석, 사무관 이순재, 녹색에너지과장 권민