정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2011-88	담당부서 작성자	안전총괄본부/도로계획과 김대희 / 2133-8078
정 책 명	신림~봉천터널 도로건설
사업개요	○ 추진배경 - 남부순환로와 강남순환도로를 연결하여 남부순환도로의 도로기능 향상으로 상습 정체구간 해소 - 동서방향의 간선도로를 확충하여 교통편익 증진 ○ 추진기간 : 2009~2023 ○ 총사업비 : 550,700백만원 - 2017년도 사업비 : 25,600백만원 ○ 주요내용 - 왕복4차로, 연장 5,600m
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ `09.05.20 : 공사 입찰 공고 ○ `09.10.12 : 실시설계 적격자 선정 및 착수 ○ `10.04.01 : 도시계획시설결정 고시 ○ `10.10.08 : 공사착공 ○ `10.11.04 : 터널 지하 및 환기소 구간 실시계획고시 ○ `13.01.24 : 도시계획시설 실시계획 고시(난곡사거리구간) ○ `16.08.24 : 현안사항 집중검토회의 보고(행정2부시장) ○ `17.07.현재 : 재설계 및 공사 중 - 1공구 : 터널 종단선형 설계변경 및 보상 중 - 2공구 : 터널굴착 및 라이닝 시공 중 - 도로계획과 담당자 김대희, 간선도로계획팀장 한정무, 도로계획과장 하종현