정책실명제 사업관리이력서

등록번호

2012-39

담당부서

작성자

도시안전본부/하천관리과

안덕용 / 2133-3870

정 책 명

관악산 저류조 설치

사업개요

○ 추진배경

- 2011.7.27 관악산 일대 시간단 90mm 이상의 기습폭우로 도림천변 신림3교 일대 범람으로 약 3000건의 침수발생

○ 추진기간 : 2011.10.27 ~ 2015.05.

○ 총사업비 : 49,427백만원

○ 주요내용 : 관악산 저류조 3개소 설치

- 서울대 정문앞 저류조 : 면적 6,320㎡, 용량 40,000㎥

- 서울대 버들골 저류조 : 면적 4,329㎡, 용량 20,000㎥

- 서울대 공대폭포 저류조 : 면적 947㎡, 용량  5,000㎥

추진경과 및 사업관련자

○ 추진경과

- '11. 7.27 : 관악산 일대 관리한도를 초과하는 기습폭우로 도림천 범람

- '11. 8. 4 : 시장 담화

- '11. 8. 5 : 예비비 확보방침 결정

- '11. 9.14 : 도림천 상류 관악산 저류조 긴급공사 시행계획 수립

- '11.12.21 : 국토해양부 홍수량 대폭증가 통보

- '11.12.29 : 설계사, 시공사 및 감리사 선정 완료 2012.1.6 착공 예정

- '11.12.1 : 서울대의 사업 반대공문 통보(서울대 협의 8회 이상)

- '12. 3.7: 시민단체 사업 반대공문 제출(시민단체 협의 5회)

- '12. 5. 1 : 시장님 도림천 현장 방문, 시민단체 협의

- '12. 5.2(11) : 부시장님 서울대 총장 방문 협의(2회)

- '12. 5. 4 : 시장님 주재 도림천 홍수조절시설 사업계획 검토 숙의

- '12. 5.17 : 도림천 범람대책 시장님 보고

- '12. 6.20 : 사업계획변경(행정2부시장방침 제205호)

- '12. 7~8 : 강남순환로 6-1공구 임시저류조 설치, 운영

- 2014. 7  : 서울대학교내 공사 완료

- 2014. 12 : 서울대 정문앞 공사 추진중

○ 소요예산(※ 총 예산액은 사업성격에 따라 생략 가능)

- 총 예산액	: 49,427백만원

-’1 5년도 예산액	: 11,686백만원

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설7급(직급) 김태묵

- 최종 결재자 : 지방관리관    이인근

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)
본부장	이인근	지방관리관	'11.7.27~'11.12.31
	김병하	˝	'12.1~'13.12.31
	조성일	˝	'14.1.1~현재
물관리 정책관	고인석	시설3급	'11.7.27~'11.12.1
	권기욱	˝	'12.1.1~'12.12.31
	정만근	˝	'13.1.1~'14.6.26
	김학진	˝	'14.7.16~ 현재
과장	고태규	시설4급	'11.7.27~'12.8.27
	이진용	˝	'12.8.28~'13.12.31
	한유석	˝	'14.1.1~'14.7.17
	김용학	˝	'11.7.18~'14.12.31
	정중곤	˝	'15.1.1~ 현재
팀장	이덕기	시설5급	'11.7.27~'11.9.8
	김준형	˝	'11.9.9~'15.1.11
	지승현	˝	'15.1.12~ 현재
담당	김태묵	시설6급	'11.7.27~'11.9.8
	전영부	˝	'11.9.9 ~'15.1.22
	안덕용	˝	'15.1.23~ 현재

(※ 본청 하천관리과 : 예산, 설계설계용역, 도시기반시설본부 방재시설부 : 공사, 감리용역)

○ 감독공무원 : 도시기반시설본부 방재시설부 시설7급 조동협

○ 사업 참여자(다른기관 또는 민간인 관련자)

- 설 계 자 : 한국종합기술(주) 대표이사 이강록

- 시공회사 및 대표 : (주)서우 김기수

- 감 리 자 : (주)신명종합건설기술공사 김장흥

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능