정책실명제 사업관리이력서

등록번호

2014-19

담당부서

작성자

도시안전본부/하천관리과

김동철 / 2133-3863

정 책 명

용산구 한강로 일대 방재시설 확충사업

사업개요

○ 추진배경

- 지역적으로 저지대인 용산구 한강로 일대의 반복적인 침수피해를 해소하고 치수 안정성을 도모함으로써 시민의 안정적인 편의를 제공키 위함임

○ 추진기간 : 2013.12 ~ 2016.12

○ 총사업비 : 50,258백만원

○ 주요내용

- 유역분할┌ 하수박스 ▣2.0m×2.0m~▣2.0m~2.5m, L=502m

└ 하수관거 D=1,800mm~2,400mm, L=783m

- 빗물펌프장신설 : 840톤/분(한강대교 북단)

추진경과 및 사업관련자

○ 추진경과

- ’11.03.08 : 한강로 일대 자연재해위험지구 지정

-  ’13.01.27 : 침수취약지역 해소대책 보고(시장)

-  ’13.04.10 : 빗물받이 확충공사 착수(06.26일 완료)

-  ’13.07.26 : 기본 및 실시설계 완료

- ’13.10.01 : 용산구 현장시장실 운영(자치구 부담분 지원)

- ’13.11.20 : 빗물펌프장 도시계획(방수시설) 결정

-  ’13.12.26 : 펌프장 공사발주

- ’14.4.24  : 펌프장 설치반대 민원발생

- ’14.7.24  : 주민설명회 개최(제방측으로 위치이전, 민원해소)

- ’14.12.26 : 국토관리청 하천점용 승인

○ 사업관련자

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무
본부장	김병하 조성일	1급 1급	’11.3~’13.12 ’14.1.1~현재	총괄
기획관	권기욱 정만근 김학진	3급 3급 3급	’11.3~’12.12 ’13.1.1~’14.6.26 ’14.7.16~ 현재	실무총괄
과 장	고태규 이진용 한유석 김용학 정중곤	4급 4급 4급 4급 4급	’11.3~’12.8 ’12.9~’13.12 ’14.1.1~’14.7 ’14.7 ~’14.12 ’15.1.1~ 현재	총괄검토
팀 장	임춘근 김용학 안준수	5급 5급 5급	’11.3~’13.12 ’14.1~’14.7 ’14.7~현재	대책검토
담 당	진명국 김동철	6급 6급	’11.3~’13.3 ’13.3~현재	대책수립

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능