요구번호 : 2015-30

결산검사요구자료

조 상 호  위원

□ 요구일시 : 2015. 5.

□ 요구자료 내용 :

◦ 붙임 요구내역 참조

□ 제출부서 : 한강사업본부

□ 요구번호 : 2015-30

1. 3개년간 이월(명시, 사고)후 예산집행현황

(단위 : 백만원)

사업명	금액 (사업비)	예산편성 연도	이월(명시, 사고)연도		최종 집행연도	불용처리 연도 및 이유
			명시/사고	사유
스마트폰 비즈니스 체계구축 및 장비구매	300	2012	2012 사고이월	시민에게 충실한 서비스를 제공하기 위한 충분한 테스트 기간확보를 위해 이월	2013	2013 집행잔액
한강공원 이용시설 보수·정비	2,915	2012	2012 사고이월	사업계획이 4분기에 확정·발주되어 동절기로 인한 실질공사기간 부족 등	2013	2013 집행잔액
한강지천횡단교량 개선공사	2,358	2012	2012 사고이월	공사 지역에 한국지역난방공사(마포지사)에서 노후된 열배관 파손으로 인한 시급한 긴급 공사를 시행함에 따라, 공사가 중단되어 부득이 공사기간을 연장하게 됨	2013	2013 집행잔액
한강 수상방재 및 수중·수상 청소	600	2012	2012 사고이월	용역업체에서 일반쓰레기(20톤)를 불법반입하여 수중쓰레기 수거물량을 늘려 용역대금을 지급받고자 함에 따라 수중청소 용역업체를 고발조치 하였고, 2월까지 물량정산 완료가 어려워 용역대금(157,602,570원)을 사고이월함	2013	2013 집행잔액
망원 초록길 조성	7,100	2012	2012 사고이월	2011년 착공한 장기계속사업(전기)으로 선행공종인 토목, 조경공사 추진후 전기공사 시행에 따른 사고이월	2013	2013 집행잔액
한강 생태공원 확충	3,458	2012	2012 사고이월	아스콘 포장 구간에 관급자재인 도막형 바닥재를 시공토록 되어 있으나 우천 및 강설과 동절기로 인하여 미시공(5℃ 이상일 경우 시공) 2013.04.30까지 관급자재 납품기한을 연기하여 해빙기 이후에 시공후 관급자재 검수, 대가지급	2013	2013 집행잔액
양화 한강공원 생태공원화 사업	900	2012	2012 사고이월	사업구간이 양화대교 성능개선공사 자재적치장으로 사용하던 곳으로 2012년 11월에 사용이 종료됨에 따라 양화한강공원 생태공원화사업 착공시기가 지연되었음	2013	2013 집행잔액
강서한강공원 생태형 가족캠핑장 조성	1,500	2012	2012 사고이월	여러 차례에 걸친 한강시민위원회 심의결과에 따라 주변지역 설계가 변경되고, 캠핑장 조성에서 피크닉장 조성으로 방침이 수정되어 발주가 지연됨	2013	2013 집행잔액
한강공원 이용시설 보수·정비	4,029	2013	2013 사고이월	낚시 전용공간 조성공사 관련 준공기한 미도래에 따른 사고이월	2014	2014 집행잔액
망원 초록길 조성	13,603	2013	2013 사고이월	추가공사구간(망원정 ~ 초록길연결)보상 지연 및 선행공종인 토목 조경공사 추진 후 전기공사 시행에 따른 사고이월	2014	2014 집행잔액
암사 초록길 조성	200	2013	2013 사고이월	지장상수도 탐지, 사업계획 검토 등 제반경비 확인 및 정산 지연에 따른 사고이월	2014	2014 집행잔액
한강공원 나들목 증설 및 개선	4,600	2013	2013 사고이월	장기간 협의가 소요됨에 따른 공사착수지연으로 인한 절대공기 부족	2014	2014 집행잔액
한강 생태공원 확충 (서래섬주변)	1,041	2013	2013 사고이월	준공기한 미도래 (‘14/3/31)로 인한 이월	2014	2014 집행잔액
양화 한강공원 생태공원화 사업	5,373	2013	2013 사고이월	물놀이장 축소, 자연친화적인 시설 추가 등으로 인한 설계변경으로 사업발주 및 추진 지연	2014	2014 집행잔액
둔치 및 화장실 청소	1,500	2014	2014 사고이월	준공기한 미도래에 따른 사고이월(부상시설 안전성 확보 관련하여 해수부와 협의로 인한 공기부족)	-	-
녹지시설 유지관리	2,193	2014	2014 사고이월	설계용역 준공기한 연장에 따른 사고이월(사전계약 심사 심의 및 보완기간 추가일정 소요)	-	-
망원 초록길 조성	11,255	2014	2014 사고이월	14.10월 완료된 망원초록길 사후평가용역 시행에 따른 사고이월	-	-
양화 한강공원 생태공원화 사업	5,526	2014	2014 사고이월	서울지방국토관리청의 하천점용허가 협의 장기간 소요로 인한 공사착수지연 및 화장실 계획변경에 따른 절대공기부족	-	-
자전거도로 유지보수	2,358	2014	2014 명시이월	여의도샛강 생태공원 자전거 연결로 설치공사	-	-

13. 세출예산 집행내역 중 사업변경 관련 건별 구체적인 내용

◯ 설계변경 공사현황

(단위:원)

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
한강공원 나들목 증설공사 (낙천정) 2차	(주)승일토건	2014.02.21	2015.02.20	1,800,000,000	4	2014.12.15	2015.02.20	1,587,300,000	물량증감	치수과 김동식 3780-0687
금호나들목외 5개소 조명등 교체공사	신라전기 건설공사	2014.03.13	2014.06.14	45,092,700	2	2014.06.12	2014.06.14	44,764,520	제비율검증	기전설비1과 임봉순 3780-0671
망원 초록길 조성공사 5차	통일건설(주)	2014.03.14	2014.10.15	3,484,619,020	4	2014.10.10	2014.10.15	5,774,796,020	물량증감	기전설비2과 박중모 3780-0674
2014년 한강공원 야외수영장 설비보수공사	(주)그린설비	2014.03.17	2014.09.30	597,980,000	3	2014.09.25	2014.09.30	696,307,000	물량증감	기전설비1과 강병모 3780-0670
한강 도심 생태공원 확충 조성사업 2차	(주)거성토건	2014.03.21	2015.02.28	667,900,000	3	2014.12.30	2015.02.28	707,803,000	보험료정산	생태공원과 김일문 3780-0632
2014년 한강공원 운동 및 편의시설 정비공사	맹호종합 건설(주)	2014.03.27	2014.11.28	173,219,000	3	2014.10.31	2014.10.31	169,114,000	보험료정산	녹지관리과 김기수 3780-0836
2014년 한강저수로 정비공사	(주)한라	2014.03.28	2014.10.31	1,149,684,000	3	2014.10.30	2014.10.31	1,749,684,000	물량증감	치수과 김동식 3780-0687
망원초록길 조성 전기공사 3차	세세건설(주)	2014.04.01	2014.07.31	126,579,000	4	2014.07.31	2014.07.31	292,169,000	물량증감	기전설비1과 임봉순 3780-0671
2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사	(주) 승화프리텍	2014.04.03	2014.09.30	1,331,838,830	2	2014.09.25	2014.09.30	1,353,572,000	물량증감	기전설비2과 김영찬 3780-0665
하천시설 유지관리 및 개선공사	(주)에이플러스 종합건설	2014.04.04	2015.02.28	740,246,000	6	2012.02.12	2015.02.28	1,391,000,000	준공정산	시설관리과 유충현 3780-0646
2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원 개선공사	현도 종합건설(주)	2014.04.07	2015.02.25	761,129,000	6	2012.02.25	2015.02.25	1,524,820,000	물량증감	치수과 방호익 3780-0683
2014년 호안녹화조성지 유지관리사업 (강동)	코러스그린 (주)	2014.04.14	2014.11.30	221,310,000	3	2014.11.30	2014.11.30	217,338,000	보험료정산	녹지관리과 정상철 3780-0846

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
강변북로 제방주변 정비공사	수림조경산업 (주)	2014.04.14	2014.05.11	117,421,000	2	2014.05.11	2014.05.11	117,271,000	준공정산	녹지관리과 김원식 3780-0843
양화한강공원 친수공간 조성공사 2차	태흥개발(주)	2014.04.15	2015.12.26	703,477,000	4	2014.04.15	2014.04.15	506,341,000	준공정산	생태공원과 서은교 3780-0629
2014년 한강숲 조성공사	(주)현우그린	2014.04.16	2014.06.01	368,346,900	2	2014.05.30	2014.06.01	357,654,000	보험료정산	녹지관리과 김원식 3780-0843
뚝섬공원 도로확장 개선공사	하웅종합건설 (주)	2014.04.17	2015.11.30	953,073,300	5	2015.02.26	2015.02.28	713,790,000	준공정산	시설관리과 유충현 3780-0646
2014년 한강공원 기반시설 개선공사	(주) 한두건설 엔지니어링	2014.04.17	2014.12.31	432,543,000	3	2014.11.11	2014.12.31	431,750,000	물량증감	시설관리과 오상협 3780-0647
한강난지공원 민간위탁시설 전원분리공사	해동전설(주)	2014.04.24	2014.05.31	33,354,200	2	2014.05.30	2014.06.30	30,895,150	물량증감	기전설비1과 강희진 3780-0659
한강공원 자전거도로 업그레이드 공사	두리종합조경 (주)	2014.04.28	2014.12.30	734,098,000	2	2014.12.01	2014.12.30	744,800,000	물량증감	시설관리과 김영후 3780-0643
2014년 한강수중보 기전시설물 보수공사	(주)이일 엔지니어링	2014.04.29	2014.10.31	182,239,900	3	2014.10.31	2014.10.31	176,816,640	보험료정산	기전설비1과 김영일 3780-0672
2014년 상반기 안내센터 청사 보수공사	(주)위더스 종합건설	2014.05.02	2014.06.04	86,604,300	2	2014.06.03	2014.06.04	86,428,000	보험료정산	총무과 강상천 3780-0727
잠실한강공원 탐험어린이놀이터 조성공사	(주) 에스지씨앤디	2014.05.08	2014.06.25	125,599,500	2	2014.06.23	2014.06.25	122,872,383	물량증감	녹지관리과 황은애 3780-0849
뚝섬한강공원 자전거도로 이전공사	프라도건설 (주)	2014.05.20	2014.12.30	696,655,000	2	2014.12.22	2014.12.30	830,800,000	물량증감	시설관리과 안덕용 3780-0643
한강공원 이용안내시설 정비공사	(주)건융	2014.05.20	2014.12.19	249,387,000	3	2015.01.29	2015.01.31	262,000,000	물량증감	시설관리과 안덕용 3780-0643
2014년 한강공원 교량하부 휴게공간 조성공사	하나조경개발	2014.05.22	2014.06.30	88,395,000	2	2014.06.30	2014.06.30	88,120,210	중공정산	녹지관리과 최수영 3780-0849

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
2014년 한강공원 운동시설 확충 및 정비공사	(주)수프로	2014.05.22	2014.06.30	191,252,800	3	2014.07.18	2014.07.20	195,497,500	보험료정산	녹지관리과 김기수 3780-0836
2014년 잠실한강공원 만남의광장 조성공사	레이크랜드 (주)	2014.06.13	2014.07.15	85,652,000	2	2014.07.10	2014.07.15	85,143,300	보험료정산	녹지관리과 김기수 3780-0836
광나루생태공원외 1개소 자전거도로 조명등 교체공사	(주)우진전력	2014.06.16	2014.09.16	29,710,730	2	2014.09.11	2014.09.16	29,443,000	물량증감	기전설비1과 강희진 3780-0659
한강 여름캠핑장 전원공사	동서 전기건설공사	2014.07.03	2014.07.18	87,168,420	2	2014.07.18	2014.07.18	92,383,000	물량증감	총무과 우명근 3780-0725
2014년 한강공원 운동 및 편의시설 확충공사	우보건설(주)	2014.10.01	2014.10.31	65,293,900	2	2014.10.31	2014.10.31	64,108,000	보험료정산	녹지관리과 김기수 3780-0836
잠실수중보 권양기실 전동기 제어케이블 교체공사	경충전설(주)	2014.10.20	2014.12.19	83,727,220	3	2014.12.18	2014.12.19	80,423,000	물량증감	기전설비1과 강희진 3780-0659
2014년 생태공원 시설물 정비공사	(주)가이아 글로벌	2014.11.07	2014.12.09	66,038,300	3	2014.12.09	2014.12.09	65,150,000	보험료정산	녹지관리과 박미란 3780-0846
2014년 한강숲(가을) 조성공사	(주)수야 조경개발	2014.11.17	2014.12.21	349,184,000	2	2014.12.15	2014.12.21	379,940,000	물량증감	생태공원과 양순옥 3780-0630

◯ 예산변경 사업현황

(단위:백만원)

단위사업	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경세부사유
				감액	증액
한강공원시설관리 및 개선	둔치 및 화장실 청소	공공 운영비	3,026		70	한강둔치 및 화장실 청소용역비 물가변동 상승분 청구분 지급
한강하천시설관리 및 개선	한강 수상방재 및 수중,수상청소	공공 운영비	540	70
한강공원시설관리 및 개선	한강공원기전시설유지관리	공공 운영비	1,260		49	전기,통신등 공공요금상승분부족
한강공원시설관리 및 개선	한강스토리텔링을 통한 관광상품화	사무 관리비	480	49
한강공원시설관리 및 개선	한강공원기전 시설유지관리	공공 운영비	1,260		40	전기,통신등 공공요금상승분부족
한강공원시설관리 및 개선	자원봉사자 운영	행사 실비보상금	159	40
한강공원시설관리 및 개선	한강공원 등 설치 및 운영	공공 운영비	532		89	공원 등 공공요금 부족에 따른 변경사용
한강공원시설관리 및 개선	한강공원 등 설치 및 운영	재료비	126	89
한강 접근체계 개선	한강공원나들목 증설 및 개선	시설비	3,290		370	나들목 신설 및 개선사업 관련 수해예방 및 현장관리
한강 접근체계 개선	한강공원나들목 증설 및 개선	감리비	710	370