정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

서울혁신기획관

사회혁신담당관

②담당자

(연락처)

배진성

(2133-6314)

③정책사업명

서울혁신파크 조성

④선정기준

100억 원 이상 대규모 예산이  투입되는 사업

⑤사업기간

2015년 ~ 2019년

⑥주요내용

○ 사업목적

- 세계적인 수준의 혁신파크를 조성하여 다양한 혁신주체들이 모여 협업과 교류를 통해 새로운 사회․경제적 가치를 창출하는 사회혁신 거점시설 조성

○ 추진배경

- 기존 방식으로 해결하기 어려운 복잡하고 다양한 사회문제 증대

- 사회문제의 효과적 해결을 위해, 일부 선진국에서는 집단 협업을 통해 혁신적인 접근으로 문제를 해결하려는 노력 전개

- 서울 서북권 지역발전을 위한 새로운 성장 동력 필요

➡ 서울의 사회 문제 및 공공서비스 욕구 해결에 효과적 대응하기 위해 민․관, 혁신전문가 등이 함께 고민할 수 있는 집합적 공간 조성 필요

○ 조성계획

- 위    치 : 은평구 통일로 684 일대 (옛, 질병관리본부 부지)

- 면    적 : 109,727㎡ (녹지 4만㎡ 포함)

- 건물현황 : 32개동 (최고 6층)

- 사 업 비 : 990억원

- 추진계획 (단계별, 연차별 추진)

구 분		사업내용	공 종	사업기간
1단계	단기활용	5 ․ 7동	리모델링	’15.8~’16.5월
	장기활용	1 ․ 4 ․ 8 ․ 16 ․ 19 ․ 21동	리모델링	’15.8~’16.5월
		9 ․ 10 ․ 15동 홈베이스, 변전소, 공동구 등	리모델링 신 설	’15.5~’17.7월
	야외공간	담장개방, CCTV, 보안등 등	신 설	’15.3~12월
		광장 등	조 성	’18.1~’19.12월
2단계	어린이복합 문화시설	지상3층, 연면적 9,896㎡	신 축	’17.1~’19.12월
3단계	지하주차장, 도시농업체험장, 힐링숲	지하4층, 연면적 11,314㎡ 도시농업체험장 5,504㎡ 힐링숲 : 임야 38,631㎡	신 축	’18.1~’19.12월