정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	관광정책과	② 담당자 (전화번호)	과장 김재용 담당 이정은 (2133-2821)
③ 정책사업명	1. 서소문밖 역사유적지 관광자원화
④ 선정기준	100억원 이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤ 사업기간	2013~2018
⑥ 주요내용	❍ 사업목적 : 조선후기 역사와 문화가 집적된 서소문공원을 관광자원으로 활용하고자 역사공원 및 지하 기념공간으로 재조성 ❍ 사업내용 - 사업대상지 : 서울시 중구 의주로2가 16-4 서소문공원 일대 - 사 업 규 모 : 대지 21,363㎡, 연면적 24,781㎡ - 지상 : 근린공원(21,363㎡) → 역사공원으로 재조성 - 지하 : 지하주차장을 리모델링하여 전시·교육공간으로 조성 ❍ 사업기간 : 2013. ~ 2018. ❍ 총 사업비 : 57,496백만원(국비:50%, 시비:30%, 구비:20%) ※ 2017년 예산 : 20,674백만원 ▶ 국비 : 12,921백만원, 시비 :7,753백만원(3,983백만원 명시이월 포함) ❍ 추진경위 - 2013. 10. 서울시 투자심사 완료 - 2014. 03. 중앙투자심사 완료 - 2014. 06. 설계공모 실시 - 2015. 12. 지하공영주차장 폐쇄, 철거공사 착공 - 2016. 08. 실시설계 수립 - 2016. 10. 철거공사 완료 - 2016. 11. 건립공사 착공 - 2017. 05. 지하 기념관 골조공사 진행 중(공정율 11%)