21. 예방업무 추진 향상

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 1~12월

○  총사업비 : 1,077,567천원

○  세부 과목 및 내역

- 사무관리비

□ 소방기술심의회 침석수당                   : 3,200천원

□ 성능위주설계 확인 평가단 운영             : 8,000천원

□ 시민생활안전점검 서비스운영 소모품구매    : 28,100천원

□ 경호업무 추진                             : 26,500천원

- 시책추진업무추진비

□ 화재예방 및 위험물안전진단 업무추진       : 8,000천원

- 기타보상금

□ 유관기관합동점검 민간전문가 보상비        : 35,420천원

□ 소방안전관리 모범대상 보상금              : 12,600천원

- 시설비

□ 저소득층 소방시설 보급                    : 803,228천원

□ 서민생활안전을 위한 가스안전관리 프로젝트 : 100,000천원

- 자산및물품취득비

□ 소방시설 점검기구 구매                    : 45,019천원

□ 위험물제조소 등 소방검사장비 보강         : 7,500천원

○  추진방식 : 연중 수시 재배정 및 일괄집행

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	1,077,567	116,869	72,868	1,004,699	6.76%
사무관리비	65,800	3,750	3,750	62,050	5.69%
시책추진 업무추진비	8,000	879	879	7,121	10.98%
기타보상금	48,020	0	0	48,020	0.00%
시설비	903,228	68,239	68,239	834,989	7.55%
자산및물품 취득비	52,519	44,001	0	52,519	0.00%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 11% / 실적 7%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획		추진실적
사무 관리비	[성능위주설계 확인 평가단 운영] ◦평가 대상 발생 시 평가단 운영, 심의위원 수당 지급	◦총 6회 개최, 총 33명에 대해 3,600천원 수당 지급
기타 보상금	[소방안전관리 모범대상 보상금] ◦기본 계획 수립 : 3월 ◦소방서 현지실사 평가 : 4~6월 ◦본부 현지실사 및 자료 확정 : 7월 ◦심사위원회 인증 및 선정 : 8월 ◦모범사업장 시상 : 9월	◦방침수립 : 3월 ◦소방서 현지실사 평가 진행 중
시설비	[저소득층 소방시설 보급] ◦계획 수립 : 4월 ◦계약 의뢰, 입찰 공고 등 : 4~5월 ◦계약 체결 및 대상 선정 :5월 ◦설치 및 보급 : 6~12월	◦추진계획수립 : 4월 ◦물품구매 계약 심사 : 4월 ◦일상감사 : 4월
	[서민생활안전을 위한 가스안전관리 프로젝트] ◦설치대상 파악 및 계획 수립 : 1월 ◦일상감사 및 계약심사 요청 : 3월 ◦계약 의뢰 : 3월 ◦입찰 및 계약 : 4월 ◦설치 : 4~6월	◦설치대상 파악 및 계획 수립 : 1월 ◦일상감사 및 계약심사 완료 : 3월 ◦계약 의뢰 : 3월 ◦입찰 및 계약 : 4월 ◦설치 진행 중
자산및물품 취득비	[소방시설 점검기구 구매] ◦추진계획수립 : 1월 ◦가격조사 : 2월 ◦계약심사 의뢰 : 3월 ◦물품 구매계약 의뢰 : 3~4월 ◦납품 : 4~5월 ◦소방서 배정 : 5월	◦방침수립 : 1월 ◦가격조사 : 2월 ◦계약심사 의뢰 : 3월 ◦물품 구매계약 의뢰 : 4월 ◦낙찰 : 4월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 소방기술심의회 및 성능위주설계 확인·평가의 경우 심의 내용 및 대상이 발생(접수)되어야 예산의 집행이 가능하여 목표 설정 및 조기 집행에 어려움이 있음

- 소방안전관리 모범대상 인증, 기초소방시설 보급 등과 같이 연중 추진되는 사업이 있어 하반기에 예산 집행이 완료됨

작 성 자	예방과 예방팀장 : 장현태 담당자 : 백종혁 (사업 담당자 : 백광욱, 김효중, 김남훈, 한금석)

22. 재난의 선제적 예방 홍보

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 1~12월

○  규    모 : 본부 및 23개 소방서

- 재난예방홍보(본부)    : 85,000천원

- 재난예방홍보(소방서)  : 71,500천원

- 소방악대 운영         : 8,000천원

- 예방홍보활동 업무추진 : 4,000천원

○  총사업비 : 168,500천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	168,500	66,495	49,066	119,434	41.08%
사무관리비	164,500	64,995	47,566	116,934	40.68%
시책추진 업무추진비	4,000	1,500	1,500	2,500	37.50%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 35% / 실적 35%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦홍보기본계획 수립 : 1월 ◦아이러브119 제작 용역계약 : 2월 ◦아이러브119 제작 : 월 1회 ◦촬영편집장비 유지관리, 사진인화 등 : 연중	◦홍보기본계획 수립 : 1월 ◦아이러브119 제작 용역계약 : 2월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○ 재난기록장비 유지관리 관련

- 애로사항

․물을 많이 사용하는 소방활동의 특성상 재난기록장비 고장이 잦고, 고급전문장비이기 때문에 유지관리 예산소요가 많음

- 개선방향

․바른 장비사용 교육 및 점검을 강화하고,

․내년도 예산편성에 재난기록장비 유지관리 예산 확대편성 필요

○ 영상 콘텐츠 제작․편집 위탁교육 관련

- 애로사항

․소방안전지도 시스템 시행 및 조직개편에 따른 재난기록담당의 부재로 재난기록을 담당할 지휘차 운전과 재난조사 담당에 대한 추가 교육이 필요하고, 4년간 무료 교육을 진행한 KBS에서 금년부터 교육비를 요구함에 따라 예산 부족이 우려됨

- 개선방향

․교육비가 상대적으로 저렴한 한양전문대학과 금년 처음으로 영상콘텐츠 교육을 추진하였고, 양질의 교육 제공을 위해 내년도 예산편성에 위탁교육 예산 증액 필요함

작 성 자	예방과 홍보기획팀장 : 김명호 담당자 : 황영호

23. 시민안전의식 강화

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 및 규모

- 서울 안전체험 한마당(9월)        : 92,600천원

- 119 소방동요대회(9월)          : 20,000천원

- 소방활동 작품공모전(9월)         :    7,600천원

- 불조심 강조의 달 집중홍보(11월) : 28,000천원

○  규    모 : 본부 및 23개 소방서

○  총사업비 : 148,200천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	148,200	1,000	0	148,200	0%
사무관리비	30,600	1,000	0	30,600	0%
행사운영비	109,500	0	0	109,500	0%
기타보상금	8,100	0	0	8,100	0%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 0% / 실적 0%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦서울 안전체험 한마당 운영계획 : 7월 ◦서울 안전체험 한마당 종합계획 : 8월 ◦서울 안전체험 한마당 결과분석 : 10월 ◦서울 안전체험 한마당 유공자 표창 : 10월	시기 미도래
◦서울시 소방동요대회 기본계획 수립 : 7월 ◦서울시 소방동요대회 세부계획 수립 : 8월 ◦전국 소방동요대회 참가 : 10월
◦소방활동작품 공모계획 수립 : 7월 ◦소방활동작품 공모 : 9월 ◦소방활동작품 공모 입상작 시상 : 10월
◦불조심 강조의 달 집중홍보 계획 수립: 10월 ◦불조심 강조의 달 집중홍보 결과분석 : 12월 ◦불조심 강조의 달 유공자 표창 : 12월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  119 소방동요대회

- 애로사항

․소방서 자체적으로 대회참가 대표팀을 선발하고, 대회에 참여함에 있어, 버스 임차 및 식비 지출 등 행사운영비 예산부족으로 사무관리비로 지출하고 있는 실정임

․행사장 대관료 예산편성 부재로 행사장 섭외 어려움 발생

- 개선방향

․행사참여에 소요되는 행사운영비와 1,400석 이상 규모의 행사장

대관료에 대한 예산편성이 필요함

작 성 자	예방과 홍보기획팀장 : 김명호 담당자 : 황영호

24. 재난현장 영상기록물 보존 및 제공

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 및 규모

- 재난영상기록 관리시스템 유지관리(연중) : 31,321천원

- 재난영상기록 시스템 보강(4~5월)       : 81,225천원

○  총사업비 : 112,546천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	112,546	104,488	3,096	101,392	2.75%
공공운영비	31,321	31,310	2,442	28,868	7.80%
자산 및 물품취득비	81,225	73,178	654	72,524	0.81%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 60% / 실적 60%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦재난현장기록물 관리시스템 유지관리 계획 수립 : 2월 ◦재난현장기록물 관리시스템 유지관리 계약 : 2월 ◦재난현장기록물 관리시스템 유지관리 : 연중 ◦재난기록장비 구매계획 수립 : 3월 ◦재난기록장비 구매 계약 : 4월 ◦재난기록장비 검수 및 배정 : 5월	◦재난현장기록물 관리시스템 유지관리 계획 수립 : 2월 ◦재난현장기록물 관리시스템 유지관리 계약 : 2월 ◦재난기록장비 구매계획 수립 : 3월 ◦재난기록장비 구매 계약 : 4월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향 : 특이사항 없음

작 성 자	예방과 홍보기획팀장 : 김명호 담당자 : 황영호

25. 서민층 가스시설 개선사업

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 및 대상 : 2014.1~12월, 국민기초생활수급자 가구 등

○  규    모 : LPG 호스 사용 325가구

○  내    용 : LPG 호스의 금속배관 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치

○  추진방식 : 정부와 지자체(구청)간 매칭방식(50:50)으로 추진

○  총사업비 : 35,591천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	35,591	35,591	35,591	0	100%
자치단체 자본보조	35,591	35,591	35,591	0	100%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 100% / 실적 100%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦국고보조금 교부신청 : 2월 ◦국고보조금 세입조치 : 4월 ◦국고보조금 자치구 교부 : 4월	◦국고보조금 교부신청 : 2월 ◦국고보조금 세입조치 완료 : 4월 ◦국고보조금 자치구 교부완료 : 4월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향 : 특이사항 없음

작 성 자	예방과 가스위험물안전팀장 : 박순일 담당자 : 한금석