1. 구로소방서 승강기 설치 및 안전센터 보수보강공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2015. 2. 1. ~ 2015. 9. 30.

○  규    모 : 승강기 15인용, 환경개선 732㎡, 석면제거 405㎡

- 승강기설치 : 승강기 15인승 3STOP(MRL TYPE) 60m/min

- 환경개선: 내부 사무실 재구획 및 개선공사 732㎡, 석면해체                     제거처리 405㎡, 청사시설물 정화조 등 보수 및 기타                       시설 교체, 구급차량 2소대 재배치 차고 확장 등

- LED전등교체 : 독산119안전센터 LED등기구 교체

- 소방관 처우개선 : 화장실, 식당, 체력단련장 보수 및 개선

○  추진방식 : 환경개선 제한경쟁입찰, 승강기설치 조달계약

○  총사업비 : 금368,300천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	368,300	10,350	10,350	357,950	2.8%
시 설 비	368,300	10,350	10,350	357,950

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 10% / 실적 15%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 : 1월 ◦설계계약 및 입찰 : 2월 ◦설계준공 : 4월 ◦공사계약심사 : 5월 ◦일상감사 : 5월 ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦착공 : 6월 ◦준공 : 9월 ◦공부정리 등 : 10월	◦방침수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 완료 : 1월 ◦설계용역 입찰 : 2월 ◦설계용역 계약 : 2월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 대기실 및 복도 등 전층 석면해체에 따른 임시청사 운영에 필요한       공간 확보 곤란

- 구급출동 지역별(금천구) 여건 감안 공단119안전센터 2소대 구급대

독산119안전센터 재배치에 따른 차고 확보 면적 확장에 따른 공사비 소요

○  개선방향

- 24시간 현장출동 대기를 위한 임시청사의 난방시설 설치 등 예산       절감을 위하여 6월 착공

- 공사기간 중(2개월)물탱크차 본서 및 공단119안전센터 재배치

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 김정수 담당자 : 천완주