2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스

월간업무보고서

- 09월 월간업무 현황보고 -
(2014. 09. 01 ~ 2014. 09. 30)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ3-5-1-10	PM	감독관
작 성 자	박 철 희
보 고 일	2014년 10월 06일

사업 기간		2014.07.22 ~ 2015.01.17			실적기간		2014.09.01 ~ 2014.09.30
프로젝트명		2013년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스			사업자명		㈜씨엠월드 PM 박 철 희
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	17.00	13.80	81.18	17.00	13.80		81.18	6.20
사업 관리	10	2.90	2.90	100.00	2.90	2.90		100.00	1.30
항공사진통합 원스톱 서비스	50	13.60	10.40	76.47	13.60	10.40		76.47	4.90
항공사진 DB 구축 및 변환 처리	40	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50		100.00	0.00

	2014년 항공사진 통합관리 원스톱 서비스 월간보고 (09월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박철희
	문서번호:PJ3-8-1-09월간업무현황보고서_0930	버전: 1.0		작성일자: 2014/09/30

금 월 실 적 (09/01 ~ 09/30)
사업관리	1. 항공사진 서비스 홍보자료 작성 o 항공사진 서비스 홍보자료 작성(국문, 영문) - 홍보자료 디자인 검토 및 수정 - 서울시 항공사진 서비스 현황 작성 - 모자이크 정사영상 지도 제작 단계 작성 - 항공사진 서비스(인트라넷, 시민서비스, 원본관리)소개 - 항공사진 시민 서비스 및 인트라넷 현황 통계 그래프 작성 o 항공사진 테마 서비스 홍보 동영상 제작(국문, 영문) - 시나리오 작성 - 스토리 보드 작성 - 동영상 제작 및 편집, BGM 선곡 및 삽입
	2. 프로젝트 관리 계획 수립 o 세부일정 계획 수립 o 품질보증 계획 수립 - 품질활동계획서 작성 o 범위 및 변경관리 계획 수립 - 변경관리대장, 변경요청승인서 작성 o 위험 및 이슈관리 계획 수립 - 이슈관리 대장, 내역서 작성 - 위험관리대장, 위함관리내역서, 위험관리계획서 작성
시스템 개발	1. 시스템 설계 o 기능상세 설계 - 항공사진 검색 및 항공사진 뷰어 기능 상세 기능 정의 및 설계 o 메뉴 구성도 작성 및 메인화면 구성 설계 - 기능별 컴포넌트 배치 및 구성 설계 o 화면 프레임 구성 - 항공사진 뷰어 메뉴, 서브메뉴, 인덱스 맵, 화면제어 및 메인화면 2. DataBase 설계 o 데이터 논리/물리 설계(ERD) - 데이터 관계도 및 상세 설계 정의, 정제 o 시스템 구현을 위한 DB 준비 - 메타 정보 및 통계정보를 위한 임시 데이터 적재 및 검토 3. 시스템 구현 o 메타데이터 보기 - 항공사진 상세 정보 보기 기능 구현을 위한 DataBase 연결 정의 - 메타 데이터 질의를 위한 인터페이스 구현 o 연도별 항공사진 비교보기 - 항공사진 조건별 비교를 위한 Logic 구현 o 항공사진 검색 - POI 위치 검색을 위한 질의문 작성 및 결과 정보 List 출력
항공사진DB구축 및 영상지도제작	1. 항공사진 DB 구축 일정 수립 o 항공사진 DB 구축 관련 업무 절차 및 일정 수립 2. 2014년도 항공사진 촬영 데이터 분석 o 1차 촬영 데이터 분석 및 주기정보 확인

익 월 계 획 (10/01 ~ 10/31)
사업 관리	1. 2014년도 항공사진 인수 계획 o 2014년 항공사진 인수를 위한 절차 방법 정의 2. 보안처리 규정 정의 o 국가정보원 보안 규정에 의한 보안처리 방법 정의 3. 국가정보원 보안 심의 방법 정의 o 2014년도 보안심의를 위한 낱장사진 검수 방법 정의
시스템 개발	1. 시스템 아키텍쳐 및 DB 설계 정제 o 시스템 인터페이스 정제 - 연계 시스템 인터페이스 변경에 따른 분석 및 재설계 o DB 설계 정제 - 연계 시스템 정보 분석 및 재설계 2. 시스템 구현 o 화면 프레이임 구성 o 항공사진 메타데이터 보기 o 연도별 항공사진 비교보기 o 항공사진 검색 o 항공사진 온라인 출력관리
항공사진DB구축 및 영상지도제작	1. 2014년 항공사진 입수 o 2014년 촬영 항공사진 및 메타 데이터 입수 및 분석 - 항공사진 파일 포맷 및 주기정보 확인 및 분석 - 항공사진 메타 데이터 분석 2. 2014년 항공사진 DB구축 o 2014년 촬영 항공사진 국군기무사 보안 처리 - 항공사진 국군기무사 보안처리 규정에 의한 보안처리 o 2014년 항공사진 메타 데이터 구축 - 항공사진 성과상세내역, 촬영정보 DB구축

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
DB변환 및 정비
항공사진 제작

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항	1. 2014년 항공사진 국가정보원 보안처리 규정 정의

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자