2015년 항공사진 서비스 기능 개선

월간업무보고서

- 11월 월간업무 현황보고 -
(2015. 11. 01 ~ 2015. 11. 30)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ3-5-1-011	PM	감독관
작 성 자	박 철 희
보 고 일	2015년 12월 01일

사업 기간		2015.08.04 ~ 2016.01.31			실적기간		2015.11.01 ~ 2015.11.30
프로젝트명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선			사업자명		㈜씨엠월드 PM 박 철 희
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	23.01	21.30	92.57	59.30	57.70		97.30	21.41
사업 관리	10	1.44	1.40	97.22	6.40	6.40		100.00	1.80
항공사진 서비스 기능개선	50	8.25	7.20	87.27	28.60	25.70		89.86	8.81
항공사진 DB 구축 및 변환 처리	40	13.32	12.70	95.35	24.30	25.60		105.35	10.8

	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 월간보고 (11월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박철희
	문서번호:PJ3-5-1-11월간업무현황보고서_1130	버전: 1.0		작성일자: 2015/11/30

금 월 실 적 (11/01 ~ 11/30)
사업관리	1. 중간보고회 일 시 : 2015년 11월 23일(월요일) 16:00~17:00 장 소 : 스마트 정보지원센터(서소문청사 1동 3층) 참석자 : 공간정보담당(과장, 팀장, 주무관 등 12명) 유관부서(건축기획과 1명) 수행업체(박철희 차장 등 4명)
	2. 인트라넷 정사영상 지도 반영 o 항공사진 정사영상지도 10cm급 국군기무사 보안처리 정사영상지도 서비스 반영 협의(2015년 11월 30일)
시스템 개발	1. 시스템 설계 o 항공사진 시민서비스 신청서, 검색 디자인 개선 o 인트라넷 정사영상 서비스 화면 적용 o 국가기본구역 API 분석 및 설계
	2. 시스템 구현 o 위치검색(네이버) 모듈 개발 o GIS기본 기능(확대/축소/이동, 인덱스 맵, 축척바) 개발 o 벡터 데이터 오버레이 - 수치지도 인덱스, 행정경계, 지적지번 o 메타 데이터 표출 개발
	3. 웹표준 진단 o 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 - Markup Validation : 총 54page 중 9page - CSS Validation : 총 54page 중 50page
항공사진DB구축 및 투영원점 좌표변환	1. 인트라넷 서비스 o 투영원점 변경 정보 Update
	2. 2015년 항공사진 촬영 데이터 DB구축 o 항공사진 시민서비스 벡터 데이터 좌표변환 - GeoServer, PostgresSQL 적용 및 테스트 o 2015년 항공사진 DB구축 - 항공사진 진북 회전 작업 완료 - 항공사진 MBR(최소사각형 경계) 구축 완료 - 국군 기무사 보안처리 (총:921매 중 500매)
	3. 원본관리 시스템 정사영상 도입 o 10cm급 Tile Map 제작 - 2013, 2009, 2003, 1999 년도 10cm급 완료 (국가정보원 보안처리 규정에 의한 항공정사영상 지도)

익 월 계 획 (2015/12/01 ~ 2015/12/31)
사업 관리	1. 국가정보원 보안처리 규정 검수 o 국가정보원 보안규정에 의한 보안처리 검수 신청 o 국가정보원 검수에 따른 개발 장비 설정 - 2015년 항공사진 촬영 전체 대상으로 메타 데이터 및 항공사진 검수를 위한 설정
시스템 개발	1. 시스템 구현 o 항공사진 시민서비스 - 시스템 연계 모듈 적용(E-Tax) - Naver 검색 API 모듈 적용 - 국가기초구역, 국가지점번호 검색 개발 및 적용 o 원본관리 시스템 - 위치 및 항공사진 검색 - 메타 데이터 보기 - 항고사진 낱장 보기(정사영상 지도 레이어 중첩) - 통계 현황 수정 및 개선
항공사진DB구축 및 투영원점 좌표변환	2. 2015년 항공사진 촬영 데이터 DB구축 o 항공사진 국군기무사 보안처리 - 국군기무사 보안지역 위장처리 작업 수행 완료(예정) 총 : 921매 중 500매 완료 상태 추후 421매 완료 예정 o 항공사진 및 메타데이터 검증 및 개발 장비 이관 테스트 - 2015년 항공사진 메타데이터 개발 장비 이관 테스트 - 항공사진 개발 장비 이관 테스트 o 국가정보원 보안규정 보안처리

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
DB변환 및 정비
항공사진 제작

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자