2015년 항공사진 서비스 기능 개선

월간업무보고서

- 12월 월간업무 현황보고 -
(2015. 12. 01 ~ 2015. 12. 31)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ3-5-1-012	PM	감독관
작 성 자	박 철 희
보 고 일	2016년 01월 04일

사업 기간		2015.08.04 ~ 2016.01.31			실적기간		2015.12.01 ~ 2015.12.31
프로젝트명		2015년 항공사진 서비스 기능 개선			사업자명		㈜씨엠월드 PM 박 철 희
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	18.40	17.80	96.74	77.70	75.50		97.17	24.50
사업 관리	10	1.50	1.50	100.00	7.90	7.90		100.00	2.10
항공사진 서비스 기능개선	50	7.60	7.50	98.68	36.20	33.20		91.71	16.80
항공사진 DB 구축 및 변환 처리	40	9.30	8.80	94.62	33.60	34.40		102.38	5.60

	2015년 항공사진 서비스 기능 개선 월간보고 (12월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박철희
	문서번호:PJ3-5-1-12월간업무현황보고서_1231	버전: 1.0		작성일자: 2015/12/31

금 월 실 적 (12/01 ~ 12/31)
사업관리	1. 국가정보원 보안처리 규정 검수 o 국가정보원 보안규정에 의한 보안처리 검수 신청 o 국가정보원 검수에 따른 개발 장비 설정 - 2015년 항공사진 촬영 전체 대상으로 메타 데이터 및 항공사진 검수를 위한 설정
	2. SSL(Secure Socket Layer)프로토콜 반영을 위한 인증서 적용 협의 o CA(Certificate Authority) 인증 신청 및 적용 Test 협의 - *.seoul.go.kr 도메인 적용
시스템 개발	1. 시스템 구현 o 항공사진 시민서비스 - 시스템 연계 모듈 적용(E-Tax) - Naver 검색 API 모듈 적용 - 국가기초구역 검색 개발 및 적용 o 원본관리 시스템 - 위치 및 항공사진 검색 - 메타 데이터 보기 - 항공사진 낱장 보기(정사영상 지도 레이어 중첩 및 속도 향상을 위한 알고리즘 변경) - 통계 현황 수정 및 개선 - 행정구역, 수치지도 인덱스, 지적지번 데이터 표출
	2. 웹표준 진단 o 웹표준 HTML, CSS 검사 및 수정 - Markup Validation : 총 54page 중 50page - CSS Validation : 총 54page 중 54page
항공사진DB구축 및 투영원점 좌표변환	1. 2015년 항공사진 촬영 데이터 DB구축 o 항공사진 국군기무사 보안처리 - 국군기무사 보안지역 위장처리 작업 수행 완료 총 : 921매 중 921매 완료 o 항공사진 및 메타데이터 검증 및 개발 장비 이관 테스트 - 2015년 항공사진 메타데이터 개발 장비 이관 테스트 - 항공사진 개발 장비 이관 테스트 o 국가정보원 보안규정 보안처리 - 국가정보원 보안지역 분석 총 : 4,969매 중 584매

익 월 계 획 (2016/01/04 ~ 2016/01/29)
사업 관리	1. 국가정보원 보안처리 규정 적용 o 보안규정(블러링, 커버링, 해상도저하) 위장처리 검수
	2. 항공사진 시민서비스 웹 접근성 인증 의뢰 o 항공사진 시민서비스 웹 접근성 인증 획득을 위한 웹 접근성 품질 심사 진행
	3. 완료보고회 수행 o 완료보고 자료 준비 및 발표 - 2016년 01월 25일 월요일 : 예정
	4. 준공 검사 o 준공계 및 준공검사 자료작성 o 준공 검사 및 확인
시스템 개발	1. 시스템 구현 o 항공사진 낱장보기 속도 개선 o 통계 현황 수정 및 개선 o 웹 표준 및 SSL 통신 개발 - Markup Validation : 총 54page 중 50page - CSS Validation : 총 54page 중 54page 2. 기능 및 통합 테스트 o 테스트 계획 수립 - 총괄시험계획서, 시스템시험 시나리오, 통합시험 시나리오 작성 o 통합테스트 및 시스템 테스트 - 통합테스트 결과서 작성 - 시스템 테스트 결과서 작성 3. 시험서비스 및 안정화 o 운영시스템 설치 o 시험서비스 o 보완 및 안정화
항공사진DB구축 및 투영원점 좌표변환	1. 2015년 촬영 항공사진 국가정보원 보안 심의 o 항공사진 시민 서비스용 JPEG2000 보안 심의 요청(총 : 4,969매) o 국가정보원 보안 심의 결과 검토 및 반영 - 보안 지역의 항공사진 보안처리(국가정보원 보안처리규정) o 항공사진 보안 재심의 요청
	2. 2015년 항공사진 DB구축 및 이관 o 항공사진 메타데이터 DB 이관 o 항공사진 File 이관 o 항공사진 및 DB 이관 자료 검증
	3. 좌표투영원점 변경 적용 Data 이관 o 인트라넷 서비스 - 정상영상지도 및 Vector Data o 시민 서비스 - Tile Map, Vector Data, 메타데이터

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
DB변환 및 정비
항공사진 제작

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자