2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선

월간업무보고서

- 8월 월간업무 현황보고 -
(2018. 08. 01 ~ 2018. 08. 31)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ_AS_MWR_08	PM	감독관
작 성 자	마성진
보 고 일	2018년 08월 27일

사업 기간					2018.06.12 ~ 2018.12.31				실적기간			2018.08.01 ~ 2018.0.31
프로젝트명					2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 용역				사업자명			삼아항업㈜ PM 마 성 진
공정 진척 구분(%)		전 월 까 지				금 월				누 계				차 월
		계획	실적	대비율		계획	실적	대비율		계획	실적		대비율	계획
종 합	100	10.49	10.49	100		20.82	20.82	100		31.31	31.31		100	15.64
사업 관리	16.59	5.32	5.32	100		1.74	1.74	100		7.06	7.06		100	1.74
항공사진 DB 구축 및 변환	14.79	0	0	-		1.20	1.20	100		1.20	1.20		100	1.70
과거년도 비공개 항공사진 보안처리	20.23	2.33	2.33	100		5.06	5.06	100		7.39	7.39		100	2.06
항공사진 DB 정확도 개선	44.89	2.84	2.84	100		9.33	9.33	100		12.17	12.17		100	10.14
소프트웨어 신규개발 (민원처리 알림)	3.49	0	0	-		3.49	3.49	100		3.49	3.49		100	완료

	2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 용역 월간보고 (08월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		마성진 차장
	문서번호:PJ_AS_MWR_08-08월간업무현황보고서_0827	버전: 1.0		작성일자: 2018/08/27

금 월 실 적 (2018/08/01 ~ 08/31)
사업관리	1. 주, 월간 정기보고 및 공정관리 o 8월 6,13,20,27일 주간보고 o 8월 27일 월간보고 o DB구축 및 시스템개발 진행 현황 체크
	2. 항공사진 DB 정확도 개선 o 1982년 1차 - 시스템 반영 TEST 일정협의 - 오류사진(41C26) 영상 인수·인계 - 정확도 개선 검증 설명회 – 18.08.13(월) - 시스템 개선 회의 – 18.08.14(화) - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영(안) 제시 및 일정협의
	3. 2018년 항공사진 DB 구축 o 촬영분 성과 인수 추진 현황 확인 o 촬영분 성과 인수·인계
	4. 항공사진 발전방향 연구 o 연구보고서 반영사항 협의 및 수렴 - 착수보고회 제기된 의견 및 타기관 담당자 의견 수렴 등 o 자문 교수(서울시립대 이지영교수) 과업설명 - 과업 착수 협의 등 o 연구보고서 현황 분석 - 보고서 목차(안) 구성 협의 - 관련 내용별 현황 분석
	5. 디지털 국토 엑스포 홍보지원 o 판넬, 리플렛, 홍보동영상 제작

금 월 실 적 (2018/08/01 ~ 08/31)
2018년도 항공사진 DB 구축	1. 2018년 항공사진 o 영상성과 인수 o 파일 이상 유·무 및 영상 매수(1929매) 확인 o 영상 성과 자료 분석
과거년도 비공개 항공사진 보안처리	1. 기무사 보안처리 o 완료 : 75회차(`06년1차), 77회차(`07년), 78회차(‘`08년), 83회차(`13년) o 진행중 : 76회차(`06년2차), 80회차(`10년), 82회차(`12년)
	2. 기무사 보안처리 완료본 육안검수 진행 o 진행중 : 75회차(`06년1차), 77회차(`07년), 78회차(‘`08년), 83회차(`13년)
항공사진 DB 정확도 개선	1. 사진기준점측량 o `81년 2차, `82년 1차 완료 o `88년 2차 영상 분석 및 확인
	2. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영 o `81년 2차 제작 진행중
S/W 개발	1. 항공사진 시민 서비스 문자알림 기능 개발 o 개발 완료 기능 - SMS 서버 포트 신청 및 사용 승인 - 항공사진 신청시 신청자 문자발송 기능 - 항공사진 신청시 담당자 문자발송 기능 - 항공사진 처리완료시 수동 문자 발송 기능 - 알림현황 조회 및 수정 - 알림현황 엑셀 다운로드 - 알림수신 설정
	2. 항공사진 업무용 서비스 문자알림 기능 개발 o 개발 완료 기능 - 알림수신 설정 - 항공사진 신청시 신청자 문자발송 기능 - 항공사진 신청시 담당자 문자발송 기능 - 항공사진 처리완료시 문자발송 기능

익 월 계 획 (2018/09/01 ~ 2018/09/30)
사업 관리	1. 정기보고 o 주간보고 및 작성 o 9월 월간보고 및 작성
	2. DB구축 진행 현황 체크
	3. 항공사진 발전방향 연구 o 현황분석 o 담당, 유관부서 인터뷰 및 타기관 의견 수렴
2018년도 항공사진 DB구축	항공사진 DB 변환 및 정비 o 자료분석 및 확인 o 파일명표준화 o 항공사진 성과내역 구축
과거년도 비공개 항공사진 보안처리	과거년도 항공사진 기무사 보안처리 진행 o 78회차(`08년), 79회차(`09년), 81회차(`11년) 완료
	2. 기무사 보안처리 완료본 육안검수 진행
항공사진 DB 정확도 개선	사진기준점 측량 진행 o `81년 2차 검수완료 및 시스템 로딩 o `88년 2차 작업 완료
	2. 영상 분석 및 확인 o `89년 1차 영상 분석 및 확인
	3. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작 o `82년 1차, `81년 2차
소프트웨어 신규개발 (민원처리 알림)	항공사진 업무용 서비스 문자알림 기능 개발 완료 o 테스트 완료 o 테스트 결과서 작성

기타사항
협의사항	- 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 서비스 반영 (안) 도출 및 TEST 진행 협의 - 일자리 사업을 통한 메타데이터와 원본사진 촬영일자 일치 여부 확인 작업 협의
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
내부업무시스템 통합
DB변환 및 정비

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항	디지털 국토엑스포 홍보지원

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자