◈ 서울특별시고시 제2018-000호

한강협력계획 4대 핵심사업(통합선착장, 피어데크, 여의테라스, 복합문화시설) 건설공사 기본계획 고시

중앙정부-서울시가 공동연구하여 발표(`15.8.24)한 한강협력계획중 4대 핵심사업(통합선착장, 피어데크, 여의테라스, 복합문화시설)에 대하여 건설기술진흥법 시행령 제69조 제1항 규정에 의하여 기본계획을 수립하고 같은법 시행령 제69조 제5항에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2018년  3월 2일

서 울 특 별 시 장

공사의 목표 및 기본방향

가. 공사목표

○ 한강의 매력도 및 이용편의성을 최대한 높이고 자연환경과 시민‧관광객이 어우러진 공간으로 재창조

○ “관광‧문화 및 소통과 교류”의 장으로써 일상과 비일상의 삶이 녹아들고,

인적‧문화적 교류가 활발히 이루어 지는 한강의 대표적 명소로 조성

나. 기본방향

○ 수리안전 확보   : 홍수 등 재해 및 구조 등에 대한 안전성 확보

○ 환경영향 최소화 : 자연훼손 최소화를 위해 기존 지형 및 시설 활용

○ 한강경관 배려   : 한강과 도시의 유기적인 연계(경관 명소화)

○ 경제성 확보     : 사업의 지속가능성 확보와 사업간 시너지 극대화

공사내용, 기간, 시행자 및 공사수행계획

가. 공사내용

○ 위 치 : 서울시 영등포구 여의도동 85번지 일대 여의도 한강공원

(5호선 여의나루역 인근 수상 및 제방, 마포대교~원효대교 사이)

○ 사업내용

- 통합선착장   : 관공선, 민간선박 등 통합기능 선착장 조성

(부유체 5,350㎡ + 상부 구조물 2,100㎡)

- 피어데크     : 통합선착장과 연계한 수변집객시설 조성

(부유체 5,550㎡ + 상부 건축물 7,000㎡)

- 여의테라스   : 윤중로변 수변상업가로 조성 (건축 연면적 8,500㎡)

- 복합문화시설 : 한강변 시민문화 향유공간 제공 (건축 연면적 8,000㎡)

나. 공사기간

○ 통합선착장 :  `18. 8 ~ `19. 12

○ 피어데크‧여의테라스‧복합문화시설 : `19. 9 ~ `20. 12

다. 사업시행자

○ 재정사업(통합선착장, 복합문화시설) : 서울특별시장

○ 위탁사업(피어데크, 여의테라스)     : 수탁사업자

라. 공사수행계획 : 대형공사 입찰방법 심의결과에 따라 수행

○ 통합선착장‧복합문화시설 : 서울시에서 설계‧시공 분리발주 시행

○ 피어데크‧여의테라스     : 수탁사업자가 설계‧시공 분리발주 시행

3. 공사비 및 재원조달계획 (기본계획기준)

가. 공사비 : 총1,580.6억원

○ 통합선착장   : 275.00억원

○ 피어데크     : 381.42억원

○ 여의테라스   : 468.77억원

○ 복합문화시설 : 455.41억원

나. 재원조달계획

○ 통합선착장   : 국비 50%(137.5억원), 시비 50%(137.5억원)

○ 피어데크     : 민자 57%(216.98억원),

국비 21.5%(82.22억원), 시비 21.5%(82.22억원)

○ 여의테라스   : 민자 84%(392.37억원),

국비 8%(38.2억원), 시비 8%(38.2억원)

○ 복합문화시설 : 국비 50%(227.705억원), 시비 50%(227.705억원)

4. 개별공사별 투자 우선순위

가. 1순위 : 통합선착장

나. 2순위 : 복합문화시설

다. 3순위 : 피어데크, 여의테라스

5. 연차별 공사시행계획

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
통합선착장	기본구상	기본계획, 투자심사	설계공모	기본‧실시설계, 착공	준공
피어데크	기본구상	기본계획, 투자심사	-	수탁사 선정, 설계(운영)공모	기본‧실시설계, 착공	준공
여의테라스	기본구상	기본계획	타당성 조사 투자심사	수탁사 선정, 설계(운영)공모
복합 문화시설	기본구상	기본계획	타당성 조사 투자심사	설계공모

6. 시설물 유지관리계획

○ 실시설계시 별도수립예정인 시설별 유지관리지침에 의하여 유지관리

7. 환경보전계획

○ 환경영향평가법 제9조에 따라 시행하는 전략환경영향평가, 소규모 환경영향평가 등의 결과에 따라 조치할 계획임

8. 기대효과

○ 도시와 수변의 연계를 통해 한강의 매력도 및 이용편의성 증진

○ 한강의 관광거점 조성을 통해 지역경제활성화 및 고용증가에 기여

○ 한강의 정체성, 수요특성을 반영한 콘텐츠 도입 및 사업구조(재원조달)화하여  지속가능성 확보

※ 기타 자세한 사항은 서울특별시 공공개발센터(☎02-2133-8355)로 문의하여

주시기 바랍니다.