정수시설 청소용역 작업지시서(하반기)

용 역 명	2018년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역
계 약 자	상호 및 대표 : 동창건설(주), 전혜원 주 소 : 서울시 광진구 천호대로 670
계약금액	111,193,000원
작업기간	2018.08.28 ~ 2018.12.20 ※ 청소작업일정 및 물량은 정수센터내 시설물 보수공사 등에 따라 조정될 수 있으므로 사전 감독관에 지시에 따를 것
작업지시 내용	구 분		시 설 물	계약 수량	실적수량		지시수량 (하반기)	단위
					누계	전월
	주벽청소	#1	착수정(2지)	2	-	-	2	지
			응집·침전지(6지)	12	6	-	6	지
			여과지(12지)	24	12	-	12	지
		#2	착수정(2지)	2	-	-	2	지
			응집·침전지(6지)	12	6	-	6	지
			여과지(10지)	20	10	-	10	지
		고도	활성탄흡착지(18지)	18	18	-	-	지
		정수	정수지(4지)	4	-	-	4	지
		배출수	1차 농축조(2지)	2	-	-	2	지
			2차 농축조(2지)	2	-	-	2	지
			배출수지(2지)	2	-	-	2	지
			배슬러지지(2지)	2	-	-	2	지
	상등수 이송펌프 설치 및 운전(1정수장 침전지)			12	6	-	6	회
비 고	※ 작업지시 물량은 현재 청소용역 계획물량으로서 현장여건 등에 따라 청소용역 물량을 조정할 수 있음
2018. 08. . 감독자 : 정수과 지방환경주사보 정 승 열 구의아리수정수센터

□ 정수시설 청소일정(2018년 하반기)

○ 응집·침전지

구 분	1지	2지	3지	4지	5지	6지
#1정수장	9/6	9/7	9/10	9/11	9/12	9/13
#2정수장	9/19	9/20	9/21	9/27	9/28	10/1

○ 여과지

구 분	1지	2지	3지	4지	5지	6지
#1정수장	9/14	9/14	9/14	9/14	9/17	9/17
#2정수장	10/2	10/2	10/2	10/2	10/4	10/4
구 분	7지	8지	9지	10지	11지	12지
#1정수장	9/17	9/17	9/18	9/18	9/18	9/18
#2정수장	10/4	10/4	10/5	10/5

○ 활성탄흡착지 : 상반기 청소완료

1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지
9지	10지	11지	12지	13지	14지	15지	16지

○ 착수정, 정수지, 1·2차 농축조 및 배출수·배슬러지지

정수지							착수정
1계열			2계열				1정수장				2정수장
1지		2지		3지		4지		1지		2지		1지	2지
10/10	10/11		10/15		10/16		8/28		8/29		8/30		8/31
배출수지				배슬러지지				1차 농축조				2차 농축조
1지		2지		1차		2차		1지		2지		1지	2지
9/3		9/3		9/4		9/4		9/19		10/17		9/5	9/12

※ 청소일정은 정수시설 운영, 공사, 현장여건, 기상상태에 따라 변경될 수 있음.