<서식 7호>

명 시 이 월 조 서(요구서)

(단위 : 천원)

과 목					명시이월 내 용	예산액	이월액	사 유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목
식품공중위생관리	식품공중위 생수준향상	식품위생업소관리	시설비 및 부대비	시설비	북가좌동 먹거리골목 홍보 조형물 설치시설비 이월	53,744	53,744	① 아치형구조의 안전성 결여 등 부적절 의견(서대문구 디자인위원회 자문결과)에 따른 조형물 재설계 필요:음식문화거리로서의 지역여건 재조명 ② 조형물 설치업체를 통한 디자인 선정 및 디자인위원회 재심사 등 일정소요에 따른 사업예산 명시이월 필요 ③ 공개입찰이나 전자입찰 등 절차진행 후 ‘17년초 조속시행 예정