[붙임1]

양평1유수지CSOs저류조사업 점검표

(서울특별시)

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

시군	사업명	사업내용	사업기간	사업비
				총사업비	국고	지방비
서울	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	CSOs조류조 Q=46,000㎥	2016.12.5.~ 2019.08.04	32,086	16,043	16,043

2. 예산 집행 현황(국고 기준)

(단위 : 백만원)

전년도 이월액(A)	‘17년 예산 (B)	현액 (C=A+B)	지자체 실집행액* (D)	실집행률 (D/C, %)	’17년 지방비 확보여부 (금액)
-	8,000	8,000	183	2.3	1,200

* 6월말 기준 예상 실집행액 기재

3. 사업추진 현황(공정율 : 계획 36.4% / 실적 37.8%)

○ ‘16.12.05~’17.03.01 : 설계검토 및 이장물 이설공사 시행

○ ‘17.03.02~’17.06.20 : 가시설(CIP, Sheet-pile천공 및 항타) 공사 시행

○ ‘17.06.21~현재     : 구조물 터파기 및 사토처리 공사 중

4. '17년 실집행 부진사유 및 집행 계획

○ 2016.12월 공사 착공하여 유관기관 협의, 인허가 절차, 지장물이설을 완료하고 현재 가시설공사 및 구조물터파기 공사를 진행중으로 공정계획에 의한 집행시기 미도래로 집행이 부진함.

○ (집행 계획)

- '17.07.30 기성금 지급(기성금 3,000백만원 집행):국고기준

- '17.09.30 기성금 지급(기성금 1,500백만원 집행):국고기준

- '17.12.00 1차공사 준공금 지급(공사 선금 2,000백만원 집행):

국고기준

- '17.12.00 2차공사 계약체결(공사 선금 500백만원 집행):

국고기준

※ '17년 말까지 7,000백만원(87.5%) 집행예정:국고기준

5. 추진상 문제점 및 건의사항

○ 해당없음

구분	성명	소속	부서	사무실 전화번호	연락처	이메일
담당자
담당계장