붙임 #2

주계약자 공동도급 업무절차

단 계		내 용
집행계획 수립		□ 주계약자 공동도급 발주여부 검토 □ 주계약자 공동도급으로 설계
		⇩
사전검토 (건설혁신과)		□ 전문공사 발주대상 사업 적정여부 검토
		⇩
계약심사 (계약심사과)		□ 설계 적정성 및 설계도서 불일치 여부 검토
		⇩
‘공종분리 검증위원회’ (발주부서)		□ 계약심사 후 공종분리 적정성검토 □ 구 성 - 위원장 : 발주부서장 - 위 원 : 설계사(책임, 분야별기술자), 시공사(종합, 전문건설사 직원) 등
		⇩
사전검토 (건설혁신과)		□ ‘공종분리 검증위원회’ 개최 및 적정성 확인
		⇩
발주방식 및 입찰방법 결정		□ 주계약자 공동도급 발주방침 확정 □ 제한경쟁 등 입찰방법 결정
		⇩
입찰공고 (재무과)		□ 입찰공고문 준비, 입찰공고(입찰제한 내용 명시)
		⇩
현 장 설 명		□ 현장설명(생략 가능)
		⇩
적 격 심 사		□ 접수 및 개찰, 적격심사
		⇩
낙 찰 자 결 정		□ 심사결과 95점이상자 낙찰자 결정 및 통보
		⇩
계약체결 및 계약이행		□ 낙찰자 결정통지 이후 10일 이내에 체결 □ 서울특별시 주계약자 공동도급 표준협정서 서면제출 : 7일 이내 □ 서울특별시 주계약자 직접시공 각서 및 적정임금 (시중노임단가 이상) 지급 각서 제출 : 7일 이내 □ 서울특별시 주계약자 계획⋅관리⋅조정 업무대가 지급 협정서 제출 : 30일 이내
		⇩
‘건설공사 상생협력회의’		□ 착공 후 월 1회 이상 시행 ※ 현장여건에 맞게 조정가능
		⇩
계약이행 및 하자보수		□ 검사, 기성 및 준공대가 지급, 하자보증서 징구