보라매공원 반려견놀이터 CCTV 구매설치 사업 이월 사유서

(서울시, 푸른도시국 동부공원녹지사업소 시설과, 과장 진병규, 담당 강희진 ☎:2181-1156)

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	집행현황			불용액	이월액	이월사유 (개략)	추 진 상 황				비고 (사업 년도)
	국비	집행액	집행율				설계중	발주중 (착수 예정일)	공사중	준공 예정일
계
보라매공원반려견놀이터CCTV 구매설치	13..6	0	0	0	13.6	도시공원위원회 심의 지연으로, 2015년 12월 발주 및 계약체결되었으며, 2016년 4월 준공예정		○ (‘16.2.15)		○ (´16.4.20)	2015년

□ 이월사유(자세히 서술)

○(서울시)

- 2016년 4월 이후 보라매공원에 조성되어 개장하는 반려견놀이터에 CCTV 설치, 운영이 반드시 필요하나, 사전 절차인 도시공원위원회 심의가 지연됨. 2015년 12월 발주하여 2016년 4월까지 공사로 진행하고자 사고이월함.

□ 지금까지 추진경위

* 증빙자료 첨부(사진, 신문기사, 언론보도, 보고서류 등 근거서류 첨부)

○ (서울시)

- ´15. 9월15일, 제10차 도시공원위원회 본위원회 개최

- ´15. 10월20일, 제11차 도시공원위원회 본위원회 개최

- ´15. 11월24일, 제12차 도시공원위원회 본위원회 개최

- ´15. 12월 3일, 제12차 도시공원위원회 결과 통보

- ´15. 12월 3일, 「보라매공원 반려견놀이터 CCTV 구매설치」 발주

- ´15. 12월18일, 2015년도 재배정예산 사고이월 대상사업 제출

(동부공원녹지사업소 → 정보통신담당관)

- ´15. 12월17일, 계약[계약자 : 이철재, 계약금액 : 13,600천원, 납품기간 : 2016.2~2016.4.20.(계약일로부터 120일간)]

- ´16. 2월, 착공 예정

- ´16. 4월20일 물품납품 완료 예정

※ 「보라매공원 반려견놀이터 CCTV 설치 계획(2015.12.03.)」 붙임

□ 사업추진상 문제점 및 대책

○ (대책)

- ‘16년 2월 중순 「보라매공원 반려견놀이터 조성공사」의

토목공사 공정 시행 시 「보라매공원 반려견놀이터 CCTV

제작구매 설치」착공

□ 앞으로 추진(집행)계획

○(서울시)

일 정	추진내용	국비 집행 계획(백만원)			비 고
		총액	집행액(누계)	집행율(%)
´16.2월 3째주	CCTV납품 착공	13.6	0	0.0
´16.4월 4째주	준공 처리	13.6	13.6	100.0