<붙임 1>

<별지 제8호 서식>

예산전용 요구서

한강사업본부 한강관광사업과

○ 예산전용 내역

(단위 : 천원)
예 산 과 목					예산 현액	전용 요구액		전용후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
한강공원 관리 및 운영	한강공원 시설 관리 및 개선	둔치 및 화장실 청소	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	4,333,803	-	△234,000	4,099,803
	시민중심의 한강문화 활성화	한강함상공원조성	시설비 및 부대비 (401)	시설비 (01)	6,370,000	234,000	-	6,604,000

○ 예산전용 사유

－ 2단계 투자심사 통과 및 기본‧실시설계 결과(´17.5월), 소규모 함정의 안전을 고려한 육상배치 및 안내센터 부유체 규모의 증가에 따른 사업비 부족액 전용 필요

－ 또한 다가올 8~9월 태풍, 홍수 등의 재해로부터 안전사고를 막기 위해 사업비를 조기 확보하여 정해진 기간 내 공사 마무리 필요.

2017년 7월

한강사업본부장  유 재 룡  (인)

기획조정실장 귀하