사업수행상황 보고서(분기별)

(2017. 1/4 분기)

세부사업명 (내부기준사업명)		보고기관명
세부단위사업명	양평유수지 CSOs 저류조 설치	서울시

※ 세부단위사업별로 작성, 내부기준사업이 없는 경우는 생략

1. 사업개요

ㅇ 시설의 위치 : 서울시 영등포구 국회대로 22길 20(양평동 3가 57-3)

ㅇ 시설용량 : 46,000㎥

ㅇ 사업기간 : 2012. 12 ~ 2019. 8

ㅇ 총사업비 : 32,086백만원

ㅇ 연차별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비 (A)	기 투자실적(연도별)				향후 투자계획(연도별)
			계(B)	‘16년 이전	‘16년	‘17년	계(C)	‘18	‘19
계		32,086	18,986	1,260	8,526	9,200	13,100	6,000	7,100
국고		16,043	9,489		1,489	8,000	6,554	3,000	3,554
지방비	소계	16,043	9,497	1,260	7,037	1,200	6,546	3,000	3,546
	시․도비	16,043	9,497	1,260	7,037	1,200	6,546	3,000	3,546
	시․군비
기 타

2. 사업추진현황

◦ 기본/실시설계 계약: ‘14.12.23

◦ 기본/실시설계 완료: ‘16.3.26

◦ 설계 환경부 승인 요청: ‘16.4.24

◦ 공사 발주: ‘16.8.11

◦ 설계 승인 완료: ‘16.10.24

◦ 공사 계약 : ‘16.12.1

◦ 공사 착공: ‘16.12.5

◦ 공사 실 착공: ‘17.3.5

< 전체 사업진도 및 실적 >

총 공 정(%)		총 투자비(백만원)		착공(예정)일	준공(예정)일
계 획	실 적	계 획	실 적
50	50	2,749	2,749	‘16.12.5	‘19.8.4

< 분기말 예산집행상황 >

(단위 : 백만원)

구분	2017년 ( 1 )/ 분기 집행현황
	'17예산 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행 위 액	지출액 (D)	잔액 (C-D)	% (D/C)
합계	9,200	6,979	16,179		-
ㅇ국고	8,000	-	8,000		-	8,000
- 보조금	8,000	-	8,000			8,000
ㅇ지방비	1,200	6,979	8,179		-	8,179
- 시도비	1,200	6,979	8,179			8,179
- 시군비
ㅇ기타

※ 2017.4.11. 원인행위 9,700백만원(국비 3,000, 지방비 6,700백만원)

3. 문제점 및 조치계획 등