붙임 1

서남하수열 이용 지역난방 공급사업 추진 개요

<2017.11월 현재>

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 서남물재생센터 하수열 이용 지역난방공급 민간투자사업

- 강서구 마곡동 서남물재생센터 75번지 일대 약 2,448㎡

❍ 사 업 자: 서남그린에너지 주식회사(대림산업, GS파워, 부산은행)

❍ 사업기간: 20년 (히트펌프 설비용량 32Gcal/h, 운영 후 철거)

❍ 사 업 비: 약 354억원(전액 민간 자본출자)

□ 추진현황

❍ ´14.03.19: 서남물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급계획(부시장 방침)

❍ ´14.05.01: 제3자 제안공고(70℃ 이상, 150천Gcal/h, 하수도법 등 개별법 적용 추진)

❍ ´14.06.02: 우선 협상대상자 선정 - (가칭)서남에너지

❍ ´14.12.12: 열 수급계약 체결(SH집단에너지사업단 ↔ (가칭)서남에너지)

❍ ´15.05.26: 하수열 이용 지역난방 공급사업 실시협약 체결(기후환경본부장)

❍ ´15.08.17: 사업시행 법인 설립(대림산업, GS파워 등 887백만원(50%))

❍ ´15.12.01: 실시설계 승인(기술심사결과 반영 조건부)

❍ ´16.04.07: 착공(‘16.4.7~’17.10.6, 건설기간 18개월)

❍ ´17.09.12: 준공일 조정(’17.10.31.변경, ‘마곡집단에너지시설’ 준공일 반영)

❍ ´17.10.31: 시설 준공

□ 사업기대효과

	에너지비용				에너지사용량				탄소발생량
	∙첨두부하 보일러(PLB)단독 승온 대비 27.3% 에너지비용 절감				∙첨두부하 보일러(PLB)단독 승온 대비 6.5% 에너지사용량 절감				∙첨두부하 보일러(PLB)단독 승온 대비 15.9% 온실가스 저감

□ 시설 조감도 및 주요시설물 현황

하수열시설 조감도(주요설비 지하화, 상부 녹지공간 등으로 조성)

주요 시설물 현황