문서번호	조경과-325
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
협 조

2020년 노후 마을마당 보수·정비 추진계획

2020. 1.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 노후 마을마당 보수·정비 추진계획

조성 후 오랜 시간이 경과되어 노후한 마을마당을 수목 보식 및 시설물 등을 정비하여 지역주민에게 안전하고 쾌적한 휴식공간을 제공하고 “삼천만 그루 나무심기 사업” 을 조기 달성하고자 함

□ 추진방향

○  삼천만 그루 나무심기 추진관련 시설물 정비는 지양하고 수목식재 위주 사업추진

※ 시설물 추가 설치는 지양하되 주민이 요구하는 시설위주 정비

○  획일화된 식재패턴은 지양하고 다양하 수종 도입하여 수목 보식

※ 미세먼지 저감과 열섬효과 완화를 위한 다층구조 배식계획 도입

○  설계기간 단축을 통한 조기 착공으로 상반기 중 공사완료 추진

□ 정비실적

○  정비대상 : 시유지 마을마당 196개소(’96년 ~ ’06년 조성)

○  정비실적 : 도봉구 방학3동 마을마당 등 147개소(’19년 20개소)

< ’13~’19년 추진내역 >

구 분	계	’15년 이전	’16년	’17년	’18년	’19년
개 소 수	147	70	18	19	20	20
정비면적(㎡)	150,010	46,247	21,424	36,162	34,741	11,436
사업비(백만원)	32,442	2,8032	870	1,063	1,110	1,367

○  정비사진

(마포구) 이대역 마을마당	(성북구) 돌곶이 쉼터	(강남구) 포이동 마을마당	(구로구) 솔길공원 옆 마을마당

□ 2020년 추진계획

○  대 상 지 : 종로구 삼청동 쉼터 등 11개소(붙임 참조)

○  사업규모 : 11,029㎡

○  사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○  사업내용 : 수목보식, 휴게시설 설치 및 시설물 보수정비 등

○  총사업비 : 1,200백만원(시설비)

- 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 노후 마을마당 보수정비, 시설비(401-01)

○  세부 추진일정

- 2020. 1.       : 사업계획 수립 및 시달

- 2020. 2. ~ 3. : 주민의견 수렴 및 설계용역 시행

- 2020. 4. ~ 6. : 설계심의 및 계약심사 등

- 2020. 5. ~12. : 공사시행 및 준공(정산)

□ 행정사항

○ 이해관계자 등의 의견수렴 후 설계심의 요청

- 지역주민 및 시의원 등 관계자 의견을 충분히 수렴하여 설계안 작성

○ 설계심의(조경과) 및 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정

- 설계심의 요구 시, 시의회 소통결과 작성 필수

- 사업규모, 설계난이도 등을 고려 설계자문(자체, 내부, 외부) 실시

○ 공사 착·준공 시 5일 이내 보고 철저(준공보고 시 관리대장 제출)

- 착·준공 보고 시 자체점검표 등 작성 제출

붙임 : 1. 2020년 사업대상지 및 현황사진 1부.

2. 2019년 노후 마을마당 보수·정비 실적 1부.

3. 설계심의요구(서식) 1부.

4. 착·준공보고(서식) 1부.  끝.