2017년 지역에너지절약사업(서울시)

사업계획서 및 부속서

2016. 4.

구 분

내  용

표  지

’17년 지역에너지절약사업 사업계획서

서울특별시

(녹색에너지과)

총괄표

’17년 지역에너지절약사업계획 총괄

NO	사 업 명	사업주체	사업비(백만원)			에너지 절감량 (toe)	절감액 (백만원)	CO2 저감량 (tCO2)	비 고
			국고	자부담	계
1	지역에너지절약 교육․홍보	서울시 녹색에너지과	48	112	160				기반구축
2	서울시 자치구 보안등 교체(LED)	서울시 환경정책과	3,382	1,016	2,366				시설보조(LED
:	:

※ 사업비는 반드시 국고, 자부담 각 백만원 단위로 작성

개별계획

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사업명		사업구분	□기반구축 □시설보조
사업개요
추진근거	지역에너지계획과의 연계성 기재
이하생략

첨부 : 2017년 사업계획서 및 부속서 각 1부

2017년 지역에너지절약사업 사업계획서 (서울시)
단위 :백만원
연번	구 분			분야	사 업 명	총사업비	국 비	지방비 등	금융연계
합 계						3,542	1,062	1,359	1,120
1	서울시	녹색 에너지과	김문희 2133-3555	기반구축	지역에너지절약 교육·홍보	160	48	112	0
2	서부도로 사업소	기전과	윤석주 300-8391	LED 시설보조	남산1호터널 LED등 교체 (금융연계)	2,800	840	840	1,120
3	관악구청	치수과	허청 2127-6831	LED 시설보조	도림천 LED가로등 교체 (공공)	240	72	168
4	서대문구청	보건위생과	박경석 330-8967	LED 시설보조	서대문구보건소 LED조명기구 교체(공공)	30	9	21
5	서대문구청	토목과	허병규 330-1763	LED 시설보조	서대문청사 LED조명기구 교체(공공)	280	84	196
6	서대문구청	의회사무국	유선환 330-8820	LED 시설보조	구의회청사 LED조명 교체(공공)	32	9	22
					이 하 여 백

붙임 : ’17년도 사업계획서 각 1부.

1		지역에너지 교육·홍보

2017도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	지역에너지절약 교육․홍보									사업 구분			■ 기반구축 □ 시설보조
사업개요	○ 에너지 수급안정 및 에너지 효율적 활용을 위한 에너지절약 교육,홍보 등 활동 지원 ○ 에너지관련 전시, 설명회, 교육을 통한 에너지절약 시민의식 제고 ○ 에너지절약 시민참여 확대를 위한 행사 개최 등 추진
추진근거	- 에너지법 제7조(지역에너지계획의 수립) - 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지사용자·공급자 등의 책무) - 지역에너지절약사업 운용지침(산업부 공고 제2011-592호)
수행기관	서울특별시							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	48			112							160
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2017년 4월 일 서울특별시장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서울특별시청			부서		녹색에너지과					성 명			김문희
	전화	02-2133-3555			E-Mail		kmh2650@seoul.go.kr

[별첨1. 사업계획 부속서]

지역에너지 교육․홍보 사업계획 부속서

1. 추진 개요

○ 불안정한 에너지환경에 대비하고 에너지를 효율적으로 활용하기 위해 에너지 교육․홍보를 강화하고, 동․하절기 에너지절약 이행실태 점검 등을 통해 에너지 저소비형 사회 구축

○ 에너지절약 시민참여 확산을 위한 전시회, 이벤트, 업무협약 등 행사 개최

○ 민․관 에너지절약 협력 확대를 위한 캠페인 및 각종 홍보자료 제작 등

2. 사업 추진 방법 및 일정

○ 겨울철 에너지사용제한 계도 및 단속	‘17. 2 ~ 3월
- 개문난방 금지, 실내온도제한 준수 등 계도 및 단속
- 에너지다소비 대형건물, 백화점, 대학교 등 기획점검 실시
- 에너지절약 대시민 캠페인 실시
○ 지역에너지절약사업 위탁교육 실시(연 12회)	‘17. 3 ~ 12월
○ 도시형 에너지 생활기술 교육 및 홍보	‘17. 2 ~ 12월
- 주민참여형 체험교육 및 에너지 생활기술 제품 공모전 개최
○ 지역에너지절약사업 지자체 국외연수 및 에너지정책 우수도시 정책교류	‘17. 5 ~ 8월
○ 서울시 에너지백서 발간	‘17. 10 ~ 12월
○ 지역에너지 홍보 및 에코 투어프로그램 등 개발	연 중
○ 지역에너지절약 홍보물 제작 : 에너지절약 홍보물 및 교재 제작․보급	연 중
○ 겨울철 에너지절약 홍보 및 계도 추진	‘17. 2 ~ ‘17. 12월

3. 에너지절감 기대효과

○ 지역에너지 절약의식 확산 및 교육․홍보를 통한 에너지 저소비형 사회 구축

○ 체험 중심의 에너지절약 교육환경을 조성하여 시민의 에너지절감 효과에 대한 이해 증진 및 시책사업 홍보

4. 사업비 산출 내역 (단위 : 천원)

	합 계	160,000
○ 동․하절기 에너지 이용실태 점검		38,000
- 홍보 포스터 및 리플렛 제작(자치구배부)	10,000천원 * 2회 =	20,000
- 단속반 운영 물품 구매	500천원 * 2회 =	10,000
- 단속반 여비 등 지급	8,000천원 =	8,000
○ 도시형 에너지 생활기술 교육․홍보		20,000
- 주민참여형 체험교육 실시		10,000
- 에너지 생활기술 공모전 및 경진대회 개최		10,000
○ 지역에너지절약사업 교육		42,000
- 지역에너지담당자 연수	800천원 * 30명 =	24,000
- 공공기관 에너지담당자 교육	600천원 * 36명 =	18,000
○ 에너지 설명회, 세미나 및 전시회 개최		30,000
- 에너지절약 우수사례․기술발표, 시책 홍보 등	10,000천원 * 3회 =	30,000
○ 민간기관・종교계 등 에너지절약 협력사업		10,000
○ 에너지백서 제작		8,000
○ 지역에너지절약 국외연수 및 원전하나줄이기 사업 추진 관련 해외사례 수집	6,000천원 * 2인 =	12,000

5. 재원 조달 계획

(단위:천원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
160,000	48,000	112,000	-	-

6. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 에너지절약 관련 추진시책이 시민들에게 효율적으로 홍보되어 효과가 극대화될 수 있도록 추진

7. 사업결과 활용 계획

ㅇ 지역에너지 절약의식 확산을 통한 에너지이용 합리화 증진

2		남산1호터널 LED조명 교체 개선사업

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	남산1호터널 LED조명 교체 개선사업									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	- 저압나트륨 조명 3005등 철거 1식 - LED 80W 2,000등 신규 설치 1식 - 전기배관 배선공사, 안정기 설치 1식 - 디밍제어시스템 설치 1식
추진근거	- 지역에너지절약사업 운용지침(산업부 공고 제2011-592호) - 녹색에너지과-3283(2016.2.26.)호
수행기관	서울특별시 도로시설과 (서부도로사업소)							위탁기관			자체시행
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	남산1호터널 조명시설			LED조명 80W, 2,000등							서울시 중구 예장동 ~용산구 한남동 일대
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담(금융연계 포함)							합 계
	840			1,960							2,800
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	119		237			145			71					19
별첨자료
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 28일 서울특별시장 한국에너지공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서부도로사업소			부서		기전과					성 명			윤석주
	전화	300-8391			E-Mail		younsj@seoul.go.kr

2017년도 지역에너지절약 사업계획서(도로조명LED금융)

사 업 명	남산1호터널 LED조명 교체 개선사업											사업 구분			□ 기반구축 √ 시설보조
사업개요	- 저압나트륨 조명 3005등 철거 1식 - LED 80W 2,000등 신규 설치 1식 - 전기배관 배선공사, 안정기 설치 1식 - 디밍제어시스템 설치 1식
추진근거	- 지역에너지절약사업 운용지침(산업부 공고 제2011-592호) - 녹색에너지과-3283(2016.2.26.)호
수행기관	서울특별시 도로시설과 (서부도로사업소)									금융연계			우리은행
주 요 사업내역	주요시설명				용량 및 수량							설치장소
	남산1호터널 조명시설				LED조명 80W, 2,000등							서울시 중구 예장동 ~용산구 한남동 일대
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담				금융연계				합 계
	840			840				1,120				2,800
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)				절감금액 (백만원)				절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	119		237				145				71					19
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 28일 서울특별시장 한국에너지공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서부도로사업소				부서			기전과					성 명			윤석주
	전화	300-8391				E-Mail			younsj@seoul.go.kr

남산1호터널 LED조명 교체 개선사업

1. 추진 개요

ㅇ 남산1호터널은 전기에너지 소비가 많은 저압나트륨등으로 시설되어 있는 바, 이를 LED조명으로 교체, 개선함으로서 에너지 절감 및 스마트한 도로환경을 시민들에게 제공하고자 함.

※ 터널은 조명시설이 24시간 점등되므로 제어를 통한 LED 설치로 에너지 절감 필요

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 터널 특성상 장시간 점등하는 조명시설을 LED로 효율화하여 에너지 절감

ㅇ 디밍제어 시스템 적용으로 스마트한 조명시설 설치

ㅇ 고효율에너지 기자재 인증제품 사용 및 한국표준규격(KS A 3701) 규정 준수 등 교통안전시설 확보를 위한 품질관리 제고

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소

- 위 치 : 중구 예장동 산5 ∼ 용산구 한남동 772-3

- 시설규모 : 쌍굴 터널

연장(m)	조명시설	조명설치일
1열(상행) 1,530	저압나트륨 1,504등	2003.12
2열(하행) 1,532	저압나트륨 1,501등	2005.8

※ 터널 구조물은 상행 1970년, 하행 1994년에 각각 공사 준공함.

ㅇ 사업규모

- 저압나트륨 램프 3,005등, 안정기 등 철거 1식

- LED 조명(80W) 2,000등 설치 1식

- 디밍제어시스템 설치 등 1식

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 추진방법 : 도급공사 발주, LED조명 등 관련자재는 조달구매

ㅇ 추진일정

- 2017. 2 : 현장조사 및 공사설계

- 2017. 3 : 공사발주 및 계약

- 2017. 11 : 공사준공

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)
전기(MWh/년)	724	208	516	237	71	145	19
합계(toe/년)	167	48	119	237	71	145	19

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항에 의함

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역

품 명	규격	단위	수량	단가	금액(백만원)	비고
LED등	80W	개	2,000	0.60	1,200
배관공사		식	1	1,200	1,200
디밍시스템		식	1	400	400
계					2,800

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
2,800	840	840	1,120	1,960

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 문제점 : 없음

ㅇ 사후관리계획

- LED조명, 제어기 등 호환 가능한 규격 제품 사용으로 유지관리 제고

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 남산1호 터널을 스마트한 터널 조명시설로 개선함으로서 타 시도에 사례를 전파 등 에너지절감, 쾌적한 도로환경 제고

에너지절감 기대효과 산출근거

1. 에너지절감 기대효과 종합

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)
전기(MWh/년)	724	208	516	237	71	145	19
합계(toe/년)	167	48	119	237	71	145	19

2. 산출 내역

□ 사업 전(개선 전) 에너지 사용량

ㅇ 년간 전기사용량 : 724,445kWh

ㅇ 년간 전기요금 : 178,695,320원

□ 사업추진 후(개선 후) 에너지 사용량

ㅇ LED 등으로 교체 등수 축소 : 3,005등 → 2,000등

ㅇ 총 전기용량 축소 : 394kW → 160kW (131W×3,005등 → LED 80W×2,000등)

ㅇ LED 교체후 전기사용량 : (160/394) × 724,445kWh = 294,191kWh

□ 에너지 절감량(년간)

ㅇ 에너지절감량 = 개선전(실제사용량) – 개선후(계산식용량)

- 430,254kWh = 724,445kWh – 294,191kWh

ㅇ 디밍제어시스템 설치후 에너지 절감량 = 430,254kWh×20% = 86,051kWh

ㅇ 총 절감량 : 430,254kWh + 86,051kWh = 516,305kWh

□ CO2저감량

ㅇ 516,305kWh × 0.4585 = 237(tCO2/년)

□ 에너지 절감액

ㅇ 절감액 : 144,472천원 = 126,810천원 + 17,662천원

- 전기사용량 절감액 : 178,605,320원 × 71% = 126,810천원

- 계약요금 절감액 : (400kW-160kW)×6,290원×12월 = 17,662천원

□ 투자비 회수기간

ㅇ 2,800백만원 / 145백만원 = 19년

3		도림천 태양광 가로등 설치공사

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	도림천 태양광 가로등 설치공사									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	도림천에 태양광 가로등을 설치하여 정부의 에너지 절약시책에 적극 참여하고 시민들의 에너지 절약에 관한 홍보의 장으로 만들고자 함
추진근거	- 지역에너지절약사업운용지침(지식경제부 공고 제2011-592호) - 민선6기 구정운영 기본계획
수행기관	관악구청							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	태양광 가로등			1등용 ×28 = 1400W 2등용 × 9 = 900W							관악구 도림천 일원
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	72			168							240
기대효과	에너지절약 (TJ)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	-		5.85			2			4					120
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 일 관 악 구 청 장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	관악구청			부서		치수과					성 명			허청
	전화	02-879-6831			E-Mail		blueheo@ga.go.kr

[별첨1. 사업계획 부속서]

도림천 태양광 가로등설치 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 도림천의 자연적인 환경을 이용하여 태양광 가로등을 설치함으로써 신․재생 에너지 보급사업에 적극 동참하고 이용 주민들의 에너지 교육의 장으로 활용

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 태양광 가로등 1등용 50W, 2등용 100W 설치

ㅇ 수명 : 리튬밧데리 기준 10년 이상

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소 : 도림천 하천 산책로

ㅇ 사업(시설)의 규모(용량)

- 태양광 가로등 34본 설치 2.3KW

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 2016. 12. : 예산확보

ㅇ 2017. 1~2 : 세부 사업계획 수립

ㅇ 2017. 3~4 : 사업완료

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(TOE/년)
전기(MWh/년)	300	288	12	5.85	4	2	120
합계(TOE/년)

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감 산출

- 도림천 조명등 월사용량(평균)      25,000KW

∴ 25,000*12개월 = 300,000KW/년

► 태양광 가로등 설치후 월사용량 24,000KW

- 월사용량(평균)      24,000KW

∴ 24,000*12개월 = 288,000KW/년

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가	금액(백만원)	비고
태양광 가로등	50～100W	본	34	6,600,000원	224
설치공사	전기공사	식	1	-	16
계					240

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
240	72	168

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 사업추진 예상 문제점 : 예산확보

ㅇ 향후 유지보수를 위한 방법 : 자체관리에 필요한 경상적 유지비 예산 편성

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 친환경 대체 에너지 홍보

□ 설치예정 장소

4		서대문구보건소 청사 LED조명기구 교체

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	서대문구보건소 청사 LED조명기구 교체									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	보건소 청사의 조명기구를 에너지 효과가 우수한 고효율 LED조명으로 교체하여 온실가스 배출을 감소 및 전력절감을 통한 에너지 이용의 효율성을 증대시키고자 함
추진근거	공공기관 에너지이용합리화 추진지침에 의거 조명기구를 고효율 LED인증제품으로 교체
수행기관	서대문구보건소							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	서대문구보건소										서대문구보건소 청사
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	9			21							30
기대효과	에너지절약 (TOE)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	2.2		1.03			2.7			6.64					11
별첨자료	사업계획 부속서 1부(양식을 참고하되 사업목적에 맞게 자유롭게 작성하여 제출)
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 일 서대문구보건소장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서대문구보건소			부서		보건위생과					성 명			박영석
	전화	02)330-8967			E-Mail		pys1690@sdm.go.kr

[별첨1. 사업계획 부속서]

서대문구청사 LED교체 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 추진목적 : 서대문구보건소 청사 내 조명기구는 램프, 안정기의 저효율 시설로 전력손실이 많아 에너지 효과가 우수한 LED조명으로 교체함으로서 유지보수비 절감과 고효율 조명을 사용함으로서 온실가스 배출 감소 및 전력절감을 통한 에너지 절감을 추진

ㅇ 추진방향 : 일반 평판 및 다운라이트 조명시설을 LED조명으로 변경

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ LED 평판조명

-  KS인증 획득제품 구매

- 사용성능이 안정적이고 사용시간 기존대비 20배

- 저전력 소모로 에너지 절감 (기존대비 50% 이상)

- 고효율, 장수명으로 유지보수비용 대폭 절감

- 친환경제품으로 유해물질(납, 수은)을 미포함

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소 : 서대문구보건소 각 실과 사무실 및 교육실

ㅇ 설치규모 : 평판 LED(조) 200개

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 추진방법 : LED 조달구매 및 설치

ㅇ 추진일정 : 2017. 5.

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(TOE/년)	-	-	-	-	-	-	-	-
전기(MWh/년)	33.1	30.9	2.2	1.03	6.64	2.7	11
합계(TOE/년)	33.1	30.9	2.2	1.03	6.64	2.7	11

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(백만원)	비고
평판LED실내조명등	39w	개	200	150,000	30
계			200	150,000	30

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
30	9	21		21

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 오래된 청사로 인한 시설개선비 과다로 단계적 LED 조명 개선사업 예산

확보 어려움

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ LED 조명교체로 인한 에너지절감에 따른 예산절감

ㅇ 에너지 절감효과에 따른 주민홍보 강화 및 사례전파

5		에너지 절약 LED 보안등 교체사업

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	에너지 절약 LED 보안등 교체사업									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	- 노후된 확산형 보안등기구를 LED 보안등으로 개량하여 소비에너지를 절감하고 주택가 범죄예방 및 빛 환경을 개선하고자 함. - 사업규모 ￮ 고압나트륨 보안등 100W×100등 → LED 보안등 40W×100등, ￮ 메탈할라이드 보안등 100W×250등 → LED 보안등 40W×250등
추진근거	에너지법(산업통상자원부), 지역에너지절약사업 운용지침(산업통상자원부) 공공기관 에너지이용합리화 추진에관한 규정(산업통상자원부)
수행기관	서울특별시 서대문구청							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	보안등			LED 40W 350등							서대문구 관내
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	84			196							280
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	20.2		40.4			13.5			60					2.6
별첨자료	사업계획 부속서 1부(양식을 참고하되 사업목적에 맞게 자유롭게 작성하여 제출)
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 일 서울특별시 서대문구청장 한국에너지공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서대문구청			부서		토목과					성 명			허병규
	전화	02-330-1763			E-Mail		bgheo12@sdm.go.kr

[별첨1. 사업계획 부속서]

2017년 지역에너지절약 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 노후된 확산형 보안등기구를 LED 보안등으로 개량하여 골목길 범죄예방 및 전기소비 에너지를 절약하고자 함.

- 고압나트륨 보안등 100W×100등 → LED 보안등 40W×100등

- 메탈할라이드 보안등 100W×250등 → LED 보안등 40W×250등)

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ LED 보안등기구 40W

- KS 및 고효율 기자재 인증제품

- 서울시 공공기관 LED 보급기준 충족제품

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소별 사업(시설)의 규모(용량) 및 주요시설내역을 기재

설치장소	교 체 전			교 체 후			절감전력 (연간)	교체비용
	시설종류	소비전력	수량	시설종류	소비전력	수량
서대문구	나트륨 메탈	100W	350등	LED	40W	350등	88.2kwh	280백만원

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 사업위치 : 서대문구 관내

ㅇ 사업규모 : LED 보안등 교체 350등

- 고압나트륨 100W×100등, 메탈할라이드 100W×250등 → LED 40W×350등

ㅇ 시행방법 : 공개경쟁입찰(LED 등기구 조달구매)

ㅇ 추진일정 : 2017. 3. ~ 2017. 10

ㅇ 소요예산 : 금280백만원

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)	33.7	13.5	20.2	-	60	-	-
전기(MWh/년)	146.9	58.7	88.2	-	60	13.5	-
합계(toe/년)				40.4	60	13.5	2.6

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(백만원)	비고
LED등기구	40W	개	350	450,000	157.5
부속자재	-	식	350	200,000	70.0
공사비	교체비	등	350	150,000	52.5
계					280

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
280	84	196	-	196

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ LED 보안등은 하자담보기간 5년

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 에너지 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 의거 공공기관 연도별         LED 보급목표인 2020년 100% 추진에 기여

[별첨 2]

에너지절감 기대효과 산출근거

1. 에너지절감 기대효과 종합

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)	33.7	13.5	20.2	-	60		-
전기(MWh/년)	146.9	58.7	88.2	-	60	13.5	-
합계(toe/년)				40.4	60	13.5	2.6

2. 산출 내역

□ 사업 전(개선 전) 에너지사용량

ㅇ 개선 전 에너지사용량을 산출한 근거를 기재

- 산출식 : 고압나트륨 및 메탈 보안등 100W×350등×11.5h(일평균시간)×365일

= 146.9MWh

□ 사업추진 후(개선 후) 에너지사용량

ㅇ 산출식 : LED보안등 40W×350등×11.5h(일평균시간)×365일

= 58.7MWh

□ 에너지절감량

ㅇ 에너지절감량 = 146.9MWh-58.7MWh = 88.2MWh

□ 연간 연료(석유환산톤) 저감량 : 20.2TOE

ㅇ 사업전(개선전) 석유환산톤(연간) : 33.7TOE

- 산출식 : 146.9MWh×0.23 = 33.7TOE

ㅇ 사업전(개선후) 석유환산톤(연간) : 13.5TOE

- 산출식 : 58.7MWh×0.23 = 13.5TOE

□ 연간 CO2 저감량 : 40.4tCO2

ㅇ 사업전(개선전) CO2 저감량(연간) : 67.3tCO2

- 산출식 : 146.9MWh × 0.4585tCO2/MWh = 67.3tCO2

ㅇ 사업전(개선후) CO2 저감량(연간) : 26.9tCO2

- 산출식 : 58.7MWh × 0.4585tCO2/MWh = 26.9tCO2

□ 연간 에너지 절감액 : 13.5백만원

ㅇ 사업전(개선전) 전기요금 : 20.6백만원

- 산출식 : 나트륨, 메탈 보안등 100W×1.15(방전등 환산용량)×350등×42.77원

×12월 = 20,657,910원

※ W당 전기요금 : 37.5(원)×1.1(부가세)×1.037(전력산업기반기금)=42.77원

ㅇ 사업전(개선후) 전기요금 : 7.1백만원

- 산출식 : LED 보안등 40W×350등×42.77원×12월 = 7,185,360원

□ 투자비회수기간 : 2.6년

ㅇ 총 투자비 : 280,000,000원

ㅇ 연간 유지보수비 절감액 : 108,472,550원

- 산출식 : 13,472,550원(전기요금절감액) + { 60,000원(램프, 안정기 교체비)×350등                ×3회/3.5년} + 77,000,000원(등기구교체) = 108,472,550원

※ 적용근거

- 수 명 : 나트륨, 메탈등 15,000시간(3.5년), LED : 45,000원(10.7년)

- 램프, 안정기 교체비(1회) : 60,000원

- 등기구 : 일반 방전등 130,000원, LED : 450,000원

- 등기구 교체비 : 220,000원(등당)×350등 = 77,000,000원

- 노후 등기구를 선별하여 교체하므로 개량비용 반영

□ 기대효과

ㅇ 노후·불량 보안등 정비로 전기안전 사고 예방

ㅇ 고효율 LED 보안등 설치로 소비에너지 및 전기요금 절감

6		서대문구의회 청사 LED조명기구 교체 사업

2017년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	서대문구의회 청사 LED조명기구 교체 사업									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	구의회 청사 내 에너지효과가 우수한 고효율 LED조명으로 교체하여 온실가스 배출을 감소 및 전력절감을 통한 에너지이용의 효율성을 증대시키고자 함
추진근거	공공기관 에너지이용합리화 추진지침에 의거 에너지기자재의 교체수요 발생분에대하여 교효율 인증제품을 사용·교체
수행기관	서대문구 의회							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	서대문구의회사무국			매입개방 40W×159개 다운라이트 26W×50개							의회청사 내
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	9			23							32
기대효과	에너지절약 (TOE)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	4.10		8.39			1.8			40					9년
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2016년 3월 일 서대문구청장 한국에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서대문구의회사무국			부서		의정홍보팀					성 명			유선환
	전화	02-330-8820			E-Mail		kymysh@sdm.go.kr

[별첨1. 사업계획 부속서]

서대문구청사 LED교체 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 추진목적 : 구의회 청사 내 조명기구는 램프, 안정기의 저효율 시설로 전력손실이 많아 에너지 효과가 우수한 LED조명으로 교체함으로서 유지보수비 절감과 고효율 조명을 사용함으로서 온실가스 배출 감소 및 전력절감을 통한 에너지 절감을 추진

ㅇ 추진방향 : 일반 평판 및 다운라이트 조명시설을 LED조명으로 변경

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ LED 평판조명

-  KS인증 획득제품 구매

- 사용성능이 안정적이고 사용시간 기존대비 20배

- 저전력 소모로 에너지 절감 (기존대비 50% 이상)

- 고효율, 장수명으로 유지보수비용 대폭 절감

- 친환경제품으로 유해물질(납, 수은)을 미포함

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 설치장소 : 구의회 본회의장 및 기타장소

ㅇ 설치규모 : 평판 LED 159개, 다운라이트 50개

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 추진방법 : LED 조달구매 및 설치

ㅇ 추진일정 : 2017. 4월 ~ 6월

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(TOE/년)	-	-	-	-	-	-	-	-
전기(MWh/년)	44.9	27.1	17.8	8.39	39.6	1.8	9
합계(TOE/년)	10.35	6.25	4.1	8.39	39.6	1.8	9

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(백만원)	비고
평판LED실내조명등	40w	개	159	176,000	28
다운라이트 (FUL-13W*2)	26w	개	50	79,000	4
계			209	155,000	32

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
32	9	23		23

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 오래된 구청사로 인한 시설개선비 과다로 단계적 LED 조명 개선사업 예산

확보 어려움

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ LED 조명교체로 인한 에너지절약에 따른 의회의원 관심 제고

ㅇ 에너지 절감효과에 따른 주민홍보 강화 및 사례전파