<서식 2>

보문로 가로정원 조성사업

(공원녹지과)

□ 사업개요

◦ 공 사 명 : 보문로 가로정원 조성사업

◦ 위    치 : 성북구 보문로(성북구청 앞 교차로 ~ 경동고등학교 교차로)

◦ 규    모 : 띠녹지 가로정원 조성 500m

◦ 기    간 : 2023. 12. ~ 2024. 6.

◦ 사 업 비 : 금400,000,000원

◦ 사업내용 : 가로수 아래 화단 정원 조성, 노후 시설물 정비 등

□ 이월요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 공원녹지과, 환경을 생각하는 푸른성북 구현, 도심속 조경 확충, 가로수 생육환경 개선사업, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위:원)

구 분		예산현액(A)	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		400,000,000	400,000,000	354,580,480	22,353,000	377,647,000 (23,066,520)	0
공 사 비		400,000,000	400,000,000	354,580,480	22,353,000	354,580,480 (23,066,520)	0
	도 급 비	-	-	204,266,000	-	204,266,000	0
	관 급 비	-	-	150,314,480	-	150,314,480	0
	이전비기타	-	-	0	0	0 (23,066,520)	0

◦ 이월사유

- 2023년 9월 추가경정 예산 편성 이후 실시설계, 일상감사, 공사 발주 등 관련 행정 절차 이행을 신속시 시행하여 11월 말까지 모든 사항을 완료하였으나

- 공사계약 및 착공 시기가 동절기로 사업 시행 및 수목 식재가 불가하여 부득이하게 동절기 공사 중지 기간(12 ~ 2월) 이후 사업을 시행하고자 사고이월을 추진함