품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 서부간선지하도로민간투자사업건설공사1공구           점검일 : 2017. 10. 12 ~ 10. 13

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
1. 건설공사 정보	․ 품질관리계획 적용범위와 사유의 정당성 여부	◦ 제7항 설계관리 및 제13항 지급자재관리항목을 적용범위에 서 제외시키기 바람	시정 검토
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획의 수립 및 실행 여부	◦ 당 현장의 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목 표 세부추진계획)을 재수립하고 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표는 현장내에도 입간판 또는 게시판에 게 시하여 모든 공사참여자가 이해하고 작업할 수 있도록 하기 바람(미게첨됨)	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식 의 적절성과 관리상태	◦ 품질관리계획서 관리대장(또는 배포대장)에 발주청(도기본) 에 배포한 현황이 없으니 조치하기 바람.	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설,장비,인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 『기반구조관리상태 점검표』는 서류점검시 제공한 양식으 로 변경시키고, 제빙기,경비실,간이화장실 등을 추가 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자(협력업체 포함)에게 교 육하고 교육결과보고서를 작성하기 바람. (미실시함)	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련 운영기준표”를 작성한 후, 이 를 기준으로 당해년도 교육훈련계획을 수립하기 바라며, 중점품 질관리 작업자교육은 공종별 3시간이상이 되도록 하고, 법적정기 교육(품질)을 누락시키는 일이 없도록 하기 바람.	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소 통관리기준』에 누락된 관련문서를 보완하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 『공장검사계획』은 자재의 공장별로 구분하여 계획을 수립 하기 바람.	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 일일환경점검일지는 주간단위로 감리원에게 결과보고를 하 기 바라며, 환경관리계획서의 점검표 양식과 점검결과(실적) 의 점검표 양식이 불일치하니 환경 관리계획을 개정하여 일 치시키기 바람. ◦ 수방계획 외부비상연락망에 영등포구청 재해대책본부를 추 가하고, 공사구간내 배수계획도가 없으니 조치하기 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 대상공종을 축소조정하기 바라며, 공사특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준(장비능력)을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정(경력+현장테스트 유무)하여 자격인정을 관리하기 바람.	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재와 자재보관방법등 을 추가 작성하여 관련작업자들에게 교육실시하고 교육결과 보고서를 작성 바람. (용접봉,흄관,보도블럭,도로경계석,빗물 받이ST/G,맨홀뚜껑 및 받침 등)	시정 검토
18.기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 품질관리자는 보관자재가 양호한 상태로 유지되고 있는가를 보관자재 점검표에 의해 주기적(월 2회)으로 점검을 실시하고, 또한 시공 협력업체가 보관하는 기자재에 대해서도 월 1회이상 점검을 실시하기 바라며, 보관자재관리대장이 미작성되었으니 작성하기 바람.(본사자재를 월1회만 점검함) ◦ 균열관리계획서에 균열조사자, 균열확인자, 균열측정도구, 균열보수자(업체), 균열보수후 확인자 등을 지정하기 바람	시정 검토
19. 검사,측정 시험장비 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교 정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정이 미조치된 2개장비(검교정일자가 2017.10.13.)는 조 속한 시일내로 조치하기 바라며, 차후 모든장비의 검교정일자 를 도과하지 않도록 각별히 주의하기 바람.	시정 검토
20.검사 및시 험, 모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판 정기준, 빈도 등의 적절성	◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』에 배수공이 누락되어 있으니 추가작성하기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행 성등에 대한 자체 품질점검의 실시여부	◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장 점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시바람. (년 1회이상 실시요망)	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 시점부(우측) 제방가시설 E/A 강선이 서부간선도로쪽으로 과적차량 적제물에 저촉우려되니 간섭되지 않도록 조치하기 바람 ◦ 비상탈출구 터널 본선부 측벽 지하수 노출개소는 유도배수 처리하여 주변 연약화를 방지하기 바람 ◦ 비상탈출구 터널 본선부 측벽에 근접설치된 배전판과 콘센 트는 누전방지 가능하게 이격보호조치하기 바람 ◦ 공기정화시설 카리프트 수직구 상부에 자재(파래트)는 낙하 위험이 있으니 반출하고, 카리프트 계단에 묶은 밧줄은 고 정장치로 교체하기 바람. (오세길 위원) ◦ 공기정화시설 등 모든 장소의 계측기함은 관계(담당)자외에 는 아무나 열어볼 수 없도록 잠금장치를 하기 바람 ◦ 비상탈출구 가시설 E/A 강선처럼 여유장 없이 전부 절단 하여 나중에 재인장을 어렵게 하는 일이 없도록 하기 바람 ◦ 시점부 제방가시설의 제거식 E/A 대좌 상하부에 용접이 되 지 않아 E/A 제거시에 대좌 등이 튕겨져 나갈 수 있으므로 작업자의 안전관리에 만전을 기하기 바람. ◦ 비상탈출구 인력리프트의 일일안전점검은 작업자들이 탑승 하기전에 미리 실시하기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “서부간선지하도로민간투자사업건설공사1공구”의 시공자인 (주)현대건설과 감리자

인 ㈜동일기술공사측에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합

사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.