붙임2	GTX-A노선 편성별 공정 진행 현황

편 성	반 입	본선시운전	증명서 발급	인수검사	납 품	영업운행
SG 1편성	’23. 1. 17.	’23. 4. 5. ~ ’24. 1. 16.	’24. 2. 8.	’24. 3. 5.	’24. 3. 26.	’24. 3. 30.
SG 2편성	’23. 4. 1.	’24. 8. 1. ~10. 6.	’24. 10. 21.	’24. 10. 23.	’24. 10. 28.	’24. 12. 28. (예정)
SG 3편성	’23. 5. 16.	’24. 8. 1. ~10. 12.	’24. 10. 31.	’24. 11. 4.	’24. 11. 9.
SG 4편성	’23. 4. 29.	’24. 8. 4. ~10. 15.	’24. 10. 31.	’24. 11. 6.	’24. 11. 11.
SG 5편성	’23. 5. 25.	’24. 8. 7. ~10. 18.	’24. 11. 4.	’24. 11. 8.	’24. 11. 13.
SG 6편성	’23. 6. 13.	’24. 8. 10. ~10. 21.	’24. 11. 4.	’24. 11. 12.	’24. 11. 17.
SG 7편성	’23. 6. 20.	’24. 8.13. ~10. 24.	’24. 11. 8.	’24. 11. 14.	’24. 11. 19.
SG 8편성	’23. 6. 30.	’24. 8.16. ~10. 27.	’24. 11. 8.	’24. 11. 18.	’24. 11. 23.
SG 9편성	’23. 7. 20.	’24. 8.19. ~10. 29.	’24. 11. 15.	’24. 11. 20.	’24. 11. 25.
SG 10편성	’23. 9. 26.	’24. 8.22. ~10. 31.	’24. 11. 15.	’24. 11. 22.	’24. 11. 27.
SG 11편성	’23. 11. 29.	’24. 8.25. ~11. 1.	’24. 11. 15.	’24. 11. 26.	’24. 11. 31.
SG 12편성	’23. 11. 22.	’24. 8.28. ~11. 3.	’24. 11. 15.	’24. 11. 28.	’24. 12. 2.
SG 13편성	’23.12. 5.	’24. 8.31. ~11. 5.	’24. 11. 22.	’24. 12. 2.	’24. 12. 7.
SG 14편성	’23. 10.26.	’24. 9.3. ~11. 5.	’24. 11. 22.	’24. 12. 4.	’24. 12. 9.
SG 15편성	’24. 2.27.	’24. 9.6. ~11. 5.	’24. 11. 22.	’24. 12. 6.	’24. 12. 11.