사업수행상황 보고서(분기별)

(2017. 4/4 분기)

세부사업명 (내부기준사업명)		보고기관명
세부단위사업명	양평유수지 CSOs 저류조 설치	서울시

※ 세부단위사업별로 작성, 내부기준사업이 없는 경우는 생략

1. 사업개요

ㅇ 시설의 위치 : 서울시 영등포구 국회대로 22길 20(양평동 3가 57-3)

ㅇ 시설용량 : 46,000㎥

ㅇ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2019. 8

ㅇ 총사업비 : 32,086백만원

ㅇ 연차별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비 (A)	기 투자실적(연도별)				향후 투자계획(연도별)
			계(B)	‘16년 이전	‘16년	‘17년	계(C)	‘18	‘19
계		32,086	18,905	1,179	8,526	9,200	13,181	5,682	7,499
국고		16,043	9,489		1,489	8,000	6,554	2,622	3,932
지방비	소계	16,043	9,416	1,179	7,037	1,200	6,627	3,060	3,567
	시․도비	16,043	9,416	1,179	7,037	1,200	6,627	3,060	3,567
	시․군비
기 타

2. 사업추진현황

◦ 기본/실시설계 계약: ‘14.12.23

◦ 기본/실시설계 완료: ‘16.3.26

◦ 설계 환경부 승인 요청: ‘16.4.24

◦ 공사 발주: ‘16.8.11

◦ 설계 승인 완료: ‘16.10.24

◦ 공사 계약 : ‘16.12.1

◦ 공사 착공: ‘16.12.5

◦ 지장물이설 협의 및 각종 인허가 협의완료 : 2016.12~2017.2

◦ 가시설(CIP, 쉬트파일) 공사 착수 : ‘17.3.2

◦ 가시설공사 및 구조물 터파기 공사 진행중 : ‘17.9.30

◦ 저류조 구조물 설치 공사중(철근조립 및 콘크리트 타설) : ‘17.12월 현재

< 전체 사업진도 및 실적 >                              ‘17.12.31 현재

총 공 정(%)		총 투자비(백만원)		착 공 일	준공(예정)일
계 획	실 적	계 획	실 적
46.05	47.21	32,086	18,905	‘16.12.5	‘19.8.4

< 분기말 예산집행상황 >

(단위 : 백만원)

구분	2017년 ( 4 )/ 분기 집행현황
	'17예산 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행 위 액	지출액 (D)	잔액 (C-D)	% (D/C)
합계	9,200	6,979	16,179	16,179	8,164	8,015	50.5%
ㅇ국고	8,000	-	8,000	8,000	5,700	2,300	71.3%
- 보조금	8,000	-	8,000	8,000	5,700	2,300	71.3%
ㅇ지방비	1,200	6,979	8,179	8,179	2,464	5,715	30.1%
- 시도비	1,200	6,979	8,179	8,179	2,464	5,715	30.1%
- 시군비
ㅇ기타

3. 문제점 및 조치계획 등

◦ 예산집행 부진사유

- 본 사업은「비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리 지침」에 따라 환경부의 승인이 필요한 사업으로

- 2016.3월 기본 및 실시설계 완료, 4월26일 환경부 승인을 요청하여 2016년 10월 승인 후 공사시행 시기가 조정되었으며,

- 공사 입찰절차 진행중 낙찰자간의 분쟁으로 인하여 행정자치부 ‘계약분쟁위원회’ 심의 조정 및 공사계약 절차진행 금지 가처분 소송 결과 반영 등으로

- 2016년 12월5일 공사계약 및 착공되어 공정계획 조정이 불가피함에 따른 집행시기(기성금, 관급자재비 집행)조정 필요

- 다만, 착공 이후부터는 계획공정을 상회하여 정상추진 되고 있음.

◦ 조치계획

- ‘18.03.    : 2차 공사 기성금 및 관급자재비 지급(3,000백만원)예정

- ‘18.06     : 전기공사 및 기계공사 발주(발주금액 : 4,500백만원)

- ‘18.08.    : 2차 공사 기성금, 관급자재비 등 지급 (약2,600백만원)예정

- ‘18.12.    : 2차 공사 준공금 관급비 지급(3,600백만원)예정