[ 서식 4 ]

국고보조금 교부신청서

※ 사업명은 세세항명을 기재

신 청 자	성 명	박 원 순				전화번호		02-2133-3790
	주 소	서울시 중구 덕수궁길 15
사 업 명	세사업명		노후하수관로정비
	단위사업명		노후하수관로정비
사업목적	부설년도가 50년이상 경과된 노후하수관로에 대한 개량으로 동공발생에 따른 안전사고예방 및 주민불안감 해소
사업기간	착공(예정)일 : 2015. 3. 1 준공예정일 : 2015.12.31
2015년도 사 업 비	구 분			계	기교부액		금회		잔액
	국 고			10,000백만원	0		10,000백만원		0
	지 방 비
	원인자부담금
	기 타( )
사업계획	붙임참조
보조금의예산및관리에관한법률 제16조 및 동법시행령 제7조의 규정에 의거 위와 같이 국고보조금 교부를 신청합니다.
2015년 1월 일 서울특별시장 (관인) 한강유역(지방)환경청장 귀하

사 업 추 진 계 획 서

사업명 : 노후하수관로정비

□ 사업내용

ㅇ 사업위치 : 영등포구,동작구,구로구,송파구,동대문구,강서구 등 6개 지역

ㅇ 사업규모 : 노후하수관로정비 D300~1,000㎜ , L=12.5㎞

ㅇ 사업기간 : 15.03.01~15.12.31

연번	자치구	동 명	정비비 (백만원)	사업규모
계			10,000	D300~1,000㎜ , L=12.5㎞
1	영등포	영등포동, 당산동	3,000	D300 ~ D1.000㎜, L=3,704m
2	동 작	흑석동, 사당동	1,000	D450 ~ D600㎜, L=1,578m
3	구 로	고척1, 2동	1,000	D450 ~ D800mm, L=1,180m
4	송 파	가락동, 거여동, 마천동	3,000	D450 ~ D800mm, L=3,452m
5	동대문	전농동, 답십리동	1,000	D450 ~ D800mm, L=1,099m
6	강 서	방화1,3동, 가양동	1,000	D300 ~ D800㎜,L=1,470m

□ 연차별 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (A)	‘14년까지 투자실적	‘15예산	향후 투자계획
계	10,000	0	10,000	0
국고	10,000	0	10,000	0
지방비
원인자부담금

□ 사업추진 일정

ㅇ ‘15. 1월 : 사업비 자치구 재배정

ㅇ ‘15. 3월 : 기본 및 실시설계용역 발주

ㅇ ‘15. 5월 : 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사계약

ㅇ ‘15. 6월 : 공사착공

ㅇ ‘15. 12월 : 공사준공

□ 2015년 월별 집행계획

(단위 : 백만원)

'15예산현액			집행계획
계	전년 이월액	'15예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
10,000	0	10,000			100		400	2,500			3,000			4,000

ㅇ ‘15. 3월 : 기본 및 실시설계 용역비 선금급 지급

ㅇ ‘15. 5월 : 공사 착수에 따른 선금급 지급

ㅇ ‘15. 6월 : 기본 및 실시설계 용역비 준공금 지급

ㅇ ‘15. 9월 : 1차 기성금 지급

ㅇ ‘15. 12월 : 준공금 지급