[별지 제8호 서식] 사업수행상황보고서

사업수행상황보고서

지자체명	서울특별시	(기초)
세부 사업명	물재생센터 송풍기 개선

1. 사업개요

○ 사업목적

- 온실가스 감축설비 지원사업(국고지원금) 고효율 송풍기 교체

- 수질오염총량제 실시로 인한 노후화된 다단터보송풍기를 고효율        기어증속형 송풍기로 교체

○ 사업기간 : 2019.12.20. ~ 2020.11.14.

○ 총사업비 : 1,239,000,000원

○ 사업규모 : 1,239,000,000원, 기어증속형 송풍기 3대

2. 사업추진현황

○ 4처리장 송풍기개선 추진 계획-------‘19.11.

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰------------‘19.11.

○ 발주 및 계약체결-------------------------‘19.11.

○ 선금급 요청 및 지급---------------------‘20. 1. ~ 3.

○ 물품 제작 및 설치------------------------‘19.12. ~ ’20.10.

○ 공장검수 등---------------------------------‘20. 5. ~ 8.

○ 준공-------------------------------------------’20.11.

3. 예산집행 현황(03월 말 기준)

(단위 : 천원)

구 분	'20년 예산 (A)	전년도 이월액(B)	예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)	잔액 (C-D)	% (D/C)
합계		1,573,850	1,573,850	814,550	814,550
ㅇ국고		273,850	273,850	273,850	0	100
ㅇ지방비		1,300,000	1,300,000	540,700	814,550	41.5
- 시․도비
- 시․군비
ㅇ기타

4. 문제점

○ 조달발주시 민원제기로 인한 계약기간 지체

○ 수질영향으로 공사기간 지연우려

5. 조치계획

○ 한번 정전으로 각 기기 밸브 교체실시로 정전 최소화

○ 한번 설치시 20~30년을 사용하므로 공장검수 등 품질점검 철저

○ 시 운전기간 30일 이상 가동점검 및 운영방법 등 인수인계

○ 준공 후 설치 전·후 전력량 분석비교