휴일 및 야간연장작업 계획(`17.10.28토 ~ `17.11.03.금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
		주요작업내용	인원	장비
10월 28일 (토)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	-본선시점 1번작업구 폐기물반출(4대),1스판 기존 5호선 기초부 깨기 -정거장 시점 1스판 동바리 및 내부 거푸집 설치 -환기구#2 바닥 BK ,갱문거푸집 설치 -환기구#1 3단버팀 설치 -NTR 9~13번관 철판거푸집 설치,4~7번관 철근조립	직영:18명 구조물공:25명 NTR:10명 가시설:20명 토류공:6명	백호:10대 크람쉘:2대 덤프:10대 카고:3대 살수차:1대	공사 공무 측량	박원철 최윤식 권률 김동억 정금환 남종우 노현우	조기홍
10월 29일 (일)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	-본선시점 2번작업구 굴착 및 우수박스 받침 콘크리트 깨기,H-파일절단 -정거장 시점 1스판 동바리 및 내부 거푸집 설치 -환기구#2 바닥 BK, 갱문거푸집 설치 -환기구#1 3단버팀 설치 -NTR 9~13번관 철판거푸집 설치,4~7번관 철근조립	직영:18명 구조물공:22명 NTR:13명 가시설:20명 토류공:6명	백호:10대 크람쉘:2대 카고:3대 살수차:1대	공사 공무	최윤식 조귀연 조성만 유호진	박상대
10월 28일 (토)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~05:00)	- NTR 9~13번관 철판거푸집 설치,4~7번관 철근조립(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:3대	공사차장	최윤식	-
10월 29일 (일)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:3대	공사기사	조귀연	-
10월 30일 (월)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~ 21:00)(18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:3대	공사부장	장현준	-
10월 31일 (화)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~ 21:00)(18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:3대	공사부장	장현준	-
11월 01일 (수)	비개착구간,개착구간 야간((18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-
11월 02일 (목)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-
11월 03일 (금)	비개착구간,개착구간 야간(18:00~05:00)		직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-