휴일 및 야간연장작업 계획(`17.11.11토 ~ `17.11.17.금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
		주요작업내용	인원	장비
11월 11일 (토)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선시점 1번작업구 1단 버팀보 설치, 기존 구조물 깨기 - 정거장 시점 1span Slab 철근 조립 - 환기구#2 시점부 인버트 철근 조립 - 환기구#1 파이프루프 천공 및 주입 - NTR 8~13번관 철근 조립, 종점부 6~11번관 발판 설치	직영:18명 목공:25명 NTR:8명 가시설:20명 토류공:6명	백호:10대 크람쉘:2대 덤프:10대 카고:3대 살수차:1대	공사 공무	박원철 최윤식 김동억 유호진	조기홍
	비개착구간 개착구간 (야 간)	- 교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검	직영:2명		공사차장	최윤식	-
11월 12일 (일)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주 간)	- 본선시점 1번작업구 1단 버팀보 설치, 기존 구조물 깨기 - 정거장 시점 1span Slab 철근조립 및 거푸집 설치 - 환기구#2 시점부 인버트 철근 조립 - 환기구#1 파이프루프 천공 및 주입 - NTR 8~13번관 철근 조립, 종점부 6~11번관 발판 설치	직영:18명 목공:22명 NTR:8명 가시설:20명 토류공:6명	백호:10대 크람쉘:2대 카고:3대 살수차:1대	공사 공무 품질 안전	최윤식 김재정 한예석 김현식	박상대
	비개착구간 개착구간 (야 간)	- 교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검	직영:2명		공사차장	최윤식	-
11월 13일 (월)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- 교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검	직영:2명		공사부장	장현준	-
11월 14일 (화)	비개착구간 개착구간 (야 간)		직영:2명		공사부장	장현준	-
11월 15일 (수)	비개착구간 개착구간 (야 간)		직영:2명		공사부장	장현준	-
11월 16일 (목)	비개착구간 개착구간 (야 간)		직영:2명		공사부장	장현준	-
11월 17일 (금)	비개착구간 개착구간 (야 간)		직영:2명		공사부장	장현준	-