휴일 및 야간 연장작업 계획(`17.07.29토 ~ `17.08.04.금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
		주요작업내용	인원	장비
7월 29일 (토)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주·야간)	- 본선시점 1번 작업구 사토 구내운반, 토류판설치, 띠장 설치 - 정거장 시점 1span 기초 철근조립 - 정거장 종점 연암 BK작업 및 집토 - 환기구#2 갱문 con'c타설, 본선터널1구간 하반 굴진 - 환기구#1 지역난방관 매달기 작업 - NTR 4~7번관 방수철판 토압지지대 설치, 4~7번관 3차 그라우팅 - NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1번작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:18명 목공:14명 NTR:13명 가시설:20명 토류공:6명 ------------ 직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:10대 크람쉘:2대 덤프:10대 카고:3대 살수차:1대 ----------- 백호:3대	공사 공무 안전 ----------- 공사차장	강민선 김정삼 정금환 권현석 -------- 강민선	홍춘선 -------- /
7월 30일 (일)	본선구간 개착구간 비개착구간 (주·야간)	- 본선시점 1번작업구 사토 구내운반, 토류판설치, 띠장 설치 - 정거장 시점 1span 기초 철근조립 - 정거장 종점 연암 BK작업 및 집토 - 환기구#2 본선터널 1구간 하반 굴진 - 환기구#1 지역난방관 매달기 작업 - NTR 4~7번관 방수철판 토압지지대 설치, 4~7번관 3차 그라우팅 - NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1번작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:18명 목공:14명 NTR:13명 가시설:20명 토류공:6명 -------------- 직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:10대 크람쉘:2대 덤프:10대 카고:3대 살수차:1대 ----------- 백호:3대	품질 공사 공무 ----------- 공사차장	한예석 노기현 조귀연 조성만 -------- 김정삼	박상대 -------- /
7월 31일 (월)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1번작업구 하수박스BK작업(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:3대	공사부장	장현준	-
8월 01일 (화)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1,3 작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-
8월 02일 (수)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1,3 작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-
8월 03일 (목)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1,3 작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-
8월 04일 (금)	비개착구간 개착구간 (야 간)	- NTR 4~7번관 방수철판 설치 토압지지대 설치(18:00~05:00) - 본선시점 1,3 작업구 하수박스 BK작업(18:00~05:00)	직영:2명 가시설:2명 NTR:5명	백호:4대	공사부장	장현준	-