강일육교 보수공사

(교량안전과/동부 시설보수과)

□ 사업개요

○ 위치 : 강동구 하일동 360번지(고덕로)

○ 규모 : 강재도장 2,555㎡, 비계설치 1,387㎡

○ 기간 : 착공일 ～ 준공예정일 (’19.12월 현재 공정률 88%)

○ 총사업비 : 500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

○ 이월내역

- 예산과목 : 일반교량관리, 강일육교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ※'18사고이월액 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	500,000,000	479,240,000	301,007,000	198,293,000 (20,060,000)	700,000
공 사 비		469,040,000	469,040,000	469,040,000	290,807,000	178,233,000 ( - )	-
	도 급 비	469,040,000	469,040,000	469,040,000	290,807,000	178,233,000 ( - )	-
	관 급 비	-	-	-	-	-	-
용 역 비		10,900,000	10,900,000	10,200,000	10,200,000	- ( - )	700,000
이전비․기타		20,060,000	20,060,000	-	-	20,060,000 (20,060,000)	-

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

○ 이월사유

-특정공법 선정 심사위원회 개최 및 가시설 설계용역으로 6월 공사발주하게 되었으며, 자동차전용도로상 교량공사로 인해 도로관리청(한국도로공사)과의 주간 도로통제에 따른 이견으로 협의가 지연되어 공사착수가 9월로 지연 후속공정에 대한 절대공기가 부족

-잔여공종중 거더바닥 도장은 제한된 높이로 인해 외부기온을 차단할수 있는 비계를 설치할 수 없는 구간으로 도장 품질확보가 가능한 적정온도(5°C이상)를 유지할 수 없어 동절기 이후 2020년 4월에 시행토록 공기를 연장함

첨부  [서식2 작성요령]에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 강일육교 보수공사

□ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 4. 30

□ 예산과목 : 일반교량관리, 강일육교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

○ 도장 시험성적 수수료 및 외곽순환고속도로 통제에 따른 우회로 안내문 제작 및 언론 홍보비용

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		20,060,000
품질시험	강교도장 품질시험 수수료	3,000,000
홍 보 비	고속도로 통제에 따른 우회로 안내문 인쇄 및 홍보비 - 1식 × 17,060,000원	17,060,000

확 인 자 :      직) 시설보수과장      성명) 임 영 철  (인)

조 사 자 :      직)     시설 6급      성명) 이 평 주  (인)